K O M E N T Á Ř
k návrhu rozpočtu kapitálových výdajů OMI HMP na rok 2008 – 2018

Kapitola 0121

0016 - Centrální park JZM I 
Stavba Centrálního parku JZM I dotváří obytný komplex JZM I a spojuje ho v jeden celek s původní starou zástavbou obce Stodůlky. Od roku 1996, kdy byla stavba zahájena jsou již zrealizovány a dány do užívání 3 etapy. Pro realizaci zbývajících etap stavby je důležité v roce 2008 především uskutečnit výkupy pozemků a pokračovat ve vlastní realizaci dalších etap.

0186 - Kolektor Revoluční – Dlouhá
Tento kolektor je logickým propojením již dokončeného kolektoru Příkopy s kolektorem RNLS. Hlavní větev je napojena na kolektor Příkopy u Obecního domu, pokračuje pod náměstím Republiky a následně koresponduje ulici Revoluční s ukončením na nábřeží L. Svobody. Délka trasy o profilu 15-24 m2 je 968 bm + 422 bm délky přípojek. Projektová příprava stavby byla zahájena v roce 2002 a v původní DUR se předpokládalo s využitím stavební jámy objektu PALLADIUM na nám.Republiky. Od tohoto záměru bylo upuštěno a v současné době probíhá aktualizace stavebního povolení v ražené podobě v celé délce. S tím, že tato bude ukončena v r. 2007 a následně bude stavba připravena k zahájení realizace v roce 2008.

0187 - Kolektor Václavské náměstí
Propojuje již zrealizované a provozované kolektory Příkopy a Centrum I.A. Využívá dříve vybudované trasy pro kabelová vedení – trasa A a stávající větev s vodovodními řady – trasa C. Tyto trasy jsou kapacitně a technicky nevyhovující pro další rozvoj této oblasti, a proto dochází k jejich rekonstrukci a k posílení o další větev – trasa B. Rekonstrukce, resp. zkapacitnění trasy A byla provedena v roce 2003 a v letech 2008 – 2009 se předpokládá s realizací nové trasy B, jejíž délka je 272 m + 58 m délky přípojek. Součástí stavby je posílení zásobování pitnou vodou centrální oblasti HMP prostřednictvím vodojemů BRUSKA, VYHLÍDKY a VYPICH. Investorem trasy C, jejíž výstavba proběhne v letech 2007 – 2008,  je budoucí správce KOLEKTORY Praha a.s.

0209 - Byty Beranka
Jedná se o výstavbu cca 520 bytových jednotek (počet bude upřesněn po ukončení územního řízení) v 18-ti bytových objektech, potřebné stavební úpravy komunikace Na Berance, výstavbu okružní křižovatky v místě stávající nevyhovující křižovatky ulic Bořetická x Náchodská, výstavbu a rekonstrukci inženýrských sítí včetně místních komunikací a parkovacích stání. Podmiňující investicí je výstavba propojovací komunikace mezi stávajícími rychlostními komunikacemi a likvidace dešťových vod v dané lokalitě. V roce 2005 byla zahájena investorská příprava této stavby a její koordinace s dalšími stavbami v MČ Praha 22. V  11/2006 nabylo právní moci územní rozhodnutí a následně byla zahájena příprava před podáním žádosti o vydání stavebního povolení.Ukončení přípravy se předpokládá v roce 2007.

0221 - Chráněné byty Ďáblice
Tato stavba obsahuje výstavbu polyfunkčního domu s 36 bytovými jednotkami a nebytovými prostory pro potřebu DPS. Součástí stavby je zřízení potřebné technické infrastruktury, zpevněných ploch pro dopravu v klidu a propojení komunikace Prácheňská. Podmiňující investicí bylo odstranění stávajícího objektu č.p.669  na pozemku č.parc.606 v k.ú.Ďáblice. V roce 2005 byla ukončena investorská příprava, ve II. pololetí 2007 se předpokládá zahájení stavby.

0238 - Bytové domy Čakovice II
Bytové domy - (dva kolmo spojené objekty podél kom. Cukrovarská a U Stadionu) zahrnují výstavbu 73 bytů. Obj. A- 5ti podlažní  57 bytů (8 bytů bezbariérových) a obj. B-4podlažní  16 bytů. V polozapuštěném suterénu bude 72 parkovacích stání. V rohové části je řešena trafostanice.Vybavení objektu obsahuje sklípky, sušárnu, kočárkárnu, místnost pro úklid a údržbu. Součástí stavby jsou dále objekty inženýrských sítí nutných pro provoz bytového objektu. Stavba je projektově a investorsky připravena na zahájení v r. 2007, zbývá zhotovit dokumentaci pro výběr zhotovitele a zajistit výběrové řízení. Návrh rozpočtu na r. 2008 představuje náklady na zahájení stavby. Realizace stavby by umožnila řešit bytovou situaci jak hl.m.Prahy tak Městské části Prahy 19, zejména pro sociálně slabší vrstvu obyvatel.

0243 - Byty Šeberov
Jedná se o výstavbu tří bytových domů s 21 bytovými jednotkami a odpovídající technické infrastruktury. Součástí stavby je objekt s garážovými stáními. Stavba byla zahájena v roce 2005 po ukončení záchranného archeologického průzkumu a její ukončení se předpokládá v 08/2007.

4323 - Výjezd Horní Měcholupy-Petrovice
Na základě požadavku ÚMČ Praha 15 bude realizováno přemostění z bytového komplexu stavby H. Měcholupy-Petrovice do ul. Milánská. Přemostění je nutné pro zprovoznění garáží z objektu „E“ bytového komplexu a dále zajištění bezproblémového chodu dopravy v centrální části H. Měcholup, kterým se rozmělní doprava v obci. Územní rozhodnutí bylo vydáno 14.6.2006 s nabytím právní moci 18.7.2006. Stavební povolení pozastaveno do doby odkoupení pozemku č. 491/42 k.ú. Měcholupy s majitelem – je řešeno na úrovni zastupitelstva HMP. Předpoklad vydání stavebního povolení 10/07. Zahájení stavby 11/07 a dokončení v r. 2008. Převedení finančních prostředků na tuto stavbu umožní zrealizovat tento výjezd, který značně zklidní dopravní ruch a bezpečnost v obytném komplexu.

4502 - Park U Čeňků
Tato stavba je ve stádiu přípravy.  Řeší vytvoření parku celoměstského významu s mnohostranným využitím pro nejrůznější sportovní aktivity a rovněž pro chvíle odpočinku a relaxace v klidu přírody. Rozkládá se na území více městských částí. (Horní Počernice, Dolní Počernice, Černý Most, Hostovice)  V současnosti je projednávána studie architektonické kanceláře Linhart Architekts zpracovaná na objednávku URM. Projednávání studie není dokončeno. Celkové náklady na realizaci tohoto díla jsou odhadnuty na 400 mil. Kč. Pro dokončení projektové přípravy a zahájení realizace této stavby se navrhuje vyčlenit v rozpočtu kapitálových výdajů pro rok 2008 částku 30 mil. Kč.

4679 - Maniny-revitalizace Rohanského ostrova
Cílem stavby je snížením úrovně terénu a realizací dolního obtokového ramene Vltavy snížit hladinu Vltavy při povodňových událostech. V návaznosti na terénní úpravy bude prostor Rohanského ostrova mezi stávající protipovodňovou hrází a korytem Vltavy upraven na oblast klidu a rekreace pro obyvatele Prahy. Při přípravě stavby je respektován požadavek dočasného provozu betonárny TBG Metrostav, s.r.o. a s realizací stavby se proto počítá ve dvou po sobě následujících etapách. Po realizaci první etapy bude upravené území tvořit ucelenou část s novým obtokovým korytem a parkovou úpravou směrem k Libeňskému mostu. Na tuto první etapu úprav Rohanského ostrova bude navazovat etapa druhá, která bude zahrnovat úpravy terénu zbývající části Rohanského ostrova, tedy prostor od stávajícího areálu betonárny TBG Metrostav s.r.o. směrem ke Štvanici. Tato druhá etapa  bude realizována po rozhodnutí o vymístění betonárny. V rámci stavby budou provedeny přeložky inženýrských sítí zejména v okolí Libeňského mostu, a demolice stávajících objektů. Hlavní stavební práce představují rozsáhlé zemní práce, kdy je kladen důraz na maximální využití vodní dopravy pro odvoz vytěžených materiálů. Stavba je navržena tak, aby bylo možné ve spolupráci s Povodím Vltavy s.p. podat stavbu žádost o dotace Ministerstva zemědělství v rámci programu 129 120 - Prevence před povodněmi. Návrh rozpočtu na rok 2008 představuje náklady na pokračování investorské a projektové přípravy stavby.

5407 - Maniny – příprava území
Stavba řeší přípravu území v oblasti Rohanského ostrova mezi komunikací Pobřežní III. a protipovodňovou ochranou v úseku vymezeném prodloužením ul. Šaldova a rampou Libeňského mostu – ul. Štorchova pro budoucí využití území v souladu se schváleným územním plánem hl. m. Prahy a obsahuje zejména demolice stávajících objektů, vymístění inženýrských sítí a jejich přeložky a terénní úpravy. V 07/2007 bude  stavba zahájena  středovou částí – tj. hrubými  terénními úpravami. Potřeba r. 2008  představuje náklady na  demolice  stávajících objektů, výkupy, vymístění inženýrských  sítí a terénní  úpravy  dalších částí a inženýrskou činnost při realizaci stavby.

7026 - Bytový soubor Hloubětín
Jedná se o lokalitu pro cca 120 bytů. Pro lokalitu byla projednána urbanistická studie a následně byla provedena částečná změna územního plánu, která potvrzuje vhodnost byt. výstavby v této lokalitě. Pro bytový soubor probíhají přípravné investorské a inženýrské činnosti, které budou pokračovat v r. 2008 vč. projekčních prací (DUR).
7496 - Kolektor Centrum – Smíchov
Kolektor 2.kategorie, jehož trasa bude spojovat lokality Kateřinská, Ke  Karlovu na pravém břehu Vltavy a lokalitu ohraničenou ul.Plzeňská, Na Zatlance a Kováků na levém břehu Vltavy. Tato trasa je podporována správci sítí, které budou uloženy v kolekturu a ze strany PRE a.s. je reálná finanční spoluúčast na realizaci stavby. V r. 2004 byla zahájena projektová příprava na dokumentaci k územnímu řízení a v 01/2005 bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby. V 05/2007 nabylo právní moci stavební povolení a ve II. pololetí 2007 se předpokládá se zahájením výběrového řízení na zhotovitele této stavby.

7497 - Pod Čimickým hájem
Jedná se o lokalitu cca 300 bytů. V roce 2008 budou probíhat další projektové činnosti a práce na projektové dokumentaci v úrovni dokumentace pro stavební povolení vč. potřebné inženýrské činnosti.

7501 - Vysočany - Ocelářská
Jedná se o lokalitu pro cca 200 bytů. Pro obytný soubor byl proveden orientační propočet stavebních nákladů s využitím dosavadních výsledků a dokumentů investorské přípravy, zejména zastavovací studie území, a činí 495 000 tis.Kč. V současnosti probíhá příprava stavby k územnímu řízení.    Na r. 2008  jsou navrženy finanční  prostředky ve výši 5 000 tis. Kč na dokončení územního řízení a  zpracování DSP.

8262 - JM I ukončení centrálního parku
Jedná se o prostor od stanice metra Opatov až ke konečné stanici metra Háje. Je to nevyužitý prostor mezi bytovými objekty nad tunelem metra, který bude využit jako sportovně odpočinková zóna pro obyvatele JM I. Příprava stavby byla zajišťována Městskou částí Praha 11 a v srpnu r. 2006 delimitována na OMI MHMP. Stavba bude realizována po etapách ve vazbě na možnosti získání potřebných pozemků ať již výkupy nebo směnou. Návrh rozpočtu na rok 2008 vychází z předpokladu realizace 1. části stavby včetně  projektové přípravy.

8263 -  Praha-14, Aloisov
Uvedená stavba byla dokončena dle uzavřené SOD v r. 2006. Pro úplné dokončení TV v této oblasti je však nutné realizovat i zbývající odbočující části ul. Tálinské a ul. Lánskou. Tyto části nemohly být prováděny současně s probíhající stavbou, neboť musela být zachována potřebná dopravní obslužnost okolní zástavby. Provedení této TV v uvedené oblasti je navrhováno na r. 2008, investiční náklad činí 9 000 tis. Kč. O tento náklad je zvýšen i celkový inv. náklad stavby (na 53 532 tis. Kč).

8264 - Pobřežní III. – infrastruktura  
Předmětem stavby je výstavba poduličních sítí v profilu nové pozemní komunikace.  Jedná se o  výstavbu nových  kanalizačních  stok, vodovodních řadů,  teplovodu, plynovodu, kabelovodu  a ostatních poduličních sítí. Rozsah stavby  je ohraničen na západě ul. Šaldovou a na východě prodloužením ul. Za Invalidovnou a začátkem úprav Vostářovy ul. (v návaznosti na akci „Rekonstrukce souboru mostních objektů a komunikací Libeňský most“) a ul. Švábky (propojení přes prostor Pražské strojírny a.s. a do křižovatky Sokolovská). Technické parametry: 1 284 m celková délka stavby, 34 m šířka uličního profilu. Stavba  Pobřežní III. - infrastruktura  je součástí systému komunikací navazujících na Městský okruh v prostoru Balabenky, zajišťujících jeho propojení s centrem města. Na realizaci tohoto systému závisí možnosti budoucího využití území Dolní Libně, Invalidovny, Rohanského ostrova a dalších přilehlých prostorů  vč. kvality jejich dopravní obsluhy.  Realizace páteřních poduličních sítí  bude umožňovat napojení přilehlých území na celoměstský systém inženýrských sítí. Dále dokončení přeložky stávajícího proplachovacího kanálu od jeho provizorního ukončení až do Libeňských doků. V návrhu se počítá s výstavbou kanalizací do obou ramen Libeňských doků a s výstavbou předčisticí nádrže. Finanční požadavky roku 2008 budou použity  na zajištění dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) vč. projednání, inženýrskou činnost  při přípravě a realizaci stavby a samotnou realizaci stavby.
8265 - Pobřežní IV. – infrastruktura pro jižní a severní obchvat
Předmětem souboru staveb  je novostavba  pozemních komunikací  Pobřežní IV. (severní a jižní obchvat) včetně vyvolaných přeložek  inženýrských síti. „Komunikace jižního obchvatu“ navazuje na stavbu Pobřežní III. v prostoru  křižovatky Sokolovská – Švábky - Pod plynojemem a končí v prostoru křižovatky  Balabenka. „Pobřežní IV. severní obchvat“ je napojena u Libeňského mostu  do ul. Voctářova a končí rovněž v prostoru křižovatky Balabenka. Potřeba finančních prostředků  roku 2008  je    na zajištění a  projednání dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR), zajištění územního rozhodnutí, inženýrskou činnost, výkupy pozemků, zajištění zpracování DSP,  její projednání a zajištění stavebního povolení.

8266 - Podchod vítězné náměstí
V průběhu projednávání této stavby přetrvávala rozdílná koncepční stanoviska k celému řešení stavby mezi ÚRM hl.m.Prahy a MČ Praha 6 na konečnou úpravu náměstí. Z tohoto titulu byla dopisem OMI ze dne 22.2.2007 příprava stavby dočasně pozastavena do doby vyjasnění investičních záměrů v dané lokalitě a celkové koncepce rozvoje dopravy MHMP. Potřeba finančních prostředků roku 2008 je pouze na přípravu akce, tj. zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.

8267 - Radotín – rekreační zóna
Uvedená stavba byla zahájena v r. 2006. Stavba zahrnuje přípravu území pro budoucí velkou rekreační zónu celoměstského významu na soutoku Vltavy a Berounky. S ohledem na zásoby štěrkopísků v místě budoucích jezer je potřebné stavbu časově koordinovat s výstavbou přilehlého silničního okruhu (investor ŘSD). V r. 2007 jsou v rámci etapy 0001 prováděny projektová a inženýrská činnosti do úrovně DUR a dále výkupy nemovitostí a demolice staveb ve východní části jezera č. 3, která navazuje na uvedenou silničního stavbu. V roce 2008 budou v rámci etapy 0002 tyto činnosti prováděny i pro zbývající západní část jezera včetně ochranného přístavu, bude zpracována dokumentace pro územní řízení a bude prováděna navazující inženýrská činnost.

8268 - Rokytka – rozvoj území
Zájmová oblast je vymezena ul. Freyova, Kolbenova, Poděbradská a Kbelská převážně na území bývalých průmyslových podniků. V pásu podél Rokytky od Hořejšího rybníka ke křížení s ul. Freyovou bude mít oblast parkovou úpravu neformální přirozené skladby rostlin a stromů. Část území pak parkovou úpravu s okrasnou výsadbou. Kromě pěších a cyklistických stezek zde budou různá zařízení pro sport (ragby, tenis, volejbal atd.), začleněn jezdecký klub,  sociální zázemí atd. Rovněž se počítá s umístěním naučné stezky, lapidaria a letního amfiteátru pro možnost koncertů pod širým nebem. Cyklostezka v délce 3150 m s živičným povrchem obsahuje rekonstrukci dvou bývalých železničních mostů přes ul. Freyovu a Poděbradskou, nový most přes ul. Ocelářskou, nové přemostění ul.  U Elektry a dvě lávky nad průjezdy k bytovým objektům. Součástí stavby jsou i tři schodiště. Podél celé trasy bude nově položeno veřejné osvětlení. Předpoklad zahájení cyklostezky je v 09/07. Na r. 2008 jsou nárokovány finanční prostředky na dokončení cyklostezky a výkupy pozemků pro další etapy.

8613 - Bytové domy Dolní Počernice-Jih
Jedná se o výstavbu 310 bytových jednotek v jednotlivých bytových domech včetně technické infrastruktury a garážových stání v lokalitě MČ Praha – Dolní Počernice podél komunikace v ulici Českobrodská na parc.č.1493. Součástí stavby je rekonstrukce stávající dešťové kanalizace v ulici Národních hrdinů. V roce 2004 byla zahájena projektová příprava a ve II. pololetí 2007 bude vydáno územní rozhodnutí na tuto stavbu. Se zahájením prací na výstavbu bytových domů se předpokládá v r. 2008.

8614 - Byty Sobín
Stavba spočívá ze 140 bytových jednotek situovaných ve „viladomech“ na katastrálním území Sobín v MČ Praha – Zličín. Součástí stavby je odpovídající technická infrastruktura včetně garážových a parkovacích stání. V roce 2005 byla zahájena projektová příprava stavby, probíhá koordinace se stavbou TV Zličín. Z důvodu nesouhlasného stanoviska zastupitelstva MČ Praha Zličín s umístěním stavby dochází ke skluzu zajištění investorské přípravy. V roce 2008 se předpokládá vydání územního rozhodnutí a vlastní zahájení stavby v roce 2009.

9276 - TV Chabry stavba 50 
Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu, rozestavěnou od roku 1991 která je součástí tzv. „Jinočanské spojky", sběrné komunikace která propojuje ul. Jeremiášovu s expresním okruhem. Stavba TV Chaby 50 zahrnuje úsek mezi ul. Jeremiášovou a ulicí K Třebonicům s přemostěním Dalejského potoka. První část komunikace Jinočanská je v současné době ve vysoké fázi rozestavěnosti. V roce 2008 je třeba především uskutečnit výkup zbývajících pozemků a realizovat přípravu území, přeložky stávajících inženýrských sítí, výstavbu komunikací vč. přemostění Dalejského potoka a vodohospodářské objekty.

9646 - Kolektor C I A
Stavba kolektoru CI.A byla zahájena v roce 1994. V té době se uvažovalo pouze s realizací trasy Jindřišská. Výstavba této trasy byla ukončena a následně zkolaudována v souladu s vydaným stavebním polením v 04/1999. V průběhu výstavby této trasy bylo rozhodnuto o rozšíření původního záměru o trasu kolektoru v ulici Vodičkova včetně odbočných větví v přilehlých ulicích. Důvodem byl rozvoj výstavby a kritický stav infrastruktury v této lokalitě. V roce 2002 a 2003 byly provedeny podmiňující investice – rekonstrukce TT, úniková štola do PŘS a další. Výstavba kolektoru, jehož celková délka trasy včetně odbočných větví je 1,287 km byla zahájena ve 12/2003 a plynule pokračovala až do 01/2005, kdy došlo k havárii na stávajícím vodovodním řadu v ulici Vodičkova. Tato skutečnost potvrdila kritický stav infrastruktury v centrální oblasti HMP a nutnost její obnovy. V současné době je stavba vlastního kolektoru před dokončením. Po následné kolaudaci v 12/2007 budou v roce 2008 realizovány práce spojené s vyzbrojováním kolektoru a uvedením kolektoru do provozu.

9812 - Na Pomezí, byty + TI
Předmětem stavby je zprůjezdnění komunikace Na pomezí na Praze 5 spočívající ve vybudování opěrné a zárubní zdi, včetně nové konstrukce vozovky a sítí. Původní záměr vybudovat kompletní TV k obytnému souboru nebude realizován. Stavba je ve fázi projednání aktualizované projektové dokumentace pro územní řízení a majetkoprávního vypořádání. Navrhované finanční prostředky na rok 2008 umožní dokončit projektovou přípravu stavby a zajistit výstavbu.

0000 - Centrální park Stodůlky
Dobudování sportovně rekreačního areálu centrálního parku o aktivity pro volný čas. Letní dráhy pro tobogány a skluzavky koupaliště s volnými plochami pro odpočinek doplněné o zábavní vodní hry. Vybudování výtahu pro kola s použitím i pro zimní sporty a pro tobogány. V příštím roce se jedná o studie a DUR výběr zhotovitele a mandatáře.

0000 - Maniny oddychová zóna
Po revitalizaci ramene Vltavy, která je předmětem investiční aktivity Povodí Vltavy je nutno rekultivovat a upravit prostory v okolí nového resp. revitalizovaného toku jako odpočinkovou zónu s možností zatápění při zvýšených průtocích ve Vltavě. V roce 2008 se jedná o studie a DUR výběr zhotovitele a mandatáře.

0000 - MMB Dubeč
Jedná se o výstavbu bytového domu s 27  bytovými jednotkami a s nezbytnými prostorami pro umístění služeb. Součástí stavby je začlenění budovy do centrální oblasti MČ Praha Dubeč. Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí a v r. 2007 se předpokládá s ukončením investorské přípravy. Zahájení realizace stavby se předpokládá v I. čtvrtletí r. 2008.
 
0000 - Pobřežní VI. – zklidnění Sokolovské
Na základě realizace stavby Pobřežní III. -infrastruktura byla vyvolána úprava zklidnění ul.Sokolovské spočívající v dopravním řešení oblasti se širšími vztahy vč. architektonického a technického řešení. Řešení musí zajišťovat dopravní obslužnost přilehlých oblastí Karlína a Invalidovny i při uzavření některých úseků Sokolovské a nahrazení jejich vozovek a zelení. Potřeba  finančních prostředků na r. 2008 představuje  náklady na zajištění  zpracování  a projednání studií.

0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy
Stavba je rozdělena na následující etapy:
- etapa 0001 – Staré Město a Josefov
- etapa 0002 – Malá Strana a Kampa 
- etapa 0003 – Libeň a Karlín
- etapa 0004 – Holešovice – Stromovka
- etapa 0005 – Výtoň, Podolí a Smíchov
- etapa 0006 – Zbraslav a Radotín
- etapa 0007 – Troja
- etapa 0008 – Modřany
Etapy jsou dále členěny na různý počet částí.
Předpokládané kapacity:
ochrana územním plánem stanovených částí Prahy na úroveň průtoku  cca QN=5300 m3s-1 (odpovídá hladině povodně ze srpna 2002 přepočtené pro předpoklad, že všechny stanovené části budou chráněny vybudovanými protipovodňovými opatřeními), s bezpečnostní rezervou 30 cm
Účel stavby:
V roce 1997 byla zahájena příprava investice, která má sloužit k ochraně Prahy proti škodám působeným povodněmi na historických budovách, majetku i zdraví a životech obyvatel. Pomocí mobilních protipovodňových bariér, opatření na kanalizační síti i stálých protipovodňových hrází má být zabráněno vzduté vodě při povodni, aby se vylila mimo koryto Vltavy a Berounky do území města, kde by mohla působit škody, v celé délce od jejich vtoku do města až k hranici města, kde je Vltava opouští.  
Na základě zkušenosti z povodně v srpnu 2002 byla protipovodňová opatření na většině úseků oproti původnímu řešení upravena a jsou nyní navržena tak, aby ochránila město před účinky srovnatelných povodní na Vltavě o průtoku QN=5300 m3s-1, s bezpečnostní rezervou 30 cm, pouze území městské části Zbraslav bude chráněno na současnou úroveň hladiny Q100 s bezpečnostní rezervou 30 cm.
Návrh rozpočtu na rok 2008 předpokládá pokračování v realizaci částí staveb zahájených v roce 2007, tj. etapy 0006 Zbraslav – Radotín, částí 12 Zbraslav – opatření proti vnitřním vodám, 13 Zbraslav – sever, 14 Zbraslav – jih a části 21 Radotín a etapy 0007 Troja, částí 14 Troja – městský okruh,  15 Troja – západ, 16 Troja Pod Havránkou, 17 Troja – opatření na kanalizaci a 21 Zkapacitnění Šáreckého potoka. Dále se předpokládá počátkem roku 2008 zahájení u etapy 0006 Zbraslav – Radotín, částí 26 Radotín, ul. Věštínská, U Jankovky a 22 Velká Chuchle, a většina z nich bude dokončena v roce 2008. Výjimkou je část 22 etapy 0006 Velké Chuchle - včetně úpravy potoka Vrutice, která bude ukončena v roce 2009, a část 14 etapy 0007 Troja – městský okruh, kde některé násypy protipovodňové hráze mohou být dokončeny až po realizaci prací na městském okruhu a dokončení této části je tak plánováno až na rok 2011. Pro etapy 0006 a 0007, proběhnou nezbytné výkupy dotčených pozemků, u kterých vlastníci nepřistoupí na uzavření věcného břemena. Oproti původním rozpočtovým nákladům stavby dochází k navýšení o cca 580 mil. Kč. Je to důsledkem zejména dodatečného zařazení požadavku na úpravu potoka Vrutice do 0006, části 22 Velká Chuchle, s celkovými náklady cca 100 mil. Kč, upřesnění rozsahu 0006, části 31 Lipence, s jejíž realizací se počítá až v letech 2009 – 2010, s náklady cca 200 mil. Kč a dále navýšení celkových nákladů na 0007 Troja, kde bylo třeba dodatečně změnit trasu i technické řešení v důsledku požadavků orgánů územního rozvoje, památkové péče a místních částí. Oproti původně předpokládanému termínu dokončení v roce 2008, dochází k posunu na rok 2011, zejména v důsledku možnosti dokončení prací v Troji v návaznosti na harmonogram výstavby městského okruhu a rovněž vazby prací v Lipencích a Dolních Černošicích na další záměry výstavby komunikačního systému.

0050 - TV Slivenec
Stavba zahrnuje komplexní výstavbu technické vybavenosti v MČ Praha – Slivenec a to včetně k.ú.Holyně. V současné době je ukončena etapa 0001 Kanalizace + ČOV Holyně, etapa 0002 - Komunikace Holyně, etapa 0006 - Kanalizační přivaděč Velká Chuchle a etapa 0008 Kanalizace střed. Obsah těchto etap plně vystihuje jejich název. V roce 2006 byla ukončena rekonstrukce komunikace v ulici Za Knotkem (etapa 0007) a 3.část etapy 0003 Kanalizace Slivenec. Počínaje rokem 2007 zbývá k dokončení výstavba komunikace U Náhonu (k.ú.Holyně) – etapa 0007 - Komunikace U Náhonu, z cca 60% výstavba splaškové kanalizace a celoplošná rekonstrukce místních komunikací a chodníků – etapa 0005 -  Komunikace Slivenec. Ve II. pololetí roku  2007 bude zahájena výstavba splaškové kanalizace v lokalitě ulice Ke Smíchovu jejíž dokončení se předpokládá v r. 2008. V tomto roce se předpokládá se zahájením odkanalizování území směrem ke k.ú. Lochkov.

0085 - TV Řepy
Jedná se o  nové vybudování technické vybavenosti – vodovodní a kanalizační sítě vč.komunikací na území starých Řep. 
Technické parametry: délka vodovodu cca 2 750 m ( D 160 a D 100 z polyethylenu IPE), délka kanalizace 2 790 m (kameninové trouby DN 3 s integrovanými spoji), délka následné opravy komunikací a chodníků cca 3 420 m (tj. 17 100 m2  komunikací a 8 600 m2 chodníků). Finanční požadavky roku 2008 budou použity na dokončení etapy 0004 a zahájení etapy 0005 stavby.

0088 - TV Libuš
Součástí stavby je rekonstrukce místních komunikací včetně výstavby chodníků v k.ú.Libuš, výstavba kanalizačních řadů a rekonstrukce místních komunikací v k.ú.Písnice. Samostatnou je etapa 0010 - Komunikace Libušská, jejímž obsahem je úplná rekonstrukce této komunikace a to včetně výstavby kanalizace a okružní křižovatky s Kunratickou spojkou. První část této etapy je zařazena do 2.Výzvy programu JPD 2 – stavba č.1017 Rek. TV v MČ P-Libuš. Celá stavba je členěna do etapy 0001 – 0014, z nichž je k 06/2006 ukončena etapa 0001 - Odkanalizování Písnice I, etapa 0002 - Komunikace Libuš I, etapa 0003 - Komunikace Libuš II, etapa 0004 - Kanalizace Libuš, etapa 0005 - Odkanalizování Písnice II, etapa 0006 - Ke Kašně – kanalizace, etapa 0008 - Komunikace Písnice I a etapa 0012 - DUN Písnice. V roce 2007 byla ukončena, s přispěním fondů EU, rekonstrukce komunikace v ulici Libušská včetně etapy 0014 - Nové Dvory a rekonstrukce místních komunikací, jež jsou náplní etapy 0009 – Komunikace IV. V roce 2008 se předpokládá další rekonstrukce místních komunikací, viz. etapa 0007 – Komunikace Libuš III a zahájení výstavby splaškové kanalizace v lokalitě ulice Dobronická (etapa 0013 – Dobronická). Dále bude v roce 2008 dokončena výstavba vodovodního řadu v lokalitě Písnické zahrady a napojení komunikace Libušská na připravovanou okružní křižovatku Libušská – Kunratická spojka.

0092 - TV Zličín
Stavba je členěna do etapy 0001 – 0012, z nichž je ukončena etapa 0001 Leskovecká – komunikace, 0002 Nedašovská, 0003 Zličín – komunikace, 0004 Hrozenkovská, 0006 Vodo-vod Sobín, 0007 Za Radostí, 1.a 3.část etapy 0008 Komunikace Zličín a 0009 Do Zahrádek. Svým rozsahem se jedná o cca 60% celkové výstavby TV v této MČ. V roce 2007 bude ukončena první a druhá část rekonstrukce komunikace v ulici Hostivická – etapa 0005 – Sobín – komunikace. V roce 2008 se předpokládá s ukončením respektive s třetí částí rekonstrukce této komunikace – etapa 0013 – Hostivická a následně s rekonstrukcí místních komunikací v k.ú. Sobín – etapa 0010 – Komunikace Sobín.

0093 - TV Kbely
Před zahájením této stavby v roce 1996 byla provedena obnova místních komunikací v této MČ v minimálním rozsahu. Po tomto roce se dokončila výstavba vodohospodářské infrastruktury v lokalitě ulice Toužimská – etapa 0001 - IS Kbely a v části Nouzov – etapa 0003 - Kanalizace Nouzov. Rekonstrukce komunikací probíhá plynule a v současné době je ukončena z cca 75%. Ukončena je etapa 0002 - Komunikace Rokytnická, Sojovická, 0004 - Komunikace Kbely I, 0005 - Uličky (včetně vodohospodářské infrastruktury), 0006 -Komunikace Kbely II, 0007 - Komunikace Nouzov, 0011 - Nymburská, 0012 - Komunikace Severovýchod, etapa 0014 - Katusická. V roce 2007 byla ukončena rekonstrukce komunikace v ulici Hůlkova a Žacléřská, následně byla v tomto roce zahájena rekonstrukce a dostavba infrastruktury v ulicích Huntířovská, Železnobrodská a Bakovská, jejichž ukončení se předpokládá ve IV. čtvrtletí tohoto roku. V roce 2008 je prioritou MČ Praha 19, rekonstrukce komunikace v ulici Toužimská a Semilská – etapa 0017 – Semilská.

0100 - TV Zbraslav
Výstavba technické infrastruktury, resp. TV bude v roce 2007 ukončena z cca 60%. Stavba je členěna do etapy 0001 – 0009, z nichž je ukončena pouze etapa 0001 - Žitavského, 0006 -Pilotní projekt a etapa 0007 - Komunikace U Národní galerie. Ostatní etapy jsou rozpracovány nebo na nich probíhá projekční příprava. V roce 2008 se předpokládá ukončení etapy 0008 - Komunikace Žitavského a výstavba vodohospodářské infrastruktury v oblasti Na Závisti – etapa 0003 - Kanalizace Zbraslav, 5. část. Prioritou se zahajovaných staveb je rekonstrukce komunikací v ulici Pod Urnovým hájem, Podéšťova, Pod Havlínem, Zdeňky Nyplové, Výtvarnická, Žofie Podlipské a Pod Sirénou – vše etapa 0004 - Komunikace Zbraslav a dokončení rekonstrukce komunikace Žitavského – etapa 0008. V roce 2007 byla založena stavba č. 0000 – TV Lahovičky, do které z této stavby byla převedena etapa 0002 – Kanalizace Lahovičky.

0101 - TV Újezd
Ukončena je výstavba splaškové kanalizace v MČ Praha – Újezd (etapa 0003 - IS Újezd), dále etapa 0005 - ČOV Újezd a rekonstrukce komunikace v ulici Formanská (etapa 0001 a 0002). V roce 2007 byla ukončena výstavba dešťové kanalizace a rekonstrukce komunikace v ulici Formanská v části k dálnici D1, dále byla zahájena rekonstrukce místních komunikací, jejichž podstatná část přejde do roku 2008 – etapa 0004 – Komunikace a etapa 0007 – Komunikace II. V roce 2008 se předpokládá s ukončením výstavby protihlukových valů – I. a II. část (etapa 0006 – Zemní valy). 

0102 - TV Koloděje
Do doby zpracování generelu odvodnění této městské části byly pozastaveny projektové práce na celoplošné rekonstrukci komunikací a výstavbě chodníků – etapa 0003 - Komunikace ve staré zástavbě a 0004 - Komunikace K Dubči. V roce 2006 byla po schválení generelu obnovena projekční a investorská příprava etapy 0003 - Komunikace ve staré zástavbě a 0004 - Komunikace K Dubči. V roce 2007 byla ukončena likvidace kořenových polí staré ČOV a revitalizace daného území – etapa 0005 a pokračovala výstavba tzv. „chodníkového programu“. V r. 2008 se předpokládá zahájení celoplošné rekonstrukce místních komunikací a výstavba dešťové kanalizace – etapa 0003 a 0004.

0106 - TV Šeberov
Výstavba technické vybavenosti v k.ú. Šeberov je ukončena mimo výstavby komunikace v ulici V Ladech II s napojením na Kunratickou spojku – etapa 0004. Tato realizace se předpokládá v roce 2008. V roce 2007 byla ukončena rekonstrukce komunikace v ulici K Safině – etapa 0005 – Komunikace Hrnčíře a I. část rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury v k.ú. Hrnčíře. V roce 2008 bude tato rekonstrukce ukončena a následně bude pokračovat rekonstrukce místních komunikací v této lokalitě.

0113 - TV Lipence
V období let 1999 – 2007 byla provedena výstavba technické vybavenosti v této MČ v rozsahu cca 55% z celkového množství. Dokončena byla etapa 0001 - Komunikace I, 0002 - Komunikace II, 0003 - Lipany, 0004 - Jílovišťská, 0005 - Ke Kravínu a 1.část etapy 0006 – Komunikace III. Ve II. pololetí 2007 se předpokládá zahájení výběrového řízení na zhotovitele etapy 0007 – Komunikace TSK a následně v r. 2008 rekonstrukce komunikace v ulici Černošická a Josefa Houdka, jež jsou náplní této etapy.

0114 - TV Stodůlky
Výstavba TV v okrajových lokalitách MČ Praha 13 je rozdělena do 5 etap, z nichž je ukončena etapa 0001 - Pod Viaduktem, 0002 - Ke Koh-i-nooru a 0005 - IS ostatní, tj. cca 60% předpokládaného rozsahu. V roce 2007 se předpokládá ukončení investorské přípravy etapy 0003 – Vstavačova a následně realizace této etapy v roce 2008.

0117 - TV Zbuzanská
Jedná se o rekonstrukci a dostavbu infrastruktury, zejména splaškové kanalizace v oblasti Jivin-Praha 6 mezi ulicemi Zbuzanská, Hořelická, Unhošťská a Netřebská. Stavba má vydané územní rozhodnutí s předpokladem ukončení projektové přípravy do konce roku 2007. Na základě upřesnění vycházející z projektové přípravy se předpokládané investiční náklady stavby zvýšily o 29,25 mil.Kč. Navrhované finanční prostředky na rok 2008 umožní realizovat stavební práce tak, aby stavba byla v tomto roce dokončena.

0132 - TV Točná
Jedná se o vybudováni chybějící technické infrastruktury v Točné a Cholupicích – splašková a dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, komunikace a chodníky. Kompletní výstavba infrastruktury je rozdělena do třech etap, přičemž z etapy 0001 IS Cholupice byl pro urychlení zahájení stavebních prací vyčleněn výtlak z Cholupic do Písnice jehož 1. část je dokončena a 2. část má termín dokončení v roce 2007. Navrhované finanční prostředky na rok 2008 umožní dokončit přípravu celé etapy 0001 včetně realizace její podstatné části a dále umožní  dokončit projektovou přípravu na etapu 0002 a etapu 0003 stavby.

0133 - TV Ďáblice
Finančně nejnáročnější investicí této stavby je řešení generelu odvodnění této MČ – etapa 0005 Odvodnění Ďáblic. Se zahájením výstavby se předpokládá v roce 2009. V roce 2008 budce realizována výstavba infrastruktury v lokalitě ulic Na Blatech a U červeného mlýnku (etapa 0004 – Komunikace Na Blatech) a dále bude provedena výstavba prodloužení komunikace v ulici Kučerové (včetně výstavby TI).
0134 - TV Dolní Počernice
Výstavba vodohospodářské infrastruktury v této MČ byla ukončena, mimo etapu 0007 - Národních hrdinů (rekonstrukce dešťové kanalizace), v roce 2006 – viz.etapa 0005 - Vinice. Tímto byla provedena celková TV v rozsahu cca 60% z celkového objemu. Ukončeny jsou etapy 0002 - Komunikace Dolní Počernice I, 0004 - Komunikace Dolní Počernice III, 0005 - Vinice a 1. a 2. část etapy 0006 - Komunikace Dolní Počernice IV. V roce 2007 resp. ve II. pololetí 2007 proběhne  zahájení výstavby dešťové kanalizace v ulici Národních hrdinů – etapa 0007 a následně v r. 2008 její ukončení. V roce 2008 budou pokračovat práce na rekonstrukci místních komunikací, jež jsou náplní etapy 0001 – Komunikace Vinice a dále na etapách 0003 – Komunikace Dolní Počernice II. a 0006 – Komunikace Dolní Počernice IV. 

0137 - TV Kyje - Hutě
V roce 2003 byla dokončena etapa 0001 - západně od ulice Lipnická. V roce 2005 byla dokončena etapa 002 - východně od Lipnické. V roce 2007 je započata příprava etapy 0003 Nad Hutěmi zahrnující dešťovou a splaškovou kanalizaci, komunikaci, chodníky a veřejné osvětlení v ulicích Za Černým mostem a Nad Hutěmi. Součástí stavby bude také sanace podzemních prostor, které se v této oblasti vyskytují. Návrh rozpočtu na r. 2008 obsahuje náklady na dokončení stavebního řízení, výběr zhotovitele a na zahájení stavebních prací vč. inženýrské činnosti. Dokončení se předpokládá v r. 2009.

0138 - TV Kunratice
Jedná se o technicky i investičně jednu z nejnáročnějších staveb, jejíž realizace bude v roce 2007 ukončena z cca 65% z celkového množství. Výstavba splaškové kanalizace je provedena v etapě 0001 - Kanalizace I a etapě 0002 - Kanalizace II a rozpracována v etapě 0003 -Kanalizace III. Ukončení této etapy se předpokládá v roce 2008. Rekonstrukce komunikací je provedena pouze v etapě 0005 - Komunikace I a 0004 - K Libuši, která byla ukončena v roce 2006. V roce 2007 byla ukončena rekonstrukce komunikací v ulici Velenická, Sobolákova a Ploučnická – etapa 0006 - Komunikace II. V roce 2008 bude zahájena rekonstrukce komunikace v ulici K Zeleným domkům a K Verneráku a v návaznosti na ukončení etapy 0003 – Kanalizace III, bude zahájena etapa 0008 – Kanalizace IV.

0152 - TV Chabry
V roce 2007 bude ukončena výstavba TV v rozsahu cca 85% z celkového množství. V roce 2007 bude zahájena výstavba okružní křižovatky v ulici Spořická, včetně výstavby dešťové kanalizace v ul. Spořická (etapa 0003 – Komunikace II). Ukončení těchto prací bude v roce  2008. V r. 2008 se rovněž předpokládá ukončení prací na rekonstrukci místních komunikací a dostavba chybějících chodníků. Navýšení předpokládaných celkových investičních nákladů je nezbytné pro dokončení výše uvedených prací.

0161 - TV Kolovraty
K 31. 12. 2008 budou ukončeny práce na etapě 0001 – Kolovraty jihozápad, etapě 0002 – Kolovraty severovýchod, etapy 0003 – Lipany a 0004 – Nad Nádrží. V r. 2007 byla zahájena rekonstrukce komunikace v ulici Do Lipan (etapa 0005) a výstavba propojovací komunikace mezi ul. Přátelství a A. Hochové. Ukončení těchto prací se předpokládá v r. 2008, resp. 2009.

0196 - TV Klánovice
Výstavba technické vybavenosti v této MČ je soustředěna do rekonstrukce místních komunikací včetně výstavby chodníků a do likvidace dešťových vod. Z celkového množství je do konce roku 2007 provedeno pouze cca 40% z předpokládaného rozsahu, tj. etapa 0001 - Komunikace I, 1. a 2. část etapy 0002 – Komunikace II. V roce 2007 byly zahájeny práce na 3. a 4. části etapy 0002, jejichž ukončení je nutné v roce 2008. V r. 2008 se předpokládá zahájení prací na etapě 0003 – Komunikace III.

0204 - TV Nebušice
Náplní této stavby je rekonstrukce místních komunikací a dostavba chodníků po výstavbě splaškové kanalizace v této MČ. Do konce roku 2007 bude provedeno cca 30% z celkového množství. Dokončena je 1 a 2.část etapy 0001 - Komunikace I a 0002 - Nebušická (dešťová a splašková kanalizace). V roce 2006 byla převedena investorská práva  a závazky na výstavbu splaškové kanalizace na investora (etapa 0005 Kanalizace Nebušice), jejíž realizace se předpokládá v roce 2007 až 2009. V roce 2008 se předpokládá ukončení prací na výstavbě IV. části splaškové kanalizace a zahájení V. části (etapa 0005 – Kanalizace Nebušice). Následně na postup výstavby bude zahájena rekonstrukce místních komunikací. 

0245 - TV Zelený pruh Antala Staška
Jedná se o rekonstrukci čtyřproudové obousměrné komunikace Antala Staška včetně inženýrských sítí, chodníků v délce cca 0,8 km od křižovatky ul. Na strži ke křižovatce s ul. Budějovická. Na základě dodatečného požadavku ÚMČ Praha 4 došlo k variantnímu přepracování dopravního uspořádání komunikace. Z důvodu dodatečných stavebních prací nutných pro dokončení stavby došlo k navýšení investičních nákladů o 6 mil.Kč. Návrh rozpočtu 2008 v částce cca. 23 mil.Kč zajišťuje dofinancování stavby s termínem dokončení již v 09/2007.

3082 - TV Radotín
Obsahem stavby je komplexní výstavba technické infrastruktury vč.plynových řadů (investor P.p.a.s.) a rekonstrukce místních komunikací. V roce 2007 bude tato výstavba ukončena v rozsahu cca 80% z celkového množství. Ukončeny jsou etapy 0001 - Radotín východ, 0002- Loučanská, 0003 - Věštínská, 0004 - Na Rymáni, 2., 3. a 4. část etapy 0005 - Radotín západ, 0006 - Zderazská, 0007 - Radotín sever a 0009 - Komunikace Lochkov-Radotín. V roce 2007 bude ukončena etapa 0005 - Radotín západ, část jih. Ve II. pololetí 2007 proběhne výběr zhotovitele etapy 0010 – Radotín střed a etapy 0011 – Viničky. V roce 2008 budou tyto etapy ukončeny a následně zahájena etapa 0012 – Solná.

3090 - TV Řeporyje
Historické nedostatky ve výstavbě technické vybavenosti v této MČ jsou značné a jejich odstranění do roku 2015 si vyžaduje podstatně vyšší rozpočet v jednotlivých letech než dosud a to počínaje již rokem 2008. Z celkového rozsahu bude do konce roku 2007 zrealizováno pouze cca 35% z celkového objemu. Ukončena je etapa 0001 - Kanalizace Řeporyje, 0002 - K Třebonicům, 0004 - Šachta 2a, etapa 0005 - Kanalizace I, 1.část etapy 0006 - Komunikace I a 0008 - Kanalizace II a 1. a 2. část etapy 0009 – Kanalizace III. V roce 2007 bude zahájena výstavba splaškové kanalizace, jež je náplní etapy 0010 – Kanalizace IV a 0011 – Lubenecká. Ukončení těchto etap se předpokládá v r. 2008. V roce 2008 se rovněž předpokládá zahájení výstavby vodovodního přivaděče do lokality Zadní Kopanice – etapa 0007. V roce 2007 byla na etapu 0010 – Kanalizace IV přidělena dotace ze státního rozpočtu. V podmínkách pro její přidělení je pevně ohraničen termín výstavby respektive dokončení. Jedná se o investičně náročnou etapu s kontrolním rozpočtem investora cca 130 000 tis. Kč.

3103 - TV Lochkov
K 31.12.2007 jsou ukončeny etapa 0001 – Kanalizace + ČOV, etapa 0002 – Komunikace. V roce 2008 bude provedena realizace etapy 0003 – Kanalizace II a zahájena realizace etapy 0004 – Výhledová.

3106 - TV Suchdol
Celá stavba je členěna do etapy 0001 až 0009. V roce 2005 byla ukončena etapa 0001 - Nový Suchdol a 1.část (oblast ulice Gagarinova) etapy 0002 - Budovec. V minulých letech byla ukončena etapa 0003 - Kamýcká, 0004 - Nad Dolíky a 0008 - Komunikace K Osmidomkům. Tím je ukončena výstavba TV z cca 30% z celkového množství. V roce 2008 se předpokládá realizace etapy 0006 – Kanalizace Starý Suchdol a zahájení rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Výhledy.

3111 - TV Lysolaje
Výstavba technické vybavenosti v této MČ je ukončena z cca 80%. Dokončena je, resp. v roce 2007 bude, etapa 0001 - Kanalizace Lysolaje, 0002 - Hřebenová, 1., 2. a 3. část etapy 0003 - Komunikace Lysolaje, 0004 - Protipovodňová opatření, 1. a 2. část etapy 0005 - Opěrná zeď Čábelecká a 0006 - Obslužná komunikace. V roce 2008 bude dokončena rekonstrukce komunikace v ulici V Lysolajském údolí (etapa 0003, 3. část) a bude pokračovat rekonstrukce dalších komunikací, jež jsou náplní etapy 0003.

3113 - TV Přední Kopanina
Pro úplné dokončení výstavby technické vybavenosti v této MČ zbývá provedení etapy 0003 - Komunikace II, jejíž realizace je rozvržena do let 2006 – 2008. Etapy 0001 - IS Přední Kopanina a 0002 - Komunikace Přední Kopanina byly ukončeny.

3119 - TV Čakovice
V roce 2007 bude ukončena etapa 0001 - ČOV Miškovice a výstavba splaškové kanalizace v k.ú.Třeboradice (etapa 0002 – 0005 Kanalizace Třeboradice I-IV), 1. a 2. část etapy 0006 – Kanalizace Čakovice, 1. část etapy 0008 – Komunikace Čakovice, etapa 0009 - Kanalizace Čakovice střed., 1. část etapy 0010 – Komunikace Třeboradice, etapa 0012 – Komunikace Miškovice, etapa 0013 – Kanalizace – dostavba, 0014 – Třtinová a 0015 – Zámišova. V roce 2008 se předpokládá zahájení 3. části etapy 0006 – Kanalizace Čakovice, etapy 0007 – Čakovice – výtlak, realizace etapy 0011 – vodovod Čakovice (2. část) a pokračování rekonstrukce místních komunikací v k. ú. Třeboradice a Čakovice.

3127 - TV Běchovice
Stávající postup výstavby technické infrastruktury umožňuje její dokončení v roce 2009,  etapy 0001 – 0006 byly ukončeny. V roce 2007 se předpokládá zahájení etap 0007 -  Dešťová kanalizace a 0008 - Spojovací, jejichž dokončení je reálné v r. 2008, resp. v r. 2009.

3136 - TV Satalice
Celkové náklady na realizaci výstavby technické vybavenosti v této MČ jsou rokem 2007 vyčerpány ve výši cca 70%. Dokončeny jsou etapy 0001 - Kanalizace střed, 0002 - Komunikace U Řempa, 0003 - Komunikace střed, 0004 - Kanalizace ostatní, 0005 - Komunikace ostatní, 0006 - Kanalizace výhled, 1.a 3. část etapy 0007 - K Cihelně, 0009 – Komunikace Trabantská. V roce 2007 bude zahájena rekonstrukce místních komunikací včetně dostavby kanalizační sítě, jež jsou náplní etapy 0008 – Komunikace ostatní a 0012 – Kanalizace Vinořská. Ukončení prací na těchto etapách bude v r. 2008. V roce 2008 se rovněž předpokládá zahájení rekonstrukce komunikace v ul. Budovatelská – etapa 0010.

3140 - TV Újezd nad Lesy
Výstavba technické vybavenosti, jež svým rozsahem patří mezi největší, v MČ Praha 22 je rokem 2007 ukončena z cca 60%. Ukončena je etapa 0001 - Starokolínská, příprava území, 0002 - Kanalizace východ, 0003 - Kanalizace sever, 1.část etapy 0004 - Komunikace – sever, 1. část etapy 0005 - Komunikace Starokolínská, 0006 - Kanalizace Ochozská, 0007 -Komunikace Staroújezdská, 1. a 2.část etapy 0008 - Komunikace jih a 1. část etapy 0009 – Intenzifikace ČOV. V r. 2007 je zahájena výstavba a rekonstrukce kanalizačního sběrače s jeho napojením na ČOV (etapa 0009) a etapa 0011 – Rohožník. Obě tyto etapy budou realizovány v r. 2008. V roce 2008 se rovněž předpokládá pokračování rekonstrukce místních komunikací v části jih a sever.

3145 - TV Vinoř
K 31. 12. 2007 bude ukončena etapa 0001 – 0006 a etapa 0007 - Komunikace střed. K tomuto datu bude rovněž zrealizována etapa 0010 – Ctěnice. V roce 2008 budou pokračovat práce na rekonstrukci místních komunikací včetně dostavby chodníků (viz. etapa 0009 – Vinořská a 0011 – Sběrná).

3150 - TV Benice
V roce 2007 byla ukončena investorská příprava etapy 0003 - Komunikace Benice, jejíž realizace se předpokládá v letech 2007 a 2008. Etapy 0001 - IS Květnového povstání a 0002 -IS Komunikace Benice byly ukončeny.

3151 - TV Dubeč
Výstavba technické vybavenosti v této MČ je rozdělena do 0001 – 0013, z nichž je ukončena etapa 0001, resp.0002 - Dubeček jih, doplnění IS, 0003 - Dubeč střed I, 1. a 3. část etapy 0004-Dubeč střed II, 0005 - Dubeč – V Křížkách, 1. část etapy 0007 - Komunikace K Zámku, etapa 0008 – Dubeč –Netlucká a 1. část etapy 0011 – komunikace Dubeč. Tímto je celkové čerpání IN vyčerpáno z cca 60%. V roce 2007 bude zahájena a následně v r. 2008 ukončena etapa 0007 – Komunikace K zámku (2.část), etapa 0006 – Dubeček sever a etapa 0009 – Městská.

3168 - TV Křeslice
Celkové čerpání IN nákladů na této stavbě je cca 80%. Ukončena je etapa 0001 - Štychova, 0002 - Výtlak, 0003 - Stoka A-B a 0005 - Komunikace Štychova. V roce 2007 bude ukončena investorská příprava na etapu 0004 - Komunikace, jejíž zahájení se předpokládá ve 2. pololetí 2007. V roce 2008 budou probíhat práce na rekonstrukci místních komunikací a výstavbě chodníků – etapa 0004.

3171 - TV Štěrboholy
V současné době je ukončena etapa 0001 - Kanalizace Štěrboholy, 0002 - Sektor B1, 0003 -Komunikace I, 0004 - Radiála, 0005 - Komunikace II, 1. část etapy 0006 - Komunikace III a  etapa 0007 - Komunikace IV. V roce 2007 se předpokládá ukončení investorské přípravy pro rekonstrukci komunikace v ulici Ústřední – 2. část etapy 0006 – Komunikace III. Zahájení realizace těchto prací se předpokládá v r. 2008.

3295 - TV Horní Počernice
V roce 2001 byla ukončena výstavba IS a rekonstrukce komunikace v ulici Náchodská – etapa 0001 až 0004. V dalších letech byla ukončena etapa 0005 - Kanalizace Březecká, 0007 -Mezilesí, 0008 - Jívanská, 0009 Komunikace I, 0010 - Komunikace II, 2. část etapy 0006 - Komunikace Robotnice a 1.část etapy 0012 - IS ostatní. V roce 2006 byla ukončena etapa 0011 - Komunikace III a 1. část etapy 0013 - Komunikace Božanovská. V roce 2006 byla zahájena etapa 0014 - Otovická – realizace zařazena do fondů JPD 2, ukončení v I. čtvrtletí 2007. V roce 2008 budou realizovány práce na 2. a 3.  části etapy 0012, dále se předpokládá 2. část rekonstrukce komunikace v ulici Božanovská (etapa 0013) a zahájení prací na výstavbě podchodu pod východní spojkou (etapa 0015 – Východní spojka).

4506 - TV Velká Chuchle
Stavba je rozdělena do 6-ti etap s termínem realizace r. 2007 – r. 2009. Jednotlivé etapy  zahrnují rekonstrukci komunikace, opěrné zdi, pokládku splaškové a dešťové kanalizace, veřejný vodovod, přeložku plynovodu, vedení silnoproudých a slaboproudých kabelů, veřejné osvětlení, výsadbu zeleně. Pro r. 2008 se počítá realizací etap 0003 a 0004.

4507 - TV Vokovice 
V důsledku výstavby sítí PRE a nejrůznějších kabelových operátorů jsou komunikace v této oblasti ve velmi špatném stavu. Cílem této stavby je  výměna povrchů jednotlivých komunikací a přilehlých chodníků spolu s rekonstrukcí a doplněním stávajících inženýrských sítí, čímž dojde k výraznému poklesu hluku z dopravy a k jejímu celkovému zklidnění. Pro pokračování projektových a investorských činností spolu s možným zahájením stavby se navrhuje vyčlenit v rozpočtu kapitálových výdajů pro rok 2008 částku 32 mil. Kč.

6963 - Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Císařský ostrov
Akce řeší celkovou přestavbu a rozšíření centrální čistírenské kapacity pro Hlavní město Prahu vybudováním nové mechanicko-biologické linky čištění s chemickým srážením a dále úpravou stávající ÚČOV včetně intenzifikace stávajícího kalového hospodářství v lokalitě Císařského ostrova. Realizace tohoto záměru umožní Praze dosáhnout emisní limity požadované legislativou EU (směrnice Rady EU 91/271/ EHS) i legislativou ČR (NV ČR 61/2003 Sb.) a zajistí čištění odpadních vod pro více než 1,6 milionu EO. Hlavní město Praha bude po realizaci uvedeného projektu schopno plnit závazky vyplývající z přístupových smluv ČR vůči EU, definovaných pro přechodné období (do roku 2010) v oblasti životního prostředí. Návrh rozpočtu na rok 2008 představuje náklady na projektovou a inženýrskou činnost (DUR, DSP, DVZ, ověřovací studie), výkupy pozemků a zahájení stavebních prací (příprava a zařízení staveniště, přeložky sítí, zemní práce).

7133 - IP pro stavby v kap. 02
Výdaje na projektovou přípravu a inženýrskou činnost staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na běžný rok.

7499 - TV Dolní Měcholupy
V roce 2005 byla ukončena rekonstrukce komunikace a výstavba chodníků v ulici Kutnohorská (etapa 0001 – Kutnohorská), mimo realizace světelné signalizace, která byla provedena v roce 2007. V roce 2008 bude zahájena etapa 0002 - Ke Kovárně, resp. rekonstrukce komunikace v ulici Dolnoměcholupská.

7500 - TV Praha 6
Tato stavba byla založena v roce 2005 a je členěna do pěti etap. Etapa 0001 - Šárecké údolí, resp. její 1. část byla realizována v roce 2006, resp. 2007. Následně bude připravena k realizaci 2. část etapy s termínem zahájení v roce 2008 a ukončení v roce 2010. V roce 2007 byla provedena etapa 0007 – Rekonstrukce komunikace V Podbabě.

7526 - Dostavba botanické zahrady
Vlastní stavba byla zahájena v r. 2005. Jedná se o výstavbu provozní budovy, pěstebního skleníku a příjezdové komunikace vč. příslušných sítí v areálu Pražské botanické zahrady. Stavba byla zahájena v r. 2005 a v roce 2006 byly po vyčerpání omezených finančních prostředků daných rozpočtem dočasně práce zastaveny. V současné době práce opět pokračují. Finanční prostředky plánované na rok 2008 bude použity na vypořádání prací provedených v roce 2007, kdy předpokládáme jejich ukončení.

7877 - Regenerace vnitrobloku Chlebovická-Tupolevova
Jedná se o regeneraci vnitrobloku vyhrazeného panelovými domy (o rozměrech cca 80x150m) vytvořením nových sportovních a relaxačních ploch (ve třech pásmech – pro mládež, malé děti, seniory a matky s malými dětmi) úpravou a výsadbou zeleně, rekonstrukcí a vybudováním pěších komunikací a veřejného osvětlení s cílem humanizace sídlištního parteru. Stavba je investorsky a projektově připravena na zahájení v r. 2007 a dokončení v r. 2008. Dokončení stavby v r. 2008 značně ovlivní životní prostředí a bezpečnost a umožní obyvatelům této lokality relaxační činnost v bezprostřední blízkosti svého obydlí.

7981 - TV Za Horou
V rámci stavby jsou připravovány rekonstrukce  komunikací Za Horou, Okrajová, Třešňová, Švestková, Jednostranná, Aloisovská v Praze 14. Nutnost realizace výše uvedené stavby je vyvolána  zejména špatným stavem stávajících komunikací, kdy  nové komunikace budou provedené s bezprašným povrchem a potřebou ve vylepšení životního prostředí  stávající zástavby napojením do kanalizace. V letošním roce probíhají přípravné projektové práce s cílem zahájení realizace v III. čtvrtletí r. 2007 a dokončení průběžně v roce 2008.

8274 - TV Sedlec
Tato stavba řeší výstavbu vodohospodářské infrastruktury (etapa 0001 - Kanalizace a 0003 -ČOV Sedlec) a celoplošnou rekonstrukci komunikací (etapa 0002 - Komunikace v k.ú.Sedlec). K 31. 12. 2007 je ukončena etapa 0001 – Kanalizace, 0002 – Komunikace. V roce 2007 byly zahájeny práce na etapě 0003 – ČOV Sedlec jejichž ukončení se předpokládá v roce 2008.

8275 - TV Uhříněves
Jedná se o vybudování technické vybavenosti pro novou výstavbu na Novém náměstí v Uhříněvsi. Stavba byla delimitována na OMI MHMP ve druhém čtvrtletí r. 2005. Stavba má termín dokončení v roce 2007, navrhované finanční prostředky na rok 2008 umožní její finanční krytí.

8498 - Vodovodní řad Nová Ves
Tato stavba řeší napravení „historických“ nedostatků při výstavbě vodohospodářské infrastruktury ve velkých sídlištních celcích. Při výstavbě nových vodovodních řadů v dané lokalitě (stavba č.0114 TV Stodůlky) bylo konstatováno, že tyto se napojují do řadů, které nebyly zkolaudovány a tudíž převedeny do správy PVS a.s. a které nesplňují základní hygienické normy. Na základě kamerového průzkumu byla zjištěna řada technických nedostatků a neméně důležité je zjištění, že některé řady jsou vedeny na soukromých pozemcích. Nejvýhodnějším řešením k nápravě všech těchto nedostatků je výstavba nových řadů v lokalitě Nová Ves. Projekční příprava byla zahájena v roce 2005 a zahájení stavby se předpokládá v r. 2008.

8521 - Sběrný dvůr Běchovice
Jedná se o stavbu sběrného dvora pro sběr komunálního odpadu pro Běchovice a okolní území. Po vyřešení umístění stavby bylo v prvním čtvrtletí rozhodnuto o pokračování přípravy stavby na pozemku par.č. 1327/1. Předpoklad ukončení přípravy a zahájení stavebních prací je v I. čtvrtletí 2008. Navrhované finanční prostředky umožní realizaci stavby v roce 2008.

8548 - Kanalizační sběrač H – prodloužení do Běchovic
Z důvodu ukončení platnosti stávajícího povolení k vypouštění odpadních vod ze stávající ČOV v Běchovicích v roce 2007, byla v roce 2005 zahájena projekční příprava na prodloužení sběrače H o 2015 bm směrem do Běchovic. Sběrač navazuje na stávající kanalizaci v ulici Národních hrdinů v MČ Dol.Počernice a povede do ulice Nad rybníkem a podél Počernického rybníka s ukončením před viaduktem ČD. Přepojení ČOV bude provedeno výtlakem v délce 420 bm. Kapacita sběrače umožní gravitační přepojení oblasti Vinice, Běchovic a výhledově MČ Újezd nad Lesy. V roce 2008 se předpokládá s ukončením investorské přípravy a následně ještě v tomto roce se zahájením stavby. Tento termín je nutné dodržet a to z důvodu, který je uveden výše.

8588 - TV Malá Ohrada
Jedná se o komplexní rekonstrukci inženýrských sítí, vozovek a chodníků v oblasti Malé Ohrady na Praze 13. Stavba je členěna na etapu č. 0001 – západní část, etapu č. 0002 – východní část, etapu č. 0003 – střední část a etapu 0004 – zastávky MHD, mobiliář. Stavba má vydaná stavební povolení kromě etapy 0004, kde se zajišťuje dokumentace pro stavební řízení. Předpoklad dokončení výběru zhotovitele a zahájení vlastních stavebních prací je druhé pololetí 2007. Navrhované finanční prostředky do rozpočtu stavby umožňují dokončení vlastní realizace stavby v roce 2008.

8781 - Prodloužení sběrače P do Třebonic
Stavba zahrnuje prodloužení sběrače „P“ do Třebonic. Jedná se o kanalizaci DN300 a DN400 o celkové délce 1 755 bm. Zajistí odkanalizování k.ú.Třebonice a nová rozvojová území. V roce 2007 byly zahájeny projekční práce na této stavbě s tím, že v r. 2008 bude ukončena investorská příprava.

8950 - TV Praha 15
Jedná se o rekonstrukci křižovatky zvyšující kapacitu řadících pruhů ulic Švehlova x Pražská na území Prahy 15. Stavba má vybrané zhotovitele na realizaci etapy 0001-komunikace a etapy 0002-přeložka sítí s termínem dokončení v r.2007. Na základě upřesnění vycházející z projektové přípravy etapy 0003-kanalizace se předpokládané investiční náklady stavby zvýšily o 15,75 mil.Kč. Navrhované finanční prostředky na rok 2008 zajistí úplné finanční krytí prvních dvou etap dokončených v roce 2007 a umožní dokončit přípravu i vlastní realizaci etapy 0003.

0000 - Dofakturace pro kap. 02
Jedná se o proplácení faktur za práce provedené na dokončených stavbách do konce roku 2007, které budou předloženy k proplacení v roce 2008 a stavbách, jenž nejsou jmenovitě zařazeny ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2008.

0000 - Kanalizace Centrum
Tato stavba byla vyvolána kolektorizací centrální oblasti HMP. Výstavbou kolektorů dojde k uložení všech sítí v dané oblasti do podzemí a to mimo kanalizační řady. Z důvodu stáří a dalších vlivů je zapotřebí řešit tuto lokalitu, která je dána ulicemi Opletalova, Panská, Příkopy, Politických vězňů a další, jako celek. Součástí stavby je rekonstrukce stávajících kanalizačních řadů včetně přípojek a obnova komunikací nad nimi.

0000 - Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi
Prodloužení sběrače G do MČ Praha Dubeč a Uhříněves umožní přepojení kanalizačního systému sváděného do ČOV Uhříněves na městský kanalizační systém a to včetně přepojení stávajících čerpacích stanic. Prodloužení zahrnuje řad DN 800 v délce 2 800 bm a DN 500 délky 440 bm. Zahájení projekčních prací se předpokládá v roce 2008.

0000 - Revitalizace Stromovka 
Návrh rozpočtu na rok 2008 obsahuje náklady na zpracování dokumentace na rekonstrukci nátokového zařízení Rudolfovy štoly z Vltavy a možnost napájení vodních nádrží ve Stromovce.

0000 - TV Bílá Hora
Cílem této stavby je rekonstrukce a doplnění stávajících inženýrských sítí spolu s výměnou povrchů jednotlivých komunikací a přilehlých chodníků. Její realizací dojde ke zkvalitnění funkce stávajících sítí a jejich zkapacitnění, v důsledku čehož bude možné napojení dosud nepřipojené zástavby. Rekonstrukcí povrchů komunikací a chodníků včetně dobudování částí nových dojde k výraznému poklesu hluku z dopravy a k jejímu celkovému zklidnění. Pro zajištění projektové dokumentace (DUR, DSP) a investorské přípravy v roce 2008 se navrhuje zařadit do rozpočtu kapitálových výdajů pro rok 2008 částku 40 mil. Kč.

0000 - TV Hloubětín
Ve vazbě na dokončovanou výstavbu a rekonstrukci podzemních inženýrských sítí v oblasti Hloubětína na území MČ Praha 14 je navrženo provedení  rekonstrukce chodníků a vozovek v území vymezeném v severní části ulicemi Poděbradská, Kbelská, Kolbenova, Slévačská a v jižní části ul. Poděbradská, Hloubětínská, Klánoviceká, Slévačská. Pro r. 2008 se navrhuje zajištění územního a stavebního řízení vč. příslušných projektů a IČ.

0000 - TV Letňany
Tato stavba je ve stádiu přípravy projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení. Náplní této stavby je úprava povrchu komunikace spolu s vytvořením zelených pásů po krajích a zhotovení nových povrchů chodníků lemujících komunikaci Vamberská. Zároveň s těmito pracemi dojde zřejmě na základě vyjádření jednotlivých správců sítí získaných při přípravě projektové dokumentace k částečné nebo úplné výměně jednotlivých sítí. Na investorskou činnost a projektovou přípravu (DSP, výběr zhotovitele a zahájení stavby) se navrhuje vyčlenit v rozpočtu kapitálových výdajů pro rok 2008 částku 10 mil. Kč. Zhotovením tohoto díla dojde v ulici Vamberská ke zkvalitnění a zklidnění dopravy, omezení hlučnosti, zároveň s odstraněním stávající ovocné stromové zeleně a nahrazením zelenými pásy také k omezení hojného výskytu hmyzu v době zrání ovoce. Částečná nebo úplná výměna inženýrských sítí zajistí dlouhodobou životnost komunikace bez nutnosti oprav zmíněných sítí.

0000 - TV Troja
Z důvodu řešení výstavby technické infrastruktury v lokalitě ulice Pod Havránkou řadou investorů – TSK, MČ Praha – Troja, PVS a.s. a řada jiných, bylo v roce 2006 rozhodnuto o generálním investorovi, kterým je OMI MHMP. Stavba je členěna do etapy 0001 Kanalizace (výstavba splaškové kanalizace a vodovodu, zkapacitnění dešťové kanalizace a zatrubnění potoka) a 0002 Komunikace (rekonstrukce komunikace a výstavba chodníků, koordinace s výstavbou plynového řadu a pokládkou kabelů). V roce 2007 bude ukončena investorská příprava obou etap a stavba bude připravena v plném rozsahu k realizaci. Zahájení prací se předpokládá v I. čtvrtletí r. 2008.

0000 - TV Lahovičky
Jedná se o výstavbu vodohospodářské infratruktury a rekonstrukci místních komunikací včetně likvidace dešťových vod. Stavba je členěna do etapy 0001 – Kanalizace, jejíž náplní je výstavba splaškové kanalizace včetně veřejných částí přípojek, 0002 – Vodovodní řady, jejímž obsahem je dostavba a rekonstrukce vodovodních řadů v dané lokalitě a 0003 – Komunikace jež řeší rekonstrukci místních komunikací včetně výstavby chodníků a veřejné osvětlení. V roce 2008 se předpokládá výstavba splaškové kanalizace DN 300 v k.ú. Lahovičky v lokalitě ohraničené ulicemi Na Staré, Ke Stanici, K Řece, K Zahradám, K Sádkám, K Závodišti, Za Ploty. Dále bude zahájena investorská a projekční příprava  na rekonstrukci místních komunikací dotčených výstavbou splaškové kanalizace.

Kapitola 0321

0051 - Protihluková opatření na dokončených stavbách
Jedná se o dodatečně vyžadovaná protihluková opatření na základě stížností občanů na zvýšenou hladinu hluku v lokalitách, které byly v minulosti dotčeny dopravními stavbami, které jsou již v užívání. Jednotlivé lokality budou vybírány investorem dle finančních možností rozpočtu hl. m. Prahy. Podle současné platné metodiky mohou být z kapitálových výdajů hrazena protihluková opatření prováděná pouze na objektech v majetku města nebo městských částí. V rámci rozpočtu roku 2008 se předpokládá v rámci kapitálových výdajů hlavně instalace dodatečných protihlukových opatření (stěn) na lanovém mostu na Jižní spojce přes ČD u ulice Švehlova a Dolinecká, mostu na Jižní spojce přes ulici Záběhlickou, mostu na ulici Průmyslové v lokalitě „Za horou“. Cílem těchto opatření je eliminovat hlukovou zátěž v okolí Jižní spojky.

0053 - Vysočanská radiála 
Výstavba Vysočanské radiály řeší dopravu v oblasti průmyslového polookruhu vymezeném křižovatkou Kbelská a končí křižovatkou se silnicí I/10 (Novopacká) s připojením na dálnici D11 směr Mladá Boleslav. Do doby realizace severovýchodní části dopravního okruhu kolem Prahy bude plnit jeho funkci, především v převádění průjezdné dopravy na vnější dálniční sítě. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů v roce 2008 vychází z předpokladu, že v roce 2007 bude uhrazena zbývající část výkupů pozemků vedených na soukromé fyzické či právnické osoby po zápisu kupní smlouvy do Katastru nemovitostí. Většina soukromých pozemků má vyjasněné vlastnické vztahy a proto jsou k dnešnímu dni uzavřeny, či jsou ve fázi před uzavřením, kupní smlouvy nebo smlouvy o budoucích smlouvách kupních. Ty jsou většinou podmíněny správným zápisem vlastnictví žijících potencionálních vlastníků na Katastru nemovitostí v souvislosti s doposud nedokončeným dědickým či restitučním řízením. Dosud zbývá uzavřít kupní smlouvu již jen s jediným vlastníkem. Návrh rozpočtu na rok 2008 předpokládá platby za úhrady úplatných věcných břemen, platby za výkon autorského dozoru stavby a za výkon inženýrské činnosti. Pokud se nepodaří uzavřít a proplatit kupní smlouvy s vlastníky, kde jsou zatím uzavřeny jen smlouvy o budoucí smlouvě kupní, v roce 2007, budou související prostředky převedeny do roku 2008. Stavební práce jsou u této stavby financovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
	
0065 - Strahovský tunel 2. stavba
Stavba je z důvodů vyplývajících ze širších dopravních vztahů rozdělená na dvě samostatné části. Časové zařazení realizace těchto částí vychází z předpokládaného postupu výstavby Městského okruhu mezi Barrandovským mostem a Pelc-Tyrolkou. První část „Strahovský tunel 2A MÚK Malovanka“ je samostatně zprovoznitelnou stavbou a druhá část stavby „Strahovský tunel 2B - Hloubený tunel MO“ je stavbou, jejíž zprovoznění je závislé na realizaci navazující stavby „MO Myslbekova - Prašný most“. 
1. část „A“ MÚK Malovanka:
V roce 2008 se předpokládá provádění díla v plném rozsahu dle vydaných stavebních povolení na všech hlavních dopravních objektech. V současné době nabývá právní moci rozhodující stavební povolení na inženýrské sítě.
2. část „B“ Hloubený tunel MO:
Plánované čerpání prostředků v roce 2008 představují v rámci stavebních prací hlavně přeložky inženýrských sítí a dále platby za výkupy pozemků, úplatná věcná břemena a další navazující výdaje.

0079 - MO Špejchar – Pelc Tyrolka
Trasa na levém břehu Vltavy je projektována se dvěma automobilovými tunely po dvou jízdních pruzích. Pod Letnou je rozšířen jeden tunel ve stoupání na tři pruhy. Na pravém břehu Vltavy je ve větším rozsahu uvažován povrchový úsek o dvou jízdních pruzích. Celková délka trasy činí 4 320 m. Trasa křižovatky U Vorlíků – Letná, křižovatka Trója /nový městský most/ a napojení na křižovatku mostu Barikádníků v Holešovičkách začíná na křižovatce Špejchar, kterou prochází a dále pokračuje hloubeným tunelem v délce 651 m. V oblasti hranice ul. M. Horákové a Letenské pláně, 100 m jižně pod stadionem Sparty Praha přechází komunikace v ražený tunel v délce 2 211 m základního šířkového uspořádání (2 + 2 jízdní pruhy), který je rozšířen stoupacím pruhem ve směru Trója – Letná a který končí cca 160 m za pravým břehem Vltavy v Tróji. Stavba dále pokračuje k novému Trojskému mostu 557 m dlouhým hloubeným úsekem spojujícím Tróju s Holešovicemi, který se bude nacházet 100 m východním směrem za současným mostním tramvajovým provizóriem. Dále vede trasa povrchově v délce 901 m až na konec celého souboru staveb cca 400 m za křižovatkou Pelc Tyrolka. Návrh rozpočtu na rok 2008 zahrnuje náklady na přípravu tj. autorský dozor stavby, provádění monitoringu stavby, inženýrská činnost, úpravy dokumentace (např. vlivy Národní knihovny, nového trojského mostu), koordinační činnost při stavbě. V roce 2008 bude probíhat ražba severního i jižního tunelu v celkové délce 1995 m. Současně budou pokračovat hloubené dilatační díly č. 2, 3, 4 a 7. V 1. čtvrtletí 2008 bude zahájena montáž ocelové konstrukce nového Trojského mostu. Budou prováděny přeložky inženýrských sítí na Letné a nájezdové rampy do budoucích silničních tunelů. Změna celkových nákladů stavby vychází z uzavřených výběrových řízení stavební a technologické části stavby a koresponduje s modelem financování strategických investic hlavního města Prahy.
     
0080 - MO Prašný most - Špejchar 
Trasa je projektována se dvěma automobilovými tunely po dvou jízdních pruzích, kontakty s tramvají, železnicí, autobusy a metrem. Na trase jsou připojovací pruhy pro křižovatku Prašný most. Délka úseku činí 660 m. I v tomto úseku dochází mezi rampami křižovatek k připojení manipulačního pruhu v obou směrech. Trasa  je v celém úseku  620 m  hloubená, začíná cca 100 m za křižovatkou Prašný most a končí cca 90 m před středem stávající křižovatky Špejchar. Návrh rozpočtu  na rok 2008 zahrnuje náklady na přípravu tj. autorský dozor, inženýrská činnost, úpravy projektové dokumentace (např. vliv rampy 1 přes Dejvické údolí). V rámci realizace budou provedeny přeložky inženýrských sítí, budou zahájeny hloubené tunely v úseku Prašný most-Špejchar. Změna celkových nákladů stavby vychází z uzavřených výběrových řízení stavební a technologické části stavby a koresponduje s modelem financování strategických investic hlavního města Prahy.

0081 - MO Pelc/Tyrolka – Balabenka
Stavba Městského okruhu v úseku od Pelc/Tyrolky po Balabenku. Součást sítě hlavních komunikací dle územního plánu. Byla zpracována vyhledávací studie, studie  proveditelnosti, dokumentace k oznámení záměru stavby v rámci procesu EIA. Řešení stavby je komplikováno  zejména nedostatečným šířkovým prostorem a  blízkostí chráněného území Bílá skála. Současně  je komplikováno také odmítavým postojem MČ k připojení Městského okruhu  na  navazující dosud nepřipravovanou  část  Vysočanské radiály po ulici Kbelskou. Stavba bude  vyžadovat dílčí změny  územního plánu. Probíhá procedura  posuzování vlivů stavby na životní prostředí (dopracovává se dokumentace podle závěrů zjišťovacího řízení MŽP).  Plán na rok 2008 a další proto  zohledňuje časový posun přípravy.  Návrh rozpočtu na rok 2008 zahrnuje náklady na  projektovou a inženýrskou činnost, průzkumy  a jejich zadání a majetkoprávní záležitosti.

0094 - Balabenka – Štěrboholská radiála
Stavba Městského okruhu v úseku od  Balabenky po Štěrboholskou radiálu. Součást sítě hlavních komunikací dle územního plánu. Byla zpracována  vyhledávací studie, studie  proveditelnosti, posouzení vyčlenění křiž. větve MUK se Štěrboholskou radiálou  a změny řešení Na Jarově . Řešení stavby je komplikováno  nejasností řešení křižovatky na Jarově ve vztahu k připravované komerční a bytové zástavbě v lokalitě.  Stavba bude  vyžadovat dílčí změny  územního plánu.  Probíhá procedura  posuzování vlivů stavby na životní prostředí (dopracovává se dokumentace podle závěrů zjišťovacího řízení MŽP). Plán na rok 2008 a další proto  zohledňuje časový posun přípravy. Návrh rozpočtu na rok 2008 zahrnuje náklady na   projektovou a inženýrskou činnost, průzkumy  a jejich zadání a majetkoprávní záležitosti.

0211 - Lipnická – Ocelkova 
Sledovaným cílem přípravy a realizace této veřejně prospěšné stavby je jejím včasným zprůjezdněním redukovat prognózovaný nárůst intenzity dopravy v uliční síti obytné zástavby Kyjí – Hutí po zprovoznění mimoúrovňové křižovatky Vysočanské radiály s ulicí Lipnickou, a to svedením zbytného zatížení na touto stavbou vybudované komunikační spojení o délce cca 1,1 km s nutností vybudování jednoho drážního mostu na trati ČD Praha – Lysá n/L. V současné době je podána žádost o posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a projednává se dokumentace k územnímu rozhodnutí, aby v letošním roce mohlo být vydáno územní rozhodnutí. Předmětem návrhu rozpočtu na rok 2008 jsou náklady na další část přípravné projektové dokumentace stavby a zahájení realizace.

0212 - MÚK Bystrá - I/10
Ve smyslu požadavků MČ Praha 20 – Horní Počernice a MČ Praha – Satalice uplatněných v souvislosti se stavbou Vysočanské radiály a následných dohod investora s těmito městskými částmi byla obnovena příprava předmětné stavby v upraveném řešení, které již sleduje možnost získání nezbytného souhlasu Ministerstva vnitra ČR. Stavba MÚK Bystrá x I/10 je obsažena v platném Územním plánu hl. m. Prahy jako stavba veřejně prospěšná a její realizací se významně zlepší dopravní napojení Satalic a Horních Počernic (zejména pak vznikající komerční zóny Horní Počernice – sever) na nadřazenou komunikační síť – silnici I/10, Vysočanskou radiálu a Silniční okruh kolem Prahy. Včasná realizace tohoto mimoúrovňového křížení by zároveň podstatně zjednodušila postup výstavby a dopravní opatření při napojování Vysočanské radiály na silnici I/10. Zprovozněním této stavby v době, kdy bude uvedena do provozu Vysočanská radiála, by se také výrazně zlepšilo životní prostředí obyvatel městských částí Satalic a Horních Počernic. V současné době je podána žádost o posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a projednává se dokumentace k územnímu rozhodnutí, aby v letošním roce mohlo být vydáno územní rozhodnutí. Předmětem návrhu rozpočtu na rok 2008 jsou náklady na další část přípravné projektové dokumentace stavby, výkupy pozemků a zahájení realizace.

4328 - Komunikace Rajská zahrada - ČD
Jedná se o vybudování zastávky Českých drah včetně zkapacitnění tratě o třetí kolej – partnerství mezi OMI-MHMP a Správou železničních dopravních cest a.s. (SŽDC a.s.), přemostění lávkou pro pěší ulici Chlumeckou s propojením stávající zástavby, budoucí zastávky ČD a.s. a stanicí metra Rajská zahrada včetně napojení a přeložek inženýrských sítí. Stavba bude budována jako bezbariérová (pro DP hl.m. Prahy je připravován výtah v rámci bezbariérových přístupů ze stanice metra do nákupní galerie a dále spojení s navrhovanou stavbou ). Pro stavbu bylo v 06/06 vydáno rozhodnutí o umístění stavby Městskou částí Praha 14. Projednává se způsob financování mezi OMI a SŽDC (zajistí si inženýrskou činnost ze svých fin. prostředků, předpoklad 150 mil.Kč). Následně OMI zajistí výběrové řízení na projektanta dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP). Předpoklad zahájení výstavby v roce 2009. Návrh rozpočtu  na rok 2008 zahrnuje náklady na investorskou a projektovou přípravu (DSP).

4663 - MÚK PPO – Liberecká
Jedná se o přestavbu stávající úrovňové křižovatky PPO x Liberecká (Veselská) na křižovatku mimoúrovňovou ve vazbě na nárůst dopravních zátěží v souvislosti zejména s  dnes již realizovanými investičními aktivitami v předmětné lokalitě (obchodní centrum TESCO Letňany, GLOBUS Čakovice atd.) a skutečností, že PPO v této části bude ve spojení s Vysočanskou radiálou zřejmě po delší období nahrazovat funkci severovýchodního úseku silničního okruhu kolem Prahy. Návrh rozpočtu na rok 2008 předpokládá platby za úhrady úplatných věcných břemen, platby za výkon autorského dozoru stavby a za výkon inženýrské činnosti. Stavební práce jsou u této stavby financovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

7552 - Budovatelská – Mladoboleslavská
Předmětnou stavbu, která je obsažena ve schváleném Územním plánu hl.m. Prahy, žádají v souvislosti s Vysočanskou radiálou realizovat pražské městské části Satalice a  Kbely z důvodu zachování úrovně životního prostředí v těchto městských částech po zprovoznění Vysočanské radiály v úseku Novopacká – Kbelská. Stavba představuje 2,2 km dlouhou  dvoupruhovou komunikaci s jednou úrovňovou křižovatkou (s ul. Mladoboleslavskou) a s tunelem délky 100 m  v prostoru letiště Kbely (vykřížení s předpolím vzletové a přistávací dráhy letiště). V současné době je podána žádost o posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a projednává se dokumentace k územnímu rozhodnutí, aby v letošním roce mohlo být vydáno územní rozhodnutí. Návrh rozpočtu na rok 2008 předpokládá čerpání finančních prostředků na projektovou přípravu stavby ve fázi dokumentace ke stavebnímu povolení, výkupy pozemků a zahájení realizace stavby.

7553 - Břevnovská radiála
Radiála spojující Městský okruh od Malovanky po Pražský okruh. Součást sítě hlavních komunikací dle územního plánu. Byla zpracována technicko ověřovací studie trasy obsažené v územním plánu a následně byla zpracována  studie proveditelnosti. Stavba bude vyžadovat dílčí změny územního plánu. Probíhá procedura  posuzování vlivů stavby na životní prostředí (dopracovává se dokumentace podle závěrů zjišťovacího řízení MŽP). Následně bude vybrán zpracovatel projektové dokumentace (DUR a DSP). Předem je avizován nesouhlas s vedením radiály po povrchu (a to ani jednoho směru) v úseku od Vypichu po napojení  na Městský okruh na Malovance. Komplikace s projednáním řešení spočívá zejména v rozporném názoru na řešení mezi MČ Praha Řepy a Prahou 6 a dále s občanskými aktivitami (nereálný návrh tunelového vedení  ve zcela  jiné stopě, než je v územním plánu, znamenající také jiné řešení probíhající stavby 0065). Plán na rok 2008 a další proto  zohledňuje časový posun přípravy z důvodu jejího zastavení. Je podána žádost na SFDI o zařazení  realizace této stavby  do investic fondu. Návrh rozpočtu na rok 2008 zahrnuje náklady na projektovou a inženýrskou činnost, průzkumy  a jejich zadání a majetkoprávní záležitosti.

7555 - Dofakturace pro kap. 0321
Jedná se o proplácení faktur za práce provedené na dokončených stavbách do konce roku 2007, které budou předloženy k proplacení v roce 2008 a stavbách, jenž nejsou jmenovitě zařazeny ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2008.

7556 - IP pro dopravní stavby
Výdaje na projektovou přípravu a inženýrskou činnost staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na běžný rok.

7557 - Rozšíření vozovky  Ankarská
Drobná akce  mající za účel zajistit co nejdříve lepší průjezdnost oblasti u křižovatky Vypich a to rozšířením stávající vozovky Ankarská v délce cca 100 m. Původně uvažovaný plán rychlého vydání SP a zahájení prací byl zkomplikován požadavkem stavebního úřadu Prahy 6  na oddělené územní řízení, dodatečnými požadavky stát. orgánů na koordinaci s komerčními aktivitami v místě a nepřesnými podklady správců slaboproudých kabelů. Dále dodatečnými požadavky DOP na úpravy SSZ a zejména komplikacemi s potřebnými pozemky ve vlastnictví DP HMP. To vše znamenalo vyšší rozsah stavby a zvýšení předpokládané ceny.  Stavební řízení  dosud neukončena, některá povolení již v právní moci. Kompletní dokončení realizace tak bude možné až v roce 2008.

8313 - Libeňská spojka
Komunikační propojení podle  územního plánu. Dopravní stavba navazující na síť hlavních komunikací, propojující Městský okruh v Libni s Proseckou radiálou (křižovatkou  Zenklova x Liberecká). Byla zpracována a projednána vyhledávací studie trasy obsažené v územním plánu. Dále bylo provedeno studijní posouzení s modelací funkčnosti uzlu Libeňská spojka x Městský okruh x Vysočanská radiála (rozpor s názory MČ Praha 9). Stavba bude vyžadovat dílčí změny územního plánu. Zpracovává se dokumentace  k oznámení záměru stavby v rámci procesu EIA. Plán na rok 2008 a další roky proto zohledňuje další postup přípravy. Návrh rozpočtu na rok 2008 zahrnuje náklady na projektovou a inženýrskou činnost, průzkumy  a jejich zadání.

8559 - Komunikační propojení Evropská Svatovítská
Komunikační propojení se nachází v Praze 6 v jihovýchodní části Dejvic a umožňuje dopravní propojení mezi ulicemi Evropská a Svatovítská. Jeho realizací vznikne nová čtyřpruhová komunikace o délce 800 m, která bude mít pozitivní vliv přímo pro okružní křižovatku Vítězné náměstí, kde dojde k výraznému odlehčení od dopravních zátěží. Značného významu a využití tato komunikace nabude po uvedení do provozu dalších částí Městského okruhu a to staveb Myslbekova – Prašný most a Prašný most – Špejchar, jejichž zprovoznění se předpokládá v roce 2011. V současné době je podána žádost o posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a projednává se dokumentace k územnímu rozhodnutí, aby v letošním roce mohlo být vydáno územní rozhodnutí. V rámci rozpočtu kapitálových výdajů roku 2008 se předpokládá zpracování dalšího stupně projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a zahájení realizačních prací.

8560 - Komunikační propojení MČ Praha 12 s Praž. okruhem
Účelem stavby je propojení silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) s MČ Praha 12. Stavba se člení na etapu 0001–hlavní trasa a etapu 0002-křižovatka. Stavba je ve fázi projednaných variantních studií řešení propojení s tím, že u etapy 0001 ZHMP odsouhlasilo zadání změny územního plánu, které se projednává a u etapy 0002 se projednává dokumentace k územnímu řízení. Navrhované finanční prostředky na rok 2008 umožní dokončit přípravu stavby a vlastní zahájení stavebních prácí.

8561 - Okružní křižovatka Tupolevova - Veselská
Jedná se o rekonstrukci křižovatky v Praze – Letňanech, která nahradí provizorní kruhový objezd, jež nesplňuje požadované parametry na bezpečnost a plynulost provozu. Stavba je ve fázi projednávání dokumentace pro územní řízení s předpokladem ukončení projektové přípravy ve IV. čtvrtletí roku 2007. Navržené finanční prostředky na rok 2008 umožní dofinancovat projektovou přípravu stavby a zajistit vlastní výstavbu.

8562 - Vysočanská radiála-úsek MO-Kbelská
Předmětná část  Vysočanské radiály navazuje na zahájenou stavbu  této radiály v úseku  Kbelská – Novopacká a její realizace umožní převedení automobilové dopravy směřující do a z centra města z přetížené uliční sítě Vysočan a Libně na nadřazenou komunikační síť. Jedná se o čtyřpruhovou směrově rozdělenou  komunikaci o délce cca 3,5 km napojenou v MÚK Balabenka na městský okruh a v MÚK Kbelská na  průmyslový polookruh a zmíněný první úsek radiály. Kromě toho je součástí stavby mimoúrovňová křižovatka Vysočanská připojující na radiálu  stávající Vysočanskou ul. („estakáda“). Před napojením do uzlu Balabenka  je trasa radiály  vedena v tunelu o délce cca 1 km. Ve schváleném Územním plánu hl.m. Prahy je pro stavbu zachována  pouze územní rezerva, neboť účelnost její realizace je podmíněna výstavbou a zprovozněním městského okruhu v úseku  Pelc Tyrolka – Balabenka – Štěrboholská radiála.  Vzhledem ke komplikovaným koordinačním vazbám  v uzlu Balabenka (městský okruh – Vysočanská radiála – Libeňská  spojka  -  místní síť) a náročnosti  průchodu  trasy radiály složitým územím  je navíc nutno  podrobnějším řešením vytvořit podmínky pro průchodnost a projednatelnost trasy, k níž dosud trvá záporný postoj Hygienické stanice hl.m. Prahy a Městské části Praha 9.  Tomu také odpovídá  potřebná délka období  předprojektové studijní přípravy (včetně nutnosti posouzení  vlivů stavby na životní prostředí  dle zák. 100/ 2001 Sb. – „EIA“)  podmiňující přípravu stavby k zahájení realizace v bezprostřední  návaznosti po uplynutí  časového horizontu platného územního plánu HMP. Rozpočtovaná výše kapitálových výdajů na rok 2008 je určena na zajištění potřebné  projektové přípravy stavby.

9515 - MO Myslbekova – Prašný most
Trasa je projektována se dvěma automobilovými tunely po dvou jízdních pruzích. Projekt respektuje kontakt s trasou tramvajové, železniční a autobusové dopravy. Na trase jsou  křižovatky Malovanka a Prašný most. Stavba se napojuje na 2.stavbu Strahovského tunelu, která začíná 55 m hloubeným úsekem, pokračuje ražbou v délce 552 m směrem k Prašnému mostu a dále opět hloubeným úsekem v délce 308 m do prostoru křižovatky Prašný most, ukončený  100 m za křižovatkou.  Mezi připojovací a výjezdní rampou křižovatek Malovanka a Prašný most je příčné uspořádání (2 + 2 pruhy) rozšířeno i ve smyslu doporučení Ústavu dopravního inženýrství jedním manipulačním pruhem v každém tunelu na 3 + 3. Délka úseku činí 915 m. Návrh rozpočtu  na rok 2008 zahrnuje náklady na přípravu tj. financování autorského dozoru stavby, úpravy dokumentace a studie (např. vliv konečné polohy rampy 1 přes dejvické centrum, stavby Strahov 2A a 2B), realizace geotechnického monitoringu, inženýrská činnost, náhrady za likvidace objektů, úpravy dokumentace (např. mostu před Svatovítskou vlivem uspořádání dejvického centra). V rámci realizace budou hrazeny stavební práce vlastní stavby a přeložky inženýrských sítí. Předpoklad zahájení realizace v 11/2007. V roce 2008 bude zahájena ražba severního i jižního tunelu od Myslbekovy směrem na Prašný most v předpokládané délce 490 m. Současně budou zahájeny hloubené tunely v oblasti Prašného mostu. Výkupy  - dofinancování výkupů pozemků pro stavbu ve výši cca. 11 mil. Kč. Změna celkových nákladů stavby vychází z uzavřených výběrových řízení stavební a technologické části stavby a koresponduje s modelem financování strategických investic hlavního města Prahy.

9524 - Strahovský tunel 3. stavba
Tato stavba je realizována po etapách. V roce 2008 se předpokládá realizace zbývající 9. etapy – odvodňovací štola. Jedná se o cca 400 m odvodňovací štoly včetně štoly přístupové, propojovací, štol jímacích a čerpací stanice, situovaných v prostoru jižní části Strahovského tunelu na základě stavebního povolení z května 2005. Návrh rozpočtu na rok 2008 zahrnuje výdaje na realizaci štoly.

9567 - Radlická radiála JZM - Smíchov
Radlická radiála JZM – Smíchov bude páteřní komunikací spojující již provozovaný úsek Radlické radiály (Rozvadovská spojka – dálnice D5) a městský okruh v prostoru Zlíchova (již realizovaný podjezd pod Strakonickou ul.). Celková délka trasy je cca 6,0 km. Trasa je vedena směrem od dálnice D5 nejdříve na povrchu (v oblasti Prahy 13), ve středním úseku navazují dva hloubené tunely (Butovice o dl. 341 m a Jinonice o dl. 307 m) a končí v prostoru Radlic 2 200 m dl. převážně raženými tunely (stoupající třípruhový o spádu 4,8 %, klesající dvoupruhový). Z dopravního hlediska jde o směrově rozdělenou komunikaci funkční třídy B1. Na trase je situováno celkem pět mimoúrovňových křižovatek. V současné době probíhají práce na DÚR stavby. Při projednávání vlivu stavby na životní prostředí (EIA) na Obvodním báňském úřadu (OBÚ) Kladno byl ze strany OBÚ Kladno vysloven požadavek na nezbytnost prověření geologických poměrů v prostoru jižního portálu průzkumnou štolou v orientační délce 300m. Tato štola a její výsledky musí být známy před zahájením prací na dokumentaci ke stavebnímu povolení. V současné době probíhají práce na výběru zhotovitele průzkumné štoly s termínem zahájení 1.9.2007. V rámci navrhovaného rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2008 se předpokládá pokračování průzkumné štoly a zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení a zahájení výkupů potřebných pro podání žádosti o vydání stavebního povolení. Ke zvýšení celkových investičních nákladů stavby dochází v návaznosti na změnu sklonu trasy, prodloužení ražených tunelů o cca 500 m, prodloužení hloubených tunelů Jinonice o cca 130 m, nový podjezd pod ČD a doprovodné komunikace.

0000 - Komunikace Toužimská
Jedná se o výstavbu propojovací komunikace mezi ulicí Mladoboleslavská (MČ Praha – Kbely) a ulicí Veselská (MČ Praha – Letňany). Projekční a investorská příprava této stavby byla zahájena v rámci stavby č. 0093 – TV Kbely, etapa 0008 – Toužimská. Z důvodu strategického významu pro zajištění dopravní obslužnosti severovýchodní části hl. m. Prahy a koordinace s dalšími dopravními stavbami (st. č. 7552 – Budovatelská – Mladoboleslavská a 0053 – Vysočanská Radiála), bylo rozhodnuto o zařazení této stavby do kapitoly 0321.

0000 - SPO 2. stavba – Ve Studeném-Barrandov
Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na tuto stavbu pro rok 2008 představuje nutné úpravy ochrany vodovodu JS 1200 pod ulicí Na Mlejnku. Tento vodovod byl realizován v rámci stavby 9561 – SPO 2. stavba – Ve Studeném - Barrandov. Po dokončení realizace v roce 1985 zástupce Pražských vodáren odmítl objekty převzít a požadoval opravy, které byly zahrnuty do prací realizovaných v letech 2001 a 2002 (oprava a zastřešení vstupu, opravu podlahy a vstupních dveří, nátěry kovových konstrukcí, doplnění nuceného provětrávání, katodová ochrana proti bludným proudům, repase elektroinstalace, oprava gravitačního odvodnění, oprava vstupních šachet, chodníku a břehového opevnění, oprava a úprava kompletní dokumentace díla včetně dokladů o kvalitě). Následně se uskutečnila dne 26.6.2002 přejímka za účasti PVK a.s. a PVS a.s. Zástupci provozovatele opět odmítli objekt převzít pro údajně  zvýšenou vlhkost vnitřního prostoru, kolaudační řízení nemohlo být tedy zahájeno a provozovatel přislíbil zajistit si vlastní expertní posudek vlhkosti. Zvýšená míra vlhkosti vnitřního prostředí vždy vyplývala z kondenzace vodních par na chladnější stěně procházejícího potrubí DN 1200. K jistému snížení vysoké míry vlhkosti přispěl instalovaný ventilátor, která však sám o sobě nemůže tento problém zcela vyřešit. Žádné další přítoky, např. v důsledku vadné izolace v kolektoru nebyly v době přejímky zjištěny. Než mohlo být přerušené řízení obnoveno a případně ukončeno, došlo v srpnu 2002 k poničení celého díla povodní. Následně byla provedena technická prohlídka objektu, při které bylo zjištěno, že vysoká voda zcela kolektor zatopila, vyvalila těsnění kolem průchodek potrubí a do kolektoru se naplavilo velké množství okolního štěrku. Byla poničena elektroinstalace, katodová ochrana a čerpadla. Jelikož realizace prací pouze charakteru oprav by nevedla k vyřešení připomínek provozovatele, doporučujeme zařadit do rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2008 rozsáhlejší stavební úpravy, které povedou ke změně technického řešení kolektoru tak, aby míra vlhkosti odpovídala dnešním požadavkům provozovatele a zároveň aby kolektor byl chráněn před případnou další povodní.

Kapitola 0421
4492 - ZŠ Vinoř-přístavba
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení zpracována, stavební povolení vydáno. Zpracovává se dokumentace pro výběr dodavatele. Stavba řeší potřebu nového zázemí základní školy Vinoř pro stravování žáků a učitelů. Nová část nahradí dnes již nevyhovující provizorní přístavek mezi objektem ZŠ a kuchyní. Na rok 2007 je vyčleněno v rozpočtu MHMP na přípravu a zahájení realizace této stavby 3 500 tis. Kč.  Pro realizaci této stavby se navrhuje vyčlenit v rozpočtu kapitálových výdajů pro rok 2008 částku 56 000 tis. Kč. Dokončením této stavby bude vytvořeno odpovídající zázemí pro stravování žáků, učitelů a případně i obyvatel této městské části.

4545 - IP pro kapitolu 0421
Výdaje na projektovou přípravu a inženýrskou činnost staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na běžný rok.

4546 - Základní škola Jahodnice
Jde o stavbu připravovanou v souvislosti s rozsáhlou výstavbou bytů v Jahodnici a jejím blízkém okolí. V r. 2007 jsou prováděny práce spojené se zajištěním pozemku a přípravou územního řízení. Nová základní škola bude mít 18 kmenových učeben, dále odborné pracovny, prostory pro školní družinu, školní kuchyň s jídelnou, tělocvičnu a atletické hřiště. Pro r. 2008 se uvažuje s náklady na dokončení územního řízení, stavební řízení a výběr zhotovitele.

4548 - Gymnázium Ch. Dopplera
Realizací této stavby dojde k výstavbě kuchyně, jídelny a šaten v dvorní části areálu školy. Tato kuchyň s jídelnou splnění zákonné povinnosti stravování žáků víceletých gymnázií.  V současné době je stravování žáků a personálu školy zajišťováno mimo budovu školy, což je v roce 2007 nepřípustné. Předpokládané celkové náklady 35 mil. Kč. Na stavbu je zpracovaná projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. Předpoklad realizace  stavby v roce 2008.  Zpracovává se dokumentace pro výběr dodavatele. Na rok 2008 je na realizaci stavby navrženo vyčlenit v rozpočtu kapitálových výdajů 30 mil. Kč.

4549 - Gymnázium Budějovická
Projektová dokumentace pro vydání UR a stavebního povolení zpracována a projednává se ve spojeném řízení. Stavba řeší potřebu ubytování personálu školy v půdní vestavbě nad stávající tělocvičnou a kuchyňským blokem objektu školy. Související rekonstrukcí střešního pláště budou odstraněny již několik let se opakující závady a zatékání střechou do objektu, zároveň dojde k zateplení obvodového pláště vedlejších objektů gymnázia. Pro realizaci této stavby se navrhuje vyčlenit v rozpočtu kapitálových výdajů pro rok 2008 částku 30 mil. Kč. Dokončením této stavby bude vytvořeno odpovídající zázemí pro ubytování učitelů a školníka.

7057 - ZŠ Kunratice, dostavba a rekonstrukce
V roce 2006 byla zahájena vlastní stavba, která spočívala ve výstavbě tělocvičny včetně zázemí, dílen, komunikace a sociálního prostoru a pavilonu č.1, ve kterém jsou situovány učebny. V 09/2007 se předpokládá ukončení stavby dle původního rozsahu a následně s její kolaudací. V průběhu výstavby došlo na základě požadavku správce ZŠ Kunratice k požadavkům na dodatečné stavební práce, které spočívají především v rekonstrukci stávající budovy, respektive stávajících učeben a ve výstavbě venkovních šaten. Další dodatečné stavební práce vyplynuly z přejímacích řízení jednotlivých objektů a to především tělocvičny. Realizace těchto prací, které si vyžádají stavební řízení lze provést až v roce 2008 s tím, že nenaruší provoz učeben, respektive celé ZŠ Kunratice.

8389 - ZŠ gen.F.Fajtla-výstavba tělocvičny
Realizací této stavby dojde k výstavbě sportovního  areálu v blízkosti stávající školy. Tento areál rozšíří možnost tělovýchovy v rámci školní výuky v moderním zařízení a zároveň poskytne i možnost sportovních aktivit obyvatel městské části v časech mimo školní výuku, o víkendech a prázdninách. V roce 2007 byla odsouhlasena změna umístění a koncepce řešení. Výstavba je nyní uvažována na přilehlém pozemku, který zakoupila městská část Praha – Letňany. Z tohoto důvodů je nutno vypracovat nové návrhy včetně podkladů pro nové územní řízení. Na rok 2008 je navrženo vyčlenit v rozpočtu kapitálových výdajů 50 mil. Kč (na zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení a zahájení stavby).

8499 - ZŠ Dr. E. Beneše Čakovice
Jedná se o nástavbu a rekonstrukci ZŠ Dr.E.Beneše v MČ Praha – Čakovice. Součástí stavby je výstavba tělocvičny včetně zázemí. V r. 2007 byla zahájena realizace této stavby jejíž ukončení bude v roce 2008.

0000 - Dofakturace pro kapitolu 0421
Jedná se o proplácení faktur za práce provedené na dokončených stavbách do konce roku 2007, které budou předloženy k proplacení v roce 2008 a stavbách, jenž nejsou jmenovitě zařazeny ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2008.

0000 - Gymnázium Sladkovského
Realizací této stavby dojde k výstavbě stravovacího provozu v areálu školy. Stávající kuchyň a jídelna jsou z hygienického hlediska naprosto nevyhovující a pokud do konce roku nedojde k nápravě, hrozí uzavření školy. Předpokládané celkové náklady 60 mil. Kč. Na stavbu je zpracovaná projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. Předpoklad realizace  stavby v roce 2008.  Zpracovává se dokumentace pro výběr dodavatele. Na rok 2008 je na realizaci stavby navrženo vyčlenit v rozpočtu kapitálových výdajů 60 mil. Kč.

0000 - Konzervatoř J. Ježka
Realizací této stavby dojde k nástavbě stávajících objektů školy, ve kterých budou umístěny dva zkušební sály včetně zázemí a učeben. Stávající stav a uspořádání nevyhovuje z hlediska kapacity a zaměření školy. Předpokládané celkové náklady 60 mil. Kč. Předpoklad realizace  stavby v roce 2008 a 2009. Na stavbu je zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. Zpracovává se dokumentace pro výběr dodavatele. Na rok 2008 je na realizaci stavby navrženo vyčlenit v rozpočtu kapitálových výdajů 40 mil. Kč.

0000 - Mateřská škola Jahodnice  
Jde o nově navrženou stavbu na základě žádosti Městské části Praha 14 v souvislosti s výstavbou bytů v oblasti Jahodnice, které v nejbližším období představují cca 120 nových bytů v bytových domech a 142 rodinných domků. Nová mateřská škola bude mít 3 třídy vč. kabinetu, šaten, heren, sociálního zařízení a stravovacího zařízení. Se stavbou školských zařízení se počítá i v územním plánu. Pro r. 2008 se uvažuje s náklady  na přípravu stavby, tj. DUR a DSP vč. IČ.

0000 - SOŠ Dobronická
Rekonstrukce stávajícího provozního pavilonu školy zajistí stravování žáků školy a ubytovací prostory. Předpokládané celkové náklady 40 mil. Kč. Na stavbu je zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. V roce 2008 se předpokládá realizace stavby. Zpracovává se dokumentace pro výběr dodavatele. Na rok 2008 je na realizaci stavby navrženo vyčlenit v rozpočtu kapitálových výdajů 40 mil. Kč.

0000 - Základní škola Kolovraty
Na základě informací zastupitelstva městské části Praha Kolovraty a zpracované demografické studie stávající kapacity školních zařízení zmíněné městské části jednoznačně vyplývá potřeba výstavby nové školy, která by zajistila v této lokalitě výuku dětí školního věku. Nová moderní školní budova má jednak zajistit potřebnou kapacitu pro výuku, jednak by měla svým vybavením umožnit kvalitnější vzdělávání za použití moderní techniky a komunikace. Na rok 2008 je na projektovou a inženýrskou přípravu navrženo vyčlenit v rozpočtu kapitálových výdajů 25 mil. Kč.

0000 - ZŠ Lipence-výst. tělocvičny
Jedná se o výstavbu víceúčelové sportovní haly, která řeší dostavbu ZŠ v MČ Praha – Lipence. Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí a v roce 2007 se předpokládá s ukončením investorské přípravy a následně v roce 2008 s vlastní realizací stavby.

0000 - ZŠ Zličín
Jedná se o novostavbu budovy pro základní devítiletou školu s kapacitou 18 tříd. Součástí stavby je zřízení sportovního hřiště a dalších podmiňujících objektů. V r. 2007 byla zahájena projekční a investorská příprava stavby. V r. 2008 se předpokládá s ukončením těchto prací s tím, že stavba bude připravena k realizaci v r. 2009.

Kapitola 0521
0200 - Dostavba ÚSP Palata
Dostavba budovy A, C – projektová dokumentace byla vypracována a bylo na ní vydáno stavební povolení. Obsahem stavby jsou jak ubytovací prostory včetně sociálních zázemí, tak i přestavba stravovacího komplexu. Vzhledem k časovému odstupu od zpracování této dokumentace zpracoval projektant  fa DAKA s.r.o. aktualizovanou dokumentaci pro stavební povolení, která řeší koncepční, provozní a technické požadavky na dostavbu komplexu ÚSP Palata. Jedná se o rekonstrukci kuchyně,  kogenerační jednotku, náhradní zdroj el. energie, kontejnery a chlazení, stavební úpravy v objektu ÚSP Palata z hlediska požární bezpečnosti, úpravy topného systému a rehabilitaci, úpravu atria. Předpoklad zahájení realizace ve 4. čtvrtletí 2007. Rozpočet na r. 2008 musí zajistit finanční prostředky umožňující dokončení stavby v tomto roce s ohledem na nepříznivé podmínky v prostorách stávajícího objektu při rekonstrukci kuchyní a rehabilitačního zařízení. Tato rekonstrukce značně ztěžuje pobyt slabozrakých seniorů a provoz zajišťovaný personálem ústavu.

0236 - Dofakturace pro kap. 0521
Jedná se o proplácení faktur za práce provedené na dokončených stavbách do konce roku 2007, které budou předloženy k proplacení v roce 2008 a stavbách, jenž nejsou jmenovitě zařazeny ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2008.

7649 - DD Praha 6
Usnesení RHMP č. 0174 ze dne 21.5.2002 vyslovilo souhlas se záměrem prodeje objektu Domova důchodců v Praze 6, Šolínova ul. s tím, že finanční prostředky budou použity na výstavbu nového domova důchodců na území Městské části Praha 6. Uvedené rozhodnutí vychází z technického stavu celkem 6 čtyřpodlažních budov postavených v roce 1924 a 1930, který neumožňuje plnit funkci domova důchodců. V 06/2006 byla vypracována dokumentace pro územní řízení. Byla navržena lokalita „Za Kajetánkou“  v Praze 6 – Břevnově. Kapacita objektu je 198 lůžek ve 138 pokojích. Dokumentace byla projednána s orgány a organizacemi a požádáno o územní rozhodnutí.V roce 2007 probíhá územní řízení a bude zajištěno stavební povolení. Předpoklad zahájení stavby je ve IV. čtvrtletí 2007. V roce 2008 jsou navržené finanční prostředky určeny k plynulému pokračování realizace stavby s cílem dokončení v r. 2009.

8211 - Administrativně-technická budova ZZS 
Jedná se o areál Zdravotnické záchranné služby situovaný na pozemku jihovýchodně od stávajícího areálu nemocnice Na Bulovce. Stavba má udělenou výjimku ze stavební uzávěry dopravní stavby Libeňské spojky a má vydané územní rozhodnutí. Současně probíhá výběr zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení. Navrhované finanční prostředky do rozpočtu stavby umožňují dokončit projektovou přípravu a zahájit vlastní realizaci stavby v roce 2008 s předpokládaným ukončením v roce 2010.

8212 - Rekonstrukce DD Praha 4 -  Sulická
V roce 2006 byla etapou 0001 – pravé křídlo DD zahájena postupná rekonstrukce Domova důchodců v Praze 4, Sulické ulici, která byla (etapa 0001) v tomtéž roce dokončena a zkolaudována. Rekonstrukcí se pobyt klientů ve výše uvedeném zařízení dostává kvalitativně do daleko vyšší třídy. Jsou zde nově vytvořeny jednolůžkové pokoje s moderním komunikačním zařízením a vlastním sociálním zařízením, umožňujícím život klientů v soukromí a zároveň moderním prostředí. Jednotlivé pokoje jsou připraveny tak, že při zhoršení zdravotního stavu není nutno stěhovat klienty do pater s příslušným vybavením, ale příslušné vybavení se dopraví a nainstaluje do pokoje klienta. Na etapu 0002 – levé křídlo DD byla v roce 2007 zahájena projektová a investorská příprava. Realizace této etapy se předpokládá v průběhu roku 2007 a 2008. Výběr dodavatele proveden. Na rok 2008 je na tuto realizaci navrženo vyčlenit v rozpočtu kapitálových výdajů 26 mil. Kč.
8932 - Multifunkční objekt MČ Praha 17
Pro tuto stavbu bylo vydáno stavební povolení. Celkové investiční náklady stavby činní 150 mil. Kč. Pro rok 2008 je zahrnuto do návrhu rozpočtu kapitálových výdajů celkem 50 mil. Kč pro zahájení realizace této stavby. Multifunkční objekt v městské části Praha 17 zkvalitní občanskou vybavenost této lokality a umožní jejím obyvatelům využití nejrůznějších služeb a kulturních a společenských akcí.

0000 - DD Praha 13
Na základě požadavku MČ Praha 13 zajišťuje OMI MHMP přípravu a realizaci DD Praha 13 (Domov seniorů) na pozemcích obce v k.ú Stodůlky. Předběžné stavební náklady jsou stanoveny limitem 160 mil. Kč, tomu odpovídá kapacita cca 130 - 150 lůžek. Vlastní náplň a kapacity budou upřesněny po zpracování a projednání DÚR. V r. 2007 proběhne pouze zadání veřejných zakázek na zajištění IČ a projektových prací. Vlastní příprava - projektové práce proběhnou v r. 2008.

Kapitola 0621
0000 - Lanovka Pankrác
Jedná se o vyhlídkové spojení pankrácké pláně a pravým vltavským břehem. Navržené finanční prostředky na rok 2008 představují náklady na přípravu stavby a projektovou dokumentaci (UR + SP).

0000 - Servisní střediska čtyři mariny
Přístaviště sportovních a turistických lodí s nezbytným zázemím obvyklým pro tyto účely. Přístaviště (marina) Zbraslav na Berounce doplněná o přístav lodí za stavu ohrožení při prvním stupni povodňové aktivity, zařízený pro tělesně hendikepované. Dalšími lokalitami jsou přístav Podolí, Štvanice a Trója. Marina Libeň by měla být součástí Maniny oddychová zóna. V roce 2008 se jedná o DUR výběr zhotovitele a mandatáře.

Kapitola 0721
0207 - Hasičská stanice Sokolská
Stavba je rozdělena na 2 etapy. První etapa byla dokončena. Předmětem 2. etapy je rekonstrukce 4. NP, ve kterém budou umístěny šatny a ložnice mužstva, místnost posilovny, praní a sušení prádla, sociální zařízení (sprchy+WC). Dále je součástí výtah, provedeny úpravy ve stávající kotelně a rozšíření TS. Rovněž bude provedena výměna oken ve fasádě do ulice Legerova. V rámci rozpočtu na r. 2008 jsou nutné finanční prostředky z důvodů, že zajistí dokončení stavby, jelikož sociální zázemí ve stávajícím objektu je v havarijním stavu a dále je třeba zvýšit kapacitu TS vzhledem k rozšíření areálu a zabudování nových technologií.

0222 - Hasičská stanice Holešovice
Jedná se o stavbu centrální hasičské stanice s dispečinkem, jako základní součást  integrovaného záchranného systému pro hl.m.Prahu o předpokládaných investičních nákladech 250 mil.Kč. Stavba má vyhotovenou dokumentaci pro územní řízení., dokončení projektové přípravy se předpokládá do konce roku 2007 a realizace vlastních stavebních prací v letech 2008 a 2009. Navržené finanční prostředky na rok 2008 umožní dokončení projektové přípravy stavby.

4649 - Hasičská zbrojnice Letňany
Jedná se o rekonstrukci a dostavbu objektu HZ Letňany v rámci vybudování komplexního záchranného systému v Praze. Projektová příprava stavby je ve fázi vydaného pravomocného územního rozhodnutí a veřejnoprávního projednání DSP. Předpoklad vydání stavebního povolení a zahájení stavebních prací je ve III. čtvrtletí 2007. Schválený rozpočet na rok 2008 umožní vlastní realizaci stavby s předpokládaným termínem dokončení v roce 2008.

4650 - Hasičská zbrojnice Dubeč
Tato stavba je ve stádiu přípravy vydané projektové dokumentace pro ÚR, které se v současné době projednává. Předpoklad vydání ÚR v 06/2007.  Stavba řeší přípravu území a výstavbu objektu stanice HZS v areálu HMP v Praze – Dubči. Pro realizaci této stavby se navrhuje vyčlenit v rozpočtu kapitálových výdajů pro rok 2008 částku 25 000 tis. Kč. Dokončením této stavby bude vytvořeno odpovídající zázemí pro Hasičskou záchrannou službu a Městskou policii v této lokalitě a připraven prostor pro výstavbu skladového areálu.

8089 - Hasičská zbrojnice – přístavba MČ Řeporyje
Jedná se o rekonstrukci hasičské zbrojnice, která je umístěna vedle stávající pošty v Praze-Řeporyjích. Stavba má vydané stavební povolení a předpoklad výběru zhotovitele a zahájení vlastní realizace je v třetím čtvrtletí roku 2007. Navržené finanční prostředky do rozpočtu stavby umožní její dokončení v roce 2008.

8933 - Hasičská zbrojnice Dolní Měcholupy
Jedná se o novou typovou hasičskou zbrojnici pro lokalitu Praha–Dolní Měcholupy budované v rámci komplexního záchranného systému v Praze. Stavba má vydané pravomocné stavební povolení a předpoklad dokončení výběru zhotovitele je v třetím čtvrtletí r.2007. Na základě upřesnění vycházející z projektové přípravy se předpokládané investiční náklady stavby zvýšily o 10 mil.Kč. Navržené finanční prostředky do rozpočtu stavby umožní její dokončení v roce 2008.

0000 - Centrální dvůr protipovodňové ochrany Praha 7
Tato stavba je ve stádiu přípravy. Řeší vytvoření prostor pro skladování protipovodňových stěn v hale o výměře cca 2 500m2 a dále zázemí pro OŘ Městské policie. Celkové náklady na realizaci tohoto díla jsou odhadnuty na 56 mil. Kč. Pro realizaci této stavby se navrhuje vyčlenit v rozpočtu kapitálových výdajů pro rok 2008 částku 30 mil. Kč na dokončení projektové a investorské přípravy včetně zahájení stavby. Dokončením této stavby bude vytvořeno odpovídající zázemí pro Hasičskou záchrannou službu v této lokalitě a zabezpečeno skladování protipovodňových zařízení pro celé hlavní město.
Kapitola 0821
9394 - Plavecký areál Šutka
Jedná se o dlouhodobě rozestavěnou stavbu plaveckého areálu. na které byly práce zastaveny je zajišťována pouze ostraha. Na pokračování stavby byly zpracovány alternativní studie a po rozhodnutí o vybrání studie bude pokračovat příprava stavby (změna  ÚR a SP nebo nové ÚR a SP). Vlastní pokračování stavebních prací by mohlo být zahájeno ve III. čtvrtletí roku 2008.

0000 - Slavnostní osvětlení
Od roku 2000 přišly postupně na OMI MHMP žádosti a zajištění slavnostního osvětlení několika kostelů v různých částech Prahy, části zámku v Horních a Dolních Počernicích, sochy W. Churchilla na Žižkově, historické školy, kapličky a památníku padlých v Dolních Měcholupech, Českého hydrometeorologického ústavu. Navrhuje se zařadit tuto stavbu do investičních akcí OMI MHMP z důvodů osvětlení historických nebo dominantních staveb jednotlivých městských částí.

0000 - Veřejné osvětlení Lipence
Od roku 2002 postupně  přišlo na OMI MHMP několik žádostí o doplnění veřejného osvětlení od Městské části Lipence. Jedná se o zajištění veřejného osvětlení  v ulicích K Průhonu, Obsiny, spojnice ul. U Lip – K Vlásence, Na Lhotkách, K Samoobsluze, Kazín – bezejmenná, Na Kyjově. První žádost byla zaslána již 14.11.2002. Žádosti byly původně zařazeny do stavby 0151. Protože se jedná o velký objem prací, navrhuje se realizovat osvětlení v Lipencích jako samostatnou stavbu, protože stavba 0151 - Drobné blíže nespecifikované stavby – je určena pro realizaci drobných požadavků na doplnění veřejného osvětlení v různých částech Prahy.

0000 - Veřejné osvětlení Slivenec
Na základě dopisu OMI MHMP čj.OMI/1927/735/2007 ze dne 28.3.2007 na Úřad MČ. Praha Slivenec, navrhujeme zařazení samostatné stavby „Veřejné osvětlení Slivenec“ do rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2008. Od roku 2003 postupně  přišlo na OMI MHMP několik žádostí o doplnění veřejného osvětlení od Městské části Slivenec. Jedná se o velký objem prací v ul. K Cikánce, Na Čisté, ul.bezejmenná, K Homolce.

0000 - Veřejné osvětlení  Suchdol
Městská část Suchdol zaslala na OMI MHMP od roku 2004 postupně  několik žádostí o doplnění veřejného osvětlení v obci Suchdol. Jedná se o osvětlení ulice K Horoměřicům, křižovatky ul. Kamýcká - Internacionální, náměstí před Úřadem Mč, komunikace před Trojanovým mlýnem. Žádosti byly původně zařazeny do stavby 0151. Protože se jedná o velký objem prací, navrhuje se realizovat osvětlení v Suchdole jako samostatnou stavbu. 

Kapitola 0921
0000 - Úřad MČ Praha Benice, rek. a dostavba
Na základě informací Zastupitelstva městské části Praha Benice a dále vzhledem k současnému způsobu zajištění provozu úřadu městské části Praha Benice je navrženo vyčlenit v návrhu rozpočtu kapitálových výdajů pro rok 2008 částku 10 mil. Kč pro přípravu a zahájení rekonstrukce a dostavby budovy úřadu MČ. Celková investiční náročnost této stavby je cca 25 mil. Kč a realizací tohoto díla dojde ke zkvalitnění služeb občanům zmíněné městské části a vybudování důstojného prostředí pro zaměstnance a úředníky MČ.

0000 - Úřad MČ Přední Kopanina, rek. a dostavba 
Na základě informací Zastupitelstva městské části Praha Přední Kopanina a dále vzhledem k současnému způsobu zajištění provozu úřadu této MČ je navrženo vyčlenit v návrhu rozpočtu kapitálových výdajů pro rok 2008 částku 10 mil. Kč pro přípravu a zahájení rekonstrukce a dostavby budovy úřadu MČ. Celková investiční náročnost této stavby je cca 25 mil. Kč a realizací tohoto díla dojde ke zkvalitnění služeb občanům zmíněné městské části a vybudování důstojného prostředí pro zaměstnance a úředníky MČ.