Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci 
Vzorová smlouva o dílo
č. objednatele: DIL/54/11/000XXX/2007	         č. zhotovitele: 	
evidenční číslo OOP MHMP:   AXXX/2007
uzavřená podle § 536 a násl. z.č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, v platném znění a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:
1. 	Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1 
zastoupené Ing. arch. Janem Winklerem, ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP
IČ:     00064581
DIČ:  CZ00064581
Bankovní spojení:  PPF banka a.s., Na Strži 1702/65, Praha 4
                               číslo účtu:  27-5157-998/6000
(dále jen „objednatel“)
2. 	                          , se sídlem 
zastoupená  
IČ:     
DIČ:  
Obchodní rejstřík:  
Bankovní spojení:  
                               číslo účtu:  
(dále jen „zhotovitel“) 

I.
Předmět smlouvy
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele zhotovení díla – stavebních prací: „Odbahnění nádrže VD Džbán“ na pozemcích objednatele č. parc. 712/1 v k.ú. Liboc, obec  Praha a to v souladu s projektovou dokumentací (Odbahnění nádrže VD Džbán – zpracované Ing. Cyrilem Mikyškou AŽP č. zakázky 55107/P), s ohlášením udržovacích prací č.j. MHMP-36304/2003/VYS/Pv ze dne 4.6.2003, s podmínkami této smlouvy a rovněž pokyny objednatele udělenými v průběhu provádění díla (dále jen „dílo“). Smluvní strany jsou rovněž vázány zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Odbahnění nádrže VD Džbán“ vyhlášené dne 4.1.2008 v ISVZ US pod evidenčním číslem 60013940 formou otevřeného zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. a nabídkou zhotovitele podanou na tuto veřejnou zakázku.

II.
Vymezení díla
1.	Rozsah díla je vymezen:
1.1.	Zadávací dokumentací vč. příloh k veřejné zakázce „Odbahnění nádrže VD Džbán“ zahájené dne 04.01.2008 uveřejněním oznámení zadávacího řízení v ISVZ pod evidenčním číslem 60013940. 
1.2.	Nabídkou zhotovitele ze dne DD.MM.2007, předloženou v zadávacím řízení na uvedenou veřejnou zakázku. 
2.	Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu uvedenou v nabídce zhotovitele. Za  výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně jako by je provedl sám. Případná změna subdodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele.

III. 
Doba plnění a místo plnění
1. 	Termín zahájení díla:  do 5 dnů od předání staveniště objednatelem zhotoviteli, 
Doba provádění díla (v kalendářních dnech):	....................... 
Zhotovitel bude provádět dílo dle harmonogramu postupu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
2. 	Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění dle článku II. odst. 1. této smlouvy o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě.  
Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla.  Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné mrazy nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším než 3 dny v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem objednatele.
Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.
3.	Místem plnění díla je VD Džbán k.ú. Vokovice, Praha 6.

IV.
Cenové ujednání a platební podmínky
1. 	Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (výkaz výměr), která je jako její nedílná součást přílohou č. 2 této smlouvy. Nabídková cena se považuje za cenu konečnou, pevnou a neměnnou a musí obsahovat veškeré náklady potřebné ke splnění veřejné zakázky. 
Cena za dílo: 
Cena celkem bez DPH		
DPH ve výši 19%		
Cena celkem včetně DPH		
slovy:  	
2.	Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k 28. dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Přílohou zjišťovacího protokolu budou též vážní lístky z příslušné skládky. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků VIII. a X. této smlouvy . 
3.	Cena díla bude dílčími měsíčními fakturami hrazena až do výše 90% dohodnuté ceny (vč. DPH). Zbývajících 10% ceny bude proplaceno po předání a převzetí díla  a odstranění vad a nedodělků na základě konečné  faktury. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel a odešle objednateli nejpozději do 30 dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla. 
4.	Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky,  počne běžet lhůta splatnosti konečné faktury dnem podepsání  zápisu o odstranění vad a nedodělků.
5.	Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny ve třech vyhotoveních a doručeny objednateli na adresu Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35, 110 00 Praha 1 nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.
6.	Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 60 dní od  doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
7.	Oprávněně vystavené faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 235/2004 Sb. a musí obsahovat tyto údaje:
•	označení zhotovitele - obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení a údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky,
•	číslo smlouvy, předmět díla,
•	číslo faktury, den odeslání, den splatnosti a fakturovanou částku,
•	razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury.
8.	V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.  
9.	Nabídkovou cenu je možno v průběhu plnění této veřejné zakázky změnit v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové (fakturované) ceny, a to zejména v případě změny sazby daně z přidané hodnoty. Změna ceny za provedení díla bude pro tento případ řešena dodatkem ke smlouvě.

V.
Práva a povinnosti zhotovitele
1. 	Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně ve sjednaném rozsahu, kvalitě a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO.Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
2. 	Zhotovitel se bude  při své činnosti  řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. 
3. 	Zhotovitel splní  povinnosti podle této smlouvy  dokončením a předáním předmětu díla objednateli ve smyslu ustanovení čl. VIII. této smlouvy.
4. 	Zhotovitel musí před zakrytím prací, u kterých nelze po zakrytí prověřit jejich kvalitu a vlastní provedení, vyzvat písemně objednatele alespoň tři dny předem k jejich kontrole. Nedostaví-li se zástupce objednatele v uvedené lhůtě a bude požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele, popřípadě na své náklady, pokud se zjistí, že zakryté práce nebyly řádně provedeny. 
5. 	Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, požárních, hygienických a ekologických předpisů na staveništi.
6. 	Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
7. 	Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkcí a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmto závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.
8. 	Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště. Po dokončení díla zhotovitel vyklidí staveniště a uvede dotčené pozemky do původního nebo projektem předepsaného stavu, a to nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla ve smyslu článku VIII. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran. 
9. 	Zhotovitel zajistí  účast svých  zmocněných  odpovědných zástupců  na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem objednatele.
10. 	Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.  Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu (subdodavatele), kterou uvedl ve své nabídce (viz. článek II. odst. 1 bod 1.2. této smlouvy). Za  výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně jako  by je provedl sám. Případná změna subdodavatele musí být písemně odsouhlasena objednatelem. Zhotovitel dále odpovídá za to, že třetí osoba pověřená zhotovitelem k provedení části díla provede tuto část díla vlastními silami bez využití dalších subdodavatelů. 
11. 	Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány se zadavatelem.
12. 	Zhotovitel předá při přejímacím řízení dokumentaci skutečného provedení v trvalém provedení a v digitální formě. Zhotovitel dále předá objednateli při přejímce do užívání veškeré protokoly o přejímkách prací od svých subdodavatelů, protokoly zkušeben (certifikáty/prohlášení o shodě) spolu ostatními doklady a potvrzeními. Do jednoho měsíce od dokončení stavby (podpis protokolu o odstranění vad a nedodělků) budou objednateli předány ve třech vyhotoveních úplné kontrolní dokumenty ke stavební části akce a výkresy skutečného provedení celé stavby včetně všech profesí.
13. 	Zhotovitel je povinen seznámit se s rozmístěním inženýrských sítí a zajistit aby nedošlo k jejich poškození.
14. 	Zhotovitel je v rámci provádění díla v postavení původce odpadů ve smyslu ust. § 4   písm. p) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
15. 	Zařízení staveniště a stavba budou označeny informační tabulí, která bude obsahovat minimálně tyto údaje: jméno stavby, délka realizace, kontakt na zhotovitele a zástupce investora, účel stavby.
16. 	Zhotovitel je povinen být pojištěn proti odpovědnosti za škodu minimálně v rozsahu požadovaném zadávací dokumentací uvedené v čl. II, odstavec I, bod 1.1. smlouvy.

VI.
Práva a povinnosti objednatele
1. 	Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit.
2. 	Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení.
3. 	Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost při realizaci díla. 
4. 	Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště do 5 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Při předání staveniště dále objednatel předá zhotoviteli:
•	příslušná povolení ke stavbě dle zadávací dokumentace
•	příslušnou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních
5.	Před zahájením prací a po dokončení díla nechá objednatel provést geodetické zaměření skutečného stavu sedimentu oprávněnou osobou.

VII.
Řízení stavby, stavební deník, technický dozor
1.	Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časového postupu prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho  pověření zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce technického dozoru objednatele a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené. 
2.	Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů  připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že  s  obsahem záznamu souhlasí.
3.	Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu,  který provedl stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 5 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to,  že s obsahem záznamu souhlasí.
4.	Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru:
Technický dozor objednatele: Ing. Jiří Jílek
Autorský dozor projektanta: Ing. Cyril Mikyška
5.	Technický dozor objednatele zejména:
a)	Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného  projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných  předpisů.
b)	Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této  smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací  protokoly.
c)	Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.
d)	Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit  práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné  škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti  zhotovitele.
e)	Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
6.	Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
7.	Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím  a technickým dozorem objednatele, je důkazem o zapsané skutečnosti a je  podkladem pro případné smluvní úpravy.
8.	Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci. 

VIII. 
Předání díla a převzetí díla
1. 	Dílo bude předáváno měsíčně na základě dílčích plnění v souladu se závazným harmonogramem prací formou předávacího protokolu.
2. 	Konečné předání díla je zhotovitel povinen  písemně oznámit objednateli - zápisem ve stavebním deníku a  dopisem, k jakému datu bude dílo připraveno k přejímacímu řízení, a to minimálně 14 dnů před tímto datem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.
Konečný objem skutečně odtěžených sedimentů bude stanoven na základě geodetického přeměření zátopy před zahájením a po dokončení díla (viz. článek VI. odst. 5) a vypočten z rozdílu měření před zahájením a po dokončení díla.
3. 	O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.  
4. 	Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. 
5. 	Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady,  jejichž původ je ve  schválené projektové dokumentaci, nebo jestliže sám způsobil, že dílo  nevyhovuje.
6. 	Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl, a to bezodkladně po tom, co tyto  vady zjistil nebo zjistit mohl.

IX.
Odstoupení od smlouvy
1.	Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny  v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit.Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
2.	Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne je zhotovitel povinen uhradit.
3.	Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
4.	Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
a)	na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
b)	návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
c)	zhotovitel vstoupí do likvidace,
d)	nastane vyšší moc uvedená v článku  III. odst. 2. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela  nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
5.	Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 4. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
6.	Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 4. tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
7.	Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1., 2. a 4. tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
8.	Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XII. této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
9.	V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
10.	Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet  veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
11.	V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
12.	Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. (tedy od okamžiku zániku smlouvy)

X.
Odpovědnost za vady
1. 	Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno  podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít  vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené  právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti  obvyklé.
2. 	Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce 72 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem  předání a převzetí díla ve smyslu čl. VIII. této smlouvy. 
3. 	Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného  zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a  zásahem třetích osob.
4. 	Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.
5. 	Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro ten účel sjednána. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.
6. 	Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.
7. 	Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1. tohoto článku zhotovitel  neodpovídá jen v  případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
8. 	V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

XI.
Smluvní pokuty a náhrada škody
1. 	Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
a) 	Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného dílčího měsíčního plnění díla dle harmonogramu plnění prací zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý den prodlení až do splnění dílčího plnění.
b) 	Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý den prodlení, nepřesáhne-li prodlení dobu 10 dnů. Přesáhne-li prodlení dobu 10 dnů, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý den prodlení až do řádného předání dokončeného díla.
c) 	Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště ve smyslu článku V. odst. 8. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10,- Kč za m2 denně až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.
d) 	Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků,  bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel  smluvní pokutu ve výši  5.000,- Kč za každý den prodlení oproti dohodnutému termínu , a to za každou vadu nebo nedodělek.
e) 	Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle článku X. odst. 5. této smlouvy, tj. do 30 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu  a den prodlení.
f) 	Neoznačí-li zhotovitel zařízení staveniště a stavbu dle článku V. odst. 15 této smlouvy, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s plněním této povinnosti.
g) 	Při prodlení objednatele s úhradou kteréhokoli daňového dokladu ve sjednané lhůtě zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení oproti splatnosti dokladu. Pokud prodlení dosáhne 10 dnů, činí smluvní pokuta 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení oproti splatnosti.
2.	Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění  smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. V., čl. VII. odst. 1, 7 a 9 a dále porušením ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši  3.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XII. této smlouvy.
3.	Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na  které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle  příslušných ustanovení smlouvy.
4.	Smluvní pokuty  sjednané  dle článku XI. této smlouvy jsou splatné do 15 kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku  a to na účet objednatele. 
5.	Ustanovením  čl. XI. o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva na náhradu škody.

XII.
Ustanovení o doručování
1.	Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník  neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.  
2.	Objednatel pro doručování stanovuje tuto adresu:  Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města prahy, Odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35, 110 00 Praha 1.
3.	Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele  uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl. 
XIII.
Ostatní ujednání
1.	Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu.
2.	Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3.	Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
4.	Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:
a)	ve věcech smluvních:  Ing. arch. Jan Winkler, ředitel OOP MHMP
b)	ve věcech technických: Ing. Jiří Karnecki, Ing. Dan Frantík
7.	Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:
a)	ve věcech smluvních: 
b)	ve věcech technických:   

XIV.
Závěrečná ustanovení
1. 	Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění  pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
2. 	Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které se stávají po jejich podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této  smlouvy.
3. 	Smlouva se vyhotovuje v šesti stejnopisech, každý stejnopis sestává bez příloh z 10. stran textu. Objednatel obdrží  čtyři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy smlouvy.
4. 	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. 	Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy. 
6. 	Přílohy smlouvy: 	1) časový harmonogram dle článku III. této smlouvy
	2) cenová nabídka (výkaz výměr) dle článku IV. této smlouvy

V Praze dne   …………….2008

.........................................
Za objednatele:	.........................................
Za zhotovitele:	
Ing. arch. Jan Winkler
ředitel odboru ochrany prostředí MHMP