Informace o pražské Ústřední čistírně odpadních vod

V prosinci 2000 byla kolaudací příslušných staveb završena  intenzifikace (etapa 1a) Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) v Praze – Tróji.
Intenzifikace ÚČOV pro hlavní město byla provedena na základě veřejné obchodní soutěže z roku 1993. Dodavatelem stavby “na klíč” byl vybrán Hydroprojekt a. s.  Od převodu infrastrukturního vodohospodářského majetku do vlastnictví hl.m.Prahy v rámci privatizačního procesu  zajišťuje od 1.4.1998 investiční činnost intenzifikace ÚČOV Pražská vodohospodářská společnost, a.s.
 
Cílem intenzifikace ÚČOV  bylo:
-	Zvýšit kapacitu biologického stupně čištění tak, aby veškeré splaškové odpadní vody byly  biologicky čištěny  (cca 1/3  odpadních vod odtékalo nedostatečně vyčištěno); 
-	Splnit nové legislativní požadavky dle Nařízení vlády č. 171/1992 Sb. na kvalitu vypouštěných odpadních vod 

Rozsah intenzifikace spočíval zejména v rozšíření biologického stupně čistírny, což zahrnovalo vybudování 4 nových dosazovacích nádrží (průměr 44 m), výstavbu nové regenerační nádrže (objem 20 000 m3) a rekonstrukci provzdušování aktivačních nádrží  

V průběhu intenzifikace (1995 – 2000) ale došlo ke snížení množství odpadních vod a tím i ke zvýšení koncentrace přitékajícího znečištění  oproti hodnotám, které byly v projektu uvažovány. A protože čistírna nebyla schopna plnit předepsané limity pro znečištění, bylo po roce zkušebního provozu požádáno o  jeho prodloužení - do září 1999, aby mohla být provedena operativní opatření, kterými se snažil investor docílit splnění povolených hodnot. Šlo zejména o zavedení fugátu do regenerační nádrže (významný intenzifikační faktor pro nitrifikaci) a realizaci chemického předsrážení (nezbytné pro snížení odtoku celkového fosforu).

Z vyhodnocení druhého roku zkušebního provozu bylo zřejmé, že ani dodatečná  opatření  nejsou (z hlediska některých sledovaných parametrů) pro zvýšený přítok znečištění dostatečná, proto byly provedeny další technické úpravy.  Zkušební provoz ÚČOV byl podruhé prodloužen do konce roku 2000.  Během zkušebního provozu vstoupilo v platnost nařízení vlády 82/99 Sb., kterým se stanoví nové hodnoty přípustného znečištění vod. V souladu s tímto nařízením požádala PVS a.s. o nové povolení k vypouštění z ÚČOV. Podmínkou tohoto rozhodnutí je zajistit nejpozději do 12/2005 splnění limitů NV 82/99 na odtoku z čistírny.

Na základě plnění  limitů znečištění, které pro čistírnu povoluje vodohospodářské rozhodnutí,  požádala PVS, a.s., o kolaudaci  staveb  intenzifikace čistírny odpadních vod v Tróji.  Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno v prosinci 2000 a jeho vydáním byly také splněny podmínky pro prominutí zaplacení tzv. odložené části poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových za dobu realizace intenzifikace ÚČOV. Celková výše odložené části poplatků činila za léta 1995 – 2000 celkem 233 mil. Kč. Tyto odložené poplatky byly v souladu s podmínkami odkladu  použity na financování intenzifikace.
 
Dosažený čisticí efekt lze ukázat např. na porovnání vypouštěného znečištění do Vltavy v letech 1995 a 2000, včetně percentuálního snížení u jednotlivých ukazatelů znečištění.

	             Kvalita odtoku do Vltavy					
Rok	                         	1995
	          2000		      Snížení		
Ukazatel 	m3/rok	m3/rok			
Průtok	184 592 892	146 116 975			
	t/rok	t/rok	t/rok	%	
BSK5 (biochem. spotřeba kyslíku)	6510	1656	4854	74,6%	
CHSKCr (chemická spotřeba kyslíku)	21478	8667	12811	59,6%	
NL (nerozpuštěné látky)	9187	3713	5474	59,6%	
N-NH4 (amoniakální dusík)	2734	1647	1087	39,8%	
Pc (fosfor)	379	255	124	32,7%	

  

Dosavadní výsledky provozování čistírny vedou k intenzivní  přípravě řešení výhledového stavu  (plnění limitů po r. 2005)  čištění odpadních vod z hl. m. Prahy. Proběhly také práce na  stanovení vývoje množství a znečištění odpadních vod v příštích letech.  
Současně se formou studií  začaly analyzovat - samozřejmě s ohledem na reálnost technických řešení a finančních nákladů - možnosti jak  nové lokalizace čistírny pro Prahu tak zásadní modernizace a rozšíření stávajícího zařízení.