Informace o postupu prací na rekonstrukci tramvajové trati Karmelitská

. Investoři rekonstrukce: Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. (vlastní
		rekonstrukce tramvajové trati)
		Technická správa komunikací hl. m. Prahy
		(rekonstrukce vozovek a chodníků)
	. Obstaravatel	
	inženýrské činnosti:	Inženýring dopravních staveb a.s. (příprava a
		technický dozor
	. Územní rozhodnutí	
	vydáno:	12/2000

	. Výběrové řízení na	
	dodavatele:	06/2001 - zvítězilo sdružení PSVS a Hans Wendel =
		nabídlo nejnižší cenu a vyhovující termíny

	. Stavební povolení	
	vydáno:	07/2001

	. Zahájení prací:	15.8.2001

	. Popis rekonstrukce:	Jedná se o rekonstrukci tramvajové tratě, vozovek a
		chodníků od křižovatky Újezd až po Malostranské
		náměstí. Současně využili výluku tramvajového
		provozu i další investoři - správci poduličních sítí, tj.
		Pražská plynárenská a.s., Pražská vodohospodářská
		společnost a.s., Pražské vodovody a kanalizace a.s.
		k obnově svých sítí a dále se provádějí vyvolané
		přeložky inženýrských sítí Telecomu a.s. a
		Ministerstva vnitra ČR
	. Etapizace prací:	V průběhu přípravy stavby bylo posuzováno více
		variant provádění, jako nejvýhodnější řešení bylo
		přijato rozhodnutí rozdělit stavbu na 2 etapy, tj.
		1. etapa - od ulice Vítězná po ulici Hellichova
		(termín 15.8. - 15.12.2001)
		2. etapa od ulice Hellichova po Malostranské nám.
		(termín 1.3. - 30.6.2002)
	. Náklady rekonstrukce	 Celkem I. etapa
	v tis. Kč:	DP Praha a.s. 170 436 82 000
		TSK hl. m. Prahy 84.190 30 250

	. Do 12.11.2001 byly	
	provedeny tyto hlavní	* zprovozněna křižovatka Újezd k 10.10.2001
	práce:	(oblouk pro směr Národní divadlo - Anděl)
		* 845 m plynovodních řadů vč. 46 ks přípojek pro
		investora Pražská plynárenská a.s. - práce byly

* 921 m vodovodních řadů vč. 30 ks přípojek pro investora Pražská vodohospodářská společnost a.s. - práce byly ukončeny 29.10.2001 (dodavatel D+Z s.r.o.)
*  opraveny různě dlouhé úseky kanalizačních řadů včetně 14 ks šachet a 24 ks uličních vpustí připojovaných až do hloubky 5,5 m pro investora Pražské vodovody a kanalizace a.s. - práce byly ukončeny 29.10.2001 (dodavatel D+Z s.r.o.)
a přeložky, které zajišt'ovalo sdružení PSVS a Hans Wendel:
*  7600 m sdělovacích, 6630 m optokabelu, 5700 m dálkových kabelů pro správce Telecom a.s.
* 3700 m kabelů pro správce Ministerstvo vnitra ČR, které byly v úseku po Karmelitskou ukončeny
k 5.11.2001 a nadále probíhají až k ul. Tržiště o nadále probíhají sanace kabelovodu Telecomu a.s., který je umístěn po celé délce stavby

Komentář k prováděné výstavbě

Vzhledem k tomu, že všechny práce první etapy probíhají ve velmi stísněném prostoru ulice Újezd v délce cca 400 m, bylo nutno poměrně složitě projednávat plán organizace výstavby, který byl nakonec všemi investory přijat. Nejdříve bylo nutno provést všechny práce správců sítí a termíny jim byly stanoveny právě plánem organizace výstavby. Poměrně značné potíže způsobily časté změny provizorních pěších cest, ty však nebylo možno řešit trvale vzhledem ke značné kumulaci příčných a podélných opakovaných výkopů jednotlivých správců sítí. Teprve po skončení prací investorů inženýrských sítí bylo možno přikročit k vlastní rekonstrukci tramvajové trati, vozovek a chodníků, postupně od křižovatky Újezd - Vítězná směrem k ulici Hellichova. Tyto práce byly zahájeny koncem října 2001 a intenzivně probíhají a jsou organizovány tak, aby byl postupně převeden pěší provoz na definitivně dokončené úseky.

K 12.11.2001 jsou provedeny tyto objemy zádlažeb:
* vozovky tramvajová trať, parkovací stání - velká žula: z celkového množství 5.520 m2 je provedeno 2.285 m2, zbývá 3.235 m2
* chodník, ostrůvky - mozaika: z celkového množství 4.170 m2 je provedeno 1.633 m2 , zbývá 2.537 m2
Zprovoznění stavby je plánováno na 15.12.2001 současně s tramvajovými úseky ul. Nádražní, Na Zlíchově, smyčka Hlubočepy.

Zpracoval: IDS a.s.