Harmonogram realizace záměru na využití usedlosti Ladronka	
1.	Technické podklady pro objekt:
1)	Mykologický průzkum
2)	Pasport pam. chráněných prvků
3)	Archeologický průzkum (1. fáze)
Z: TCP                                   T: 06/01		2.	Technické podklady pro území:
1)	Ověření souladu záměru s územním plánem
2)	Majetkoprávní stav
Z: MČ Praha 6                   T: 06/01	
					
4.	Zadání objemové studie objektu.
Z: TCP po projednání s MČ Praha 6 
                                            T: 07/01    		3.	Definice zadání studie dotčeného území (počet a druh sportovních ploch včetně cyklistických stezek a ostatních staveb).
 Z: MČ Praha 6                  T: 07/01	

5.	Zpracování objemová studie objektu včetně studie dotčeného území a dalších podkladů pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Z: TCP                                    T: 09/01		6.	Určení subjektu, který bude věcně a finančně zajišťovat provoz a údržbu sportovně rekreačních ploch.

Z: MČ Praha 6, TCP           T: 10/01	
				
7.	Vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Z: TCP                                 T: 01/02		8.	Výběr provozovatele objektu a uzavření nájemní smlouvy.
Z: TCP, MČ Praha 6         T: 01/02	
					
9.	Zpracování dokumentace pro stavební povolení.
Z :TCP                                    T: 03/02			
				
10.	Vydání stavebního povolení.
Z: TCP                                 T: 05/02			
				
11.	Výběr dodavatele stavby.
Z: TCP                                 T: 7/02			
				
12.	Vlastní realizace stavby a její kolaudace.
Z: TCP                                T: 03/03			

Komentář k vybraným bodům harmonogramu
ad 1. V současné době je zpracován mykologický průzkum a pasport památkově chráněných prvků. Pasport památkově chráněných prvků předán k posouzení Státnímu památkovému ústavu v hl. m. Praze.  Rozsah archeologického průzkumu a termín jeho provedení ve vztahu k fázi realizace rekonstrukce bude stanoven Státním památkovým ústavem v hl. m. Praze.  Standardní postup je rozdělení archeologického průzkumu do dvou fází.  První fáze (sondy, archívní průzkum) v rámci projektové přípravy pro zajištění podmínek projektu a druhá fáze při realizaci stavby s využitím prováděných zemních prací.
ad 2. Zařazení jednotlivých ploch dotčeného území dle územního plánu ovlivní významnou měrou možnost výstavby sportovně rekreačních ploch a bude sloužit jako podklad k definici zadání studie dotčeného území. 
ad 3. Součástí definice zadání studie dotčeného území bude zahrnovat i případnou účast třetích stran na projektu v souvislosti s rozvojem daného území (např. investor komerčního centra Vypich, MČ Praha 5 atd.).  Druh a množství sportovně rekreačních ploch a jejich případný další plánovaný rozvoj bude vyžadovat odpovídající zázemí v objektu.
ad 4. Definice zadání objemové studie bude ovlivněna rozsahem předpokládané výstavby sportovně rekreačních ploch vč. případného dalšího rozvoje a zajištěním restaurační a společensko kulturní funkce objektu.  Rozsah využití objektu bude limitován především požadavky orgánů památkové péče.
ad 5. Zpracování objemové studie objektu a dotčeného území včetně dalších podkladů pro vydání rozhodnutí o umístění stavby bude zadáno odborné firmě.
ad 6. Cílem projektu je finanční zajištění provozu a údržby sportovně rekreačních ploch z výnosů z pronájmu objektu.  Proto bude nutné vyjasnit vzájemné vazby a finanční toky mezi výnosy z pronájmu, poskytováním služeb pro sportovní aktivity (půjčování sportovního vybavení, poskytování šaten a hygienického zázemí) a provozováním sportovně rekreačních ploch.  
ad 7. Po vydání rozhodnutí o umístění stavby bude na základě zpracované dokumentace upřesněna celková cena rekonstrukce objektu a úpravy dotčeného území.
ad 8. Výběr provozovatele objektu musí být podmíněn dostatečnou zárukou, která bude minimalizovat riziko neplnění nebo předčasného ukončení nájemního vztahu ze strany vybraného provozovatele objektu.  
ad 9. Při zpracování dokumentace pro stavební povolení bude mít vybraný provozovatel možnost uplatnit své připomínky k projektu, a to při respektování upřesněné ceny rekonstrukce a dokumentace, na jejímž základě bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby.