Návrh staveb a akcí, kterých se má týkat zvýšení financí z městského rozpočtu

Černý Most II / 4.st.    
Na této stavbě zbývá dokončit 800 rozestavěných bytů v 8 objektech. Současná výše schváleného rozpočtu, při vysokém stupni rozestavěnosti bytových objektů, neumožňuje plynule pokračovat ve výstavbě.( 77 mil.Kč) 

Bytový dům Olštýnská
Stavební společnost HYPOBYT a.s. nabídla hl. m. Praze odkup stavebních parcel na výstavbu bytového domu se 106 byty a parkingy v Praze 8 - Bohnicích, na který tato společnost dokončila celou investorskou přípravu. V současné době se předkládá do rady ZHMP k odsouhlasení návrh na úplatný převod pozemků na HMP a na převzetí investorství bytového domu Odborem městského investora MHMP. Návrh na rozpočet stavby pro r.2000 činí 42 mil.Kč, z nichž bude spol. HYPOBYT uhrazeno 12,3 mil za pozemky a 6,0 mil.Kč za investorskou přípravu a 23,7 mil.Kč je určeno na vlastní stavební práce.

Kolektor C I, 1.- 4.et.
Kolektor je stavebně dokončen. V souvislosti se zahájením výstavby  centrálního dispečinku kolektorů (CDK) na Senovážném nám. ve III.čtvrtletí 2000 je třeba dokončit pokládku kabelových rozvodů a zajistit zprovoznění kolektoru. ( 10 mil.Kč)

Kolektor Příkopy
Stavba se nachází ve značném stupni rozestavěnosti. Ve vazbě na zasedání MMF byly v předstihu provedeny práce na  vyzbrojení kolektoru tak, aby mohly být zlikvidovány  šachty před Obecním domem a Obchodním centrem Myslbek. To vše si vyžádalo částku 85 milionů Kč, o kterou je třeba navýšit rozpočet r.2000.

Technická vybavenost Lipence
Ve III.čtvrtletí se počítá s dokončením et.0002 - komunikace II a se zahájením et.0003 - Lipany. Jde o technicky náročnou rekonstrukci komunikací  v této oblasti s nutností plynulého postupu prací v jednotlivých ulicích. V r. 2000 je nutno dokončit přípravu rekonstrukce ul. Jílovišťská. Tyto práce vyžadují posílení rozpočtu o 5 mil.Kč.

Technická vybavenost Štěrboholy
Práce na et.0004 - radiála mohly být zahájeny až po uvedení Štěrboholské radiály do provozu. V r.2000 je nutno dokončit  rekonstrukci komunikací v ul. U radiály a Nedokončená a dále dokončit celou et.0003 - komunikace I. ( 4 mil.Kč)

Technická vybavenost  Újezd nad Lesy
Ve značné rozpracovanosti jsou et.0001-přípr.území a 0006-kanalizace Ochozská, které značně zatěžují tuto oblast. Práce probíhají na vysoce frekventované Staroújezdské ul., což vyvolalo nutnost řešit situaci objízdnými trasami po technicky nevyhovujících místních komunikacích. ( 6 mil.Kč )

Technická vybavenost  Dubeč
Před dokončením je et.0001 - Dubeček jih a  et.0002 - doplnění IS. Značně jsou rozpracovány et.0003 - Dubeč střed a 0004 - Dubeč východ. Tyto etapy podmiňují další rozvoj MČ a jsou nutné pro zahájení dalších staveb  v této lokalitě (bytový dům, rekonstrukce ZŠ). ( 5 mil.Kč )

Technická vybavenost  Kbely
Značně rozpracována je et.0006-komunikace Kbely a byla zahájena celoplošná rekonstrukce  komunikací v lokalitě Nouzov-et.0007. Dokončení prací v r.2000 vyžaduje posílení rozpočtu o částku 6 mil.Kč.

Technická vybavenost Stodůlky
Po dokončení výstavby kanalizace a dalších sítí v ul. Pod viaduktem je nutno provést výstavbu komunikace v této ulici a tím umožnit přístupy k jednotlivým  nemovitostem. V roce 2000 se dále předpokládá dokončení  et.0002 - Ke  KOH-I-NOORU. ( 10 mil.Kč ) 

Kolektory Praha

Modřany - Komořany- doplnění monitoringu a rekonstrukce NN ( 3 792,5 tis. Kč )
Modřany K1, B6, B7 - doplnění monitoringu a rekonstrukce NN 2 307,5 tis. Kč ) 
Monitoring  JZM - Velká Ohrada ( 3 900 tis.Kč )

Posílení staveb, kterými se uvádí jejich technický stav na požadovanou úroveň. Bez jejich provedení nelze zajistit potřebnou kompatibilitu se systémy osazenými na dispečinku.

MČ  Březiněves 

Úprava rybníka
Nutná rekonstrukce rybníka včetně hráze v obci. Současný stav rybníka a okolí je nevyhovující. Potřeba finančních prostředků činí 3 mil.Kč.

MČ Kolovraty

ČOV a kanalizace
Jedná se o práce na dokončení staveb kanalizace, inženýrských sítí a  souvisejících povrchů v obci. ( 10 mil.Kč )

Správa služeb městské policie

Útulek pro opuštěná zvířata
Posílení stavby zajišťované hl.m.Prahou  v rámci projektu na útulek pro opuštěná zvířata. Je navrženo posílení ve výši 10 mil.Kč .

MČ Klánovice

ČOV, kanalizace, vodovod
Posílení stavby vodovodů a kanalizace v severozápadní části obce. Jedná se o území, kde je silně kontaminovaná spodní voda a voda ze studní je použitelná pouze po převaření. V této části obce je hustá zástavba rodinných domků.( 6,69 mil.Kč )

MČ Dolní Měcholupy

Odkanalizování
Jedná se o posílení výstavby 4.etapy kanalizace, která má přímou návaznost na výstavbu stoky “G6” a o vybudování definitivních povrchů po 3.etapě kanalizace. ( 12,5 mil.Kč )

MČ Uhříněves

ČOV a splašková kanalizace II. - IV. et.
Posílení  rozsáhlé stavby kanalizace v obci, která byla zahájena již v roce 1993 a u které je předpokládáno dokončení je v roce 2004. ( 7 mil.Kč ) 

MČ Nebušice  

Kanalizace a rekonstrukce vodovodu
Pro zachování plynulého pokračování stavby kanalizace a rekonstrukce vodovodu v obci se snahou jejího dokončení v nejbližších letech. ( 7 mil.Kč )

MČ Praha 9 

Odkanalizování Za Horou
Jedná se o rozestavěnou stavbu kanalizace v lokalitě Za Horou, pro jejíž úspěšné dokončení je třeba posílení o 8 mil.Kč.

MČ Praha 14 

Kanalizace Rajská zahrada
Podmínkou výstavby kanalizace Rajská zahrada je její provedení a dokončení v letošním roce, neboť na rok 2001 je plánovaná rekonstrukce komunikace organizací TSK . Proto je navrženo potřebné finanční posílení akce ve výši 5 mil.Kč. 

MČ Kbely

Úprava zeleně
Potřebné zařazení realizace akce úpravy zeleně v obci.( 5 mil.Kč )

MČ V.Chuchle

Vodovodní řady
Posílení stavby rekonstrukce vodovodních řadů v záplavovém území, kde hrozí proniknutí nebezpečných látek do stávajících řadů. ( 5 mil.Kč )

Pražská botanická zahrada

Skleníkový areál Fata Morgána
Jedná se o posílení rozpočtu stavby skleníku v areálu Pražské botanické zahrady. ( 12 mil.Kč )

ZOO

Afrikánium
Finanční posílení stavby potřebného pavilonu pro africká zvířata, jehož výstavba pokračuje nad možnosti současného rozpočtu. ( 20 mil.Kč )

Odbor městského investora MHMP

Toulcův  dvůr 
Nutné posílení pro definitivní řešení rekonstrukce stodol, tak aby nemuselo být budováno provizorium na základě statického posudku o havarijním stavu budovy. ( 800 tis. Kč ) 

Kanal. sběrač  G  (vč. G 6 )     
Jde o liniovou stavbu, zahájenou před r.1995, u které posun termínu dokončení značně zvyšuje celkové náklady. Stavba je podmiňující pro odkanalizování  přilehlých MČ ( např. Dolní  Měcholupy ). Nyní probíhá výstavba v částech umístěných ve štolách, a proto je třeba zajistit  podmínky pro plynulé pokračování prací. ( 20 mil.Kč )

Revitalizace Drahaňského potoka 
Rozpočet r.2000 ve výši 5 000,6 tis.Kč u této akce je třeba navýšit o částku za vícepráce v rozsahu 5 475 tis.Kč, aby mohly být pokryty stavební práce ve výši 10 475 tis.Kč, podle odsouhlasené smlouvy se zhotovitelem díla - a.s.Banské stavby.

KS "P" Chaby - Řeporyje - JZM 
Stavba je značně rozestavěna a má reálný předpoklad dokončení ve 12/2000. Navržené posílení ve výši 22 mil.Kč je nutné pro dokončení stavby v r.2000, a tím vytvoření základního  předpokladu pro zahájení odkanalizování MČ Řeporyje. Prodlužování  lhůty výstavby znemožňuje likvidaci značných záborů, které zhoršují životní prostředí a dopravní poměry v Řeporyjích a Stodůlkách.

Prodloužení stoky  A 2
Rada ZHMP usnesením č.0045 ze dne 18.1.2000 schválila seznam vybraných staveb, který bude uplatněn v aktualizované žádosti  hl.m.Prahy na podporu z fondu   " I S P A " na dostavbu  vodohospodářské infrastruktury v celkovém rozsahu 1,82 mld.Kč.
Jednou z vybraných staveb je i stoka A 2. V r.2000 je třeba uhradit dokumentaci k ÚR v částce 735 tis.Kč s tím, že dokumentace k SP bude uhrazena až v rámci rozpočtu na r.2001.

TV  Lysolaje 
V současné době je dokončena et.0001 - kanalizace Lysolaje a následně probíhá výstavba kanalizačních přípojek. Z důvodu havarijního stavu podél ulice byly zahájeny sanační práce, které jsou součástí technicky náročné et.0002 - kanalizace Hřebenová. Dále je nutno v maximální  míře pokračovat na et.0004 - protipovodňová opatření a následně připravit rekonstrukci stávajících komunikací, které jsou v provozně nevyhovujícím stavu. ( 10 mil.Kč )

TV  Běchovice 
Před dokončením je et. 0004 - komunikace jih - řešící plošnou rekonstrukci komunikací jižně  od Českobrodské ul. Pro zlepšení životního prostředí v této oblasti je nutno v těchto pracích pokračovat, a to i z důvodu provázanosti jednotlivých komunikací. ( 5 mil.Kč )

TV  Kunratice 
Ve značném stupni rozpracovanosti je et.0001 - kanal.splašková a dešťová v regionu 1,2 a 4. Na základě rozhodnutí o přidělení podpory ze SF ŽP formou dotace a půjčky, je nutno posílit rozpočet stavby o 9,8 mil.kč..
 
TV  Hor.Počernice 
V ul.Náchodská musí být v r.2000 dokončena kanalizace a vodovodní řad. V r.2001 bude provedena rekonstrukce komunikace, dotčená výstavbou těchto IS. Ul.Náchodská je vysoce frekventovanou komunikací, kde prodlužování výstavby značně  ztěžuje životní prostředí v celé MČ.( 15 mil.Kč )

TV  Vinoř 
 V současnosti je před dokončením et.0003 - plošná rekonstrukce komunikací v severovýchodní části MČ. Před  zahájením rekonstrukce páteřní  komunikace Mladoboleslavská je třeba provést rekonstrukci dalších komunikací, které jsou součástí et.0004 - komunikace severozápad, jejichž stav neumožňuje vést tudy objízdné trasy. ( 5 mil.Kč )

TV  Ďáblice 
V současné době probíhá výstavba inženýrských sítí ( kanalizace splašková a vodovod ). Jejich dokončení je podmiňující pro další výstavbu v centru MČ Ďáblice, a to vč. výstavby malometrážních bytů.(8 mil.Kč )

TV  Lochkov 
Kanalizace byla stavebně dokončena v r.1999 a následně byly zahájeny stavební práce na nové ČOV, která je podmiňující pro kolaudaci kanalizace. ČOV je nutno dokončit v r.2000 a následně zajistit její uvedení do provozu. V kritickém stavu jsou povrchy komunikací, a proto je třeba ještě letos zajistit projekční přípravu jejich rekonstrukce. (5 mil.Kč )

Odbor městského investora MHMP

Radlická - Strahovský tunel
Schválený rozpočet stavby na r.2000 ve výši 639 721 tis.Kč  nepokrývá předpokládaný postup prací  na západní tunelové troubě. Je proto třeba navýšit rozpočet o částku 50 mil.Kč.

Zlíchov - Radlická
Rozsah stavebních prací zařazených do programu výstavby na r.2000 představuje souhrn objektů na kritické časové ose stavby, jejíž realizace však vzhledem k jejich umístění představuje velmi významný zásah jak do veřejného provozu na uliční síť Prahy 5 ( ulice Strakonická, Na Zlíchově ), tak do dopravy ČD ( přeložka trati Smíchov - Jinonice, Smíchov - Plzeň ). Koncem r.2000 musí stavba dosáhnout následujícího stavu:
•	rozšíření vozovky Strakonická směrem k náplavce Vltavy,
•	dokončení přeložky Jinonické a Plzeňské trati,
•	realizace  prvních dilatačních celků podjezdu Na Zlíchově.
Současná výše rozpočtových výdajů 255 mil.Kč neumožní dodržet přislíbené termíny obnovení provozu na výše uvedených komunikacích, tratí ČD a vedlo by ke zvýšení nákladů stavby ( náhradní doprava MHD, dlouhodobé provozování provizorní přeložky trati ČD Praha - Plzeň, nájemné za přenosná dopravní značení a j. )
Vzhledem k uvedenému se navrhuje posílit  rozpočet stavby o  150 mil.Kč.

Technická správa komunikací

Most přes Berounku vč. rozštěpu
Aby mohla být příprava stavby zahájena ještě v letošním roce, a to  podle harmonogramu schváleného i Ředitelstvím silnic a dálnic a mohl být čerpán příspěvek ze státního rozpočtu v roce 2001 ve výši 100 mil.Kč, je nutné zvýšit finanční příspěvek hl.m.Prahy na tuto akci o 5 mil. Kč.

Kamýcká - soubor staveb - vyvolané investice
Vyvolané investice způsobené změnou projektu s požadavkem na vybudování podchodu pro chodce , který představuje zásah do poduličních sítí a potřebu 15 mil.Kč navýšení již zahájených prací.

Jižní spojka - opravy mostů - vyvolané investice
Věcně se jedná o následující opravy podjezd rampy D - 6 mil.Kč, most přes rampu A - 6 mil. Kč, podjezd ve Studeném - 6 mil.Kč. 
Tedy celkem se jedná o navýšení o 18 mil.Kč  

Radotín Třebotov
Práce související s geologickým zabezpečením akce, opěrné a zárubní zdi a navazující změny dopravních opatření představují zvýšení nákladů o 31 mil.Kč.

Dopravní podnik hl.m.Prahy

Opravy stanice metra Vyšehrad
V rámci prováděné opravy a úprav stanice metra Vyšehrad v souvislosti s přípravou jednání MMF se při odkrytí konstrukcí prokázala nezbytná potřeba financování investičních nákladů ve výši 5 mil.Kč. Věcně se jedná o rekonstrukci rozvaděčů pro osvětlení tunelů, výměn napájecích kabelů pro nouzový zdroj, výměnu el. instalace osvětlení v měnírně a distribuční transformovně, strojovně vzduchotechniky a kabelových a vzduchotechnických kanálech.  

Odbor městského investora MHMP

ZŠ Polesná 1690, MČ Újezd nad Lesy
Jedná se o rozestavěnou akci rekonstrukce a dostavby ZŠ. Posílení dotace o 10 mil.Kč je třeba pro provedení zastřešení vč. přípravy pro zimní období.

Gymnasium Jana Nerudy, Hellichova 3, Praha 1
Jedná se o pokračování likvidace dřevomorky v budově školy probíhající postupně od roku 1999 na základě statického a mykologického posudku. Sanační práce v aule je možné uskutečnit za běžného chodu školy. Navrhovaných 6 mil.Kč je určeno na sanační práce v aule školy (5,1 mil.Kč) a opravu fasády ( 0,9 mil.Kč).

Hudební škola hl.m.Prahy - půdní vestavba
Jedná se o dokončení půdní vestavby v budově školy Komenského nám. 7, Praha 3, tak aby bylo možné zahájit výuku ve všech prostorách. Z nedostatku finančních prostředků ( při vzniku nezbytných víceprací ) byly z 9 učeben vybudovány 2 učebny pouze v rozsahu základních nosných konstrukcí a přívodu topení. Chybí zde příčky vč. zvukových izolací, dveře, podlahové krytiny a stěna přístupové chodby. Potřeba posílení činí 400 tis. Kč.

Městská část Klánovice

ZŠ Slavětínská - oprava izolací suterénu
Následkem průniku podzemní vody přes stavební konstrukce došlo ke znehodnocení prostor vstupu a šaten. Pro řešení havarijní situace znemožňující užívání suterénních prostor bude třeba sanačních prací v rozsahu 2,9 mil.Kč.  

Domov důchodců Ďáblice

Penzion Střížkov - rekonstrukce schodišť a cest
V areálu penzionu Střížkov je nutné provést rekonstrukci schodišť a cest, které jsou ve velmi desolátním stavu a je nebezpečí úrazu obyvatel. Při této akci v rozsahu 5 mil.Kč budou provedeny okolní související zemní práce a odvodnění.( 5 mil.Kč )

Ústav sociální péče Terezín

Půdní vestavba
Tento ÚSP je zařízením sociální péče pro psychicky a mentálně postižené dospělé občany s kapacitou  249 míst. Protože se jedná o starší zařízení, je nutné provádět větší opravy a úpravy. Půdní vestavba řeší kompletně půdní prostory pro ubytování 40 obyvatel. Dále řeší požární bezpečnost v celém objektu, tj. požární příčky, požární vodu, instalaci evakuačních výtahů, náhradní energetický zdroj, výměnu střešní krytiny a opravu střechy. S posílením investičních výdajů ve výši 4,6 mil. Kč bude možné dokončit v tomto roce 1. etapu.

Domov důchodců Praha 8, Bohnice

Rekonstrukce spojovacích chodeb
Jedná se o prosklené spojovací chodby, které jsou ve velmi špatném stavu. Do chodeb zatéká, v zimě zde mrzne a dochází k úrazům obyvatel. Navrhuje se poskytnout investiční dotaci ve výši 5,9 mil. Kč.

 Domov důchodců Praha 8, Kobylisy

Fasáda objektu vč. zastínění oken
Fasáda objektu je ve velmi špatném stavu, opadává a kromě toho je narušena výměnou oken a různými úpravami a rekonstrukcemi, které zde byly prováděny. Je tedy třeba provést její kompletní rekonstrukci. Současně je třeba zabudovat venkovní clony před okna pokojů do ulice, kde zejména v letních měsících je velmi špatné klima a obyvatelé je velmi těžko snáší. Potřeba dokrytí činí 3,5 mil.Kč.

Ústav sociální péče Horní Maxov

Rekonstrukce budovy čp. 82
ÚSP je zařízení sociální péče pro mentálně postiženou mládež s kapacitou 70 míst. Ústav se skládá z několika budov, které se postupně rekonstruují. V současné době probíhá rekonstrukce budovy čp. 82, která je hlavní budovou ústavu. Při rekonstrukci došlo ke zborcení některých částí budovy, tudíž vznikly při stavbě některé vícepráce a k dokončení rekonstrukce je třeba ještě 2,5 mil.Kč.

Ústav sociální péče Svojšice

Oprava příjezdové cesty
Při stavbě čističky odpadních vod došlo k narušení příjezdové cesty, pod kterou jsou klenutá sklepení. Aby nedošlo ke zborcení kleneb a zavalení sklepení, je třeba tuto cestu urychleně opravit. Potřeba finančních prostředků činí 2 mil.Kč.

Domov důchodců Heřmanův Městec

Požární signalizace půdních pokojů
V loňském roce byla provedena půdní vestavba, čímž se zvýšila kapacita zařízení o 11 míst. Vzhledem k tomu, že nezbyly finanční prostředky na požadovanou požární signalizaci půdních pokojů, není u nich provedena kolaudace. Pro zavedení požární signalizace je třeba 1,8 mil.Kč.

Ústav sociální péče Leontýn

Oprava střechy, krovů a fasády 
Tato oprava hlavní budovy ÚSP probíhá již druhý rok a pro její dokončení je třeba v letošním roce ještě 1,2 mil.Kč.

Domov důchodců Praha 4 - Háje

Půdní vestavba, projektové práce
Pro zvýšení kapacity DD se uvažuje s půdní vestavbou. Náklady na projekt této akce představují 1,5 mil.Kč.

Odbor krizového řízení MHMP

Doplnění městského kamerového systému
V souladu s pozitivním hodnocením významu městského kamerového systému ( MKS ) Policií ČR - SHMP na snížení pouliční kriminality ve sledovaných místech pokračuje v letošním roce rozšiřování MKS. Z prostředků přidělených na letošní rok se část přesunula i v návaznosti na zabezpečení výročního zasedání MMF a SSB na realizaci propojení MKS se systémem TSK, DP Metro a na zlepšení zálohování snímaných údajů včetně modernizace operačních středisek v Praze 1, 3, 4, 5 a na Kongresové ul. Navrhované posílení ve výši 1,5 mil. Kč bude možné použít na rozšíření kamerových stanovišť.

Doplnění sítě varovných elektronických sirén
Výstavba elektronických sirén v roce 1999 byla zaměřena na pokrytí území hl.m.Prahy ohroženého nebezpečnými chemickými látkami. Elektronické sirény jsou umístěny přímo na objektech vyrábějících nebo skladujících tyto chemické látky ( vodárny, zimní stadiony a pod ). Po zkušenostech s informováním obyvatelstva HMP,zejména na veřejných prostranstvích o následcích úniku chemických škodlivin z mimopražských zdrojů ( např. Neratovice ) a možného ohrožení občanů na části území HMP,se navrhuje doplnit stávající varovací systém o další varovací prostředky  - elektronické sirény v počtu 6 ks. Tyto sirény budou instalovány na návětrné straně HMP od možných zdrojů ohrožení ( Neratovice ) a jedna siréna by zabezpečila pokrytí okolí zimního stadionu Štvanice, kde oproti původním předpokladům pokračuje provoz a je tedy potenciální nebezpečí úniku čpavku. Finanční potřeba činí 3,5 mil.Kč.

Městská policie hl.m.Prahy

Posílení limitu finančních prostředků na SZNR Městské policie hl.m.Prahy
Pro zkvalitnění činnosti Městské policie se navrhuje posílení limitu kapitálových výdajů na SZNR v celkové částce 10,0 mil. Kč.
Z toho na nákup výpočetní techniky, která bude využita na obměnu stávající VT nevyhovující novému program. vybavení a zabezpečení on-line komunikace v rámci celé MP cca 1,5 mil.Kč.  
Na pořízení radiostanic TETRA z důvodu zahájení zkušebního provozu nové infrastruktury MRS a plánovaného přechodu MP HMP do této infrastruktury cca 5,0 mil.Kč.
Na rozšíření systému ARBI zejména ve vozidlech MP na OŘ MP k využití současné datové základny systému  cca 3,5 mil.Kč.

Správa pražských hřbitovů

II. 	etapa hlavního vstupu do Olšanských hřbitovů - levá část
Jedná se o rekonstrukci vstupní budovy do Olšanských hřbitovů, kam bude soustředěn provozně technický úsek SPH, kancelář pro ostrahu a Městskou policii. Navrhuje se investiční příspěvek ve výši 8 mil.Kč.

Odbor městského investora MHMP

Veřejné osvětlení , drobné investiční akce
Jedná se o drobné investiční akce na celém území hl. m. Prahy, které v některých oblastech doplňují stávající, avšak  již nevyhovující osvětlení. Rozsah požadavků na r. 2000 vyvolává nutnost navýšit rozpočet stavby o 2,5 mil.Kč.

Odbor správy majetku MHMP

Dokončení rekonstrukce krematoria Strašnice
V roce 1995 byla v krematoriu Strašnice provedena rekonstrukce vnějšího opláštění budovy a střechy. Na dokončení rekonstrukce kamenného obložení stěn a dalších částí budovy, které jsou předmětem kritiky veřejnosti, chybí v rozpočtu 2,5 mil.Kč.