Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 0572 ze dne 6.5.2003

Zpráva o přípravě a realizaci protipovodňových opatření

I.	Úvod
Předkládaná zpráva hodnotí postup plnění Radou HMP schválených harmonogramů postupů přípravy a výstavby jednotlivých etap protipovodňových opatření (dále PPO) a uvádí závěry významných jednání a další skutečnosti, které souvisí s přípravou a realizací stavby.
V příloze této zprávy jsou aktualizované harmonogramy přípravy etap, které dokladují, že nejsou ohroženy předpokládané termíny zahájení jednotlivých etap stavby. 
Dále jsou přiloženy situace těch lokalit, ve kterých se navrhuje změna umístění linie protipovodňové ochrany na základě dosavadních výsledků projednání projektové dokumentace. Jedná se pouze o drobné změny, které neovlivní koncepci stavby protipovodňové ochrany.

II.	Stav přípravy a výstavby jednotlivých etap stavby
První etapa, E 0001 - Staré Město a Josefov
Stavba první etapy je dokončena. Prostřednictvím pozastávky rezervy jsou financovány zbývající práce na výměně stromů na Smetanově nábřeží.

Druhá etapa, E 0002 - Malá Strana a Kampa
Část 11 Říční ulice - Karlův most
V rámci projednávání žádosti o územní rozhodnutí vznikl požadavek odboru životního prostředí MHMP a odboru životního prostředí úřadu MČ Prahy 1 na změnu trasy linie PPO v prostoru Kampy s ohledem na potřebu ochránit památkový strom. V současné době je zajištěna upravená situace stavby PPO, doplněno projednání vyvolaných investic přeložek sítí a podána upravená žádost o územní rozhodnutí. Na základě jednání s MČ Praha 1 se vypouští realizace nájezdové rampy na Kampě v Říční ulici.
Přiložený upravený harmonogram investorské přípravy této etapy dokladuje, že touto změnou není ohrožena kritická cesta harmonogramu, tj. zpracování DSP, projednání povolení stavby a zajištění obchodní veřejné soutěže v předpokládaných termínech. Zahájení stavby v září t.r. není ohroženo. 

Část 21 Čertovka
Byly doplněny dodatečné požadavky odboru územního rozhodování MHMP k územnímu řízení a je předpoklad, že územní rozhodnutí bude vydáno v květnu t.r. Zpracování DSP a následné projednání povolení stavby, včetně zajištění obchodní veřejné soutěže, lze očekávat v termínech schváleného harmonogramu. V souladu s harmonogramem stavby se předpokládá zahájení stavebních prací na této etapě v říjnu t.r.

Část 31 Hergetova cihelna, úprava zdi
Tato část druhé etapy je dokončena, probíhá jednání o rozsahu a financování víceprací.

Část 32 Hergetova cihelna - Kosárkovo nábřeží
Stavba této části je zahájena, probíhá výstavba podzemní stěny u objektu Pražské vodohospodářské společnosti a štětovnicové stěny v parku u Mánesova mostu.

Třetí etapa E 0003 - Karlín - Libeň
Část 11 Štefánikův most - Negrelliho viadukt
Přestože nebyl odborem územního rozhodování MHMP přijat původně předpokládaný postup projednávání dokumentace pro územní rozhodnutí podle původní dokumentace zpracované na nižší úroveň ochrany, je realizován takový postup přípravy, který by neměl ohrozit předpokládané zahájení stavby v září t.r. V příloze č.1 této zprávy doložený aktualizovaný harmonogram vychází z přijatého principu projednávání územního rozhodnutí podle nově zpracované dokumentace předložené Aquatisem a.s.v dubnu t.r. 

Část 12 Rohanský ostrov - most Barikádníků
Postup přípravy probíhá v souladu s harmonogramem. Není ohroženo zahájení územního řízení v červnu t.r. 
V rámci projednávání podkladů pro územní rozhodnutí bylo jednáno o časové koordinaci navazujícího projektu River City Prague a dále o koordinaci stavby protipovodňové ochrany se současným areálem Metrostavu.
Na MHMP bylo jednáno s vlastníky pozemků dotčených plánovanou stavbou a byly projednány přísliby souhlasů těchto vlastníků.
Dále bylo prověřeno vedení trasy v oblouku linie ochrany pod Libeňským mostem a zjištěno, že větší rozsah plochy mezi linií ochrany a Vltavou je odůvodněn plánovaným biocentrem, jako závazným prvkem schváleného územního plánu HMP.
V současné době se dále zpracovává návrh provizorních technických opatření v prostoru Rohanského ostrova a Libeňského mostu pro případ příchodu další katastrofální povodně v době před dobudováním definitivní protipovodňové ochrany. Tento návrh bude předložen do konce dubna t.r. MHMP k posouzení a dalším opatřením.

Čtvrtá etapa E 0004 Holešovice - Stromovka
V souladu s harmonogramem byla v březnu t.r. odsouhlasena dokumentace pro stavební povolení, avšak pouze pro část úseku Rudolfova škola - Hlávkův most - ulice Argentinská, včetně objektů ve Stromovce a opatření na kanalizační síti. 
Pro další části etapy, kde budou nutné změny původního řešení v úseku Nová ul. Jankovcova - Holešovický přístav až ulice Za elektrárnou a dále řešení zvýšení již realizovaného úseku na Bubenském nábřeží, je předložen aktualizovaný harmonogram.
Z těchto důvodů byla tato etapa rozdělena na 3 části: 
–	část 11  Nábřeží kapitána Jaroše, Stromovka a opatření na kanalizaci,               včetně Rudolfovy štoly
–	část 12  Úpravy na Bubenském nábřeží
–	část 13  Nová ul. Jankovcova, Holešovický přístav až ul. Za elektrárnou
Výstavba těchto tří části bude realizována v souladu s harmonogramem do konce r. 2004.
Na základě zpracování tendrové dokumentace pro část 11 byla zahájena příprava veřejné obchodní soutěže tak, aby stavba této etapy mohla být zahájena v souladu s harmonogramem do konce července t.r.
Není ohroženo podání žádosti o stavební povolení a vodoprávní rozhodnutí pro tuto část 11 v květnu t.r.

Pátá etapa E 0005 Výtoň, Podolí, Smíchov
Po doplnění dodatečně požadovaných podkladů pro územní řízení lze očekávat, že územní rozhodnutí bude vydáno v květnu t.r. Termín zpracování dokumentace pro stavební povolení podle harmonogramu není ohrožen, ani následné projednání DSP a zpracování tendrové dokumentace včetně následné přípravy obchodní veřejné soutěže.
Termín zahájení výstavby v říjnu t.r. není ohrožen.

Šestá etapa E 0006 Zbraslav - Radotín
Část 11 Zbraslav
V druhé polovině dubna t.r., v souladu s harmonogramem, bude zahájeno územní řízení. V rámci projednávání DUR bylo dohodnuto rozšíření protipovodňové ochrany na budovu kamenolomu na jižní straně, na severní straně bylo řešeno ukončení linie ochrany v navázání na linii zdi zámeckého areálu.
V březnu t.r. byla posouzena možnost protipovodňové ochrany Lahovic a Lahoviček, a to na základě technické studie a ekonomického vyhodnocení. Především s ohledem na rizika spolehlivosti technického řešení protipovodňové ochrany a též s ohledem na vysoké investiční náklady nebude technická ochrana Lahovic a Lahoviček nadále sledována. 

Část 12 Radotín
Termíny přípravy stavby k zahájení podle harmonogramu nejsou ohroženy.
V rámci projednávání podkladů k územnímu rozhodnutí bylo v Radotíně navrženo rozšíření ochrany o průmyslový areál až k provozovně Staropramenu, s tím, že současně byla sjednána finanční spoluúčast ochráněných firem. S ohledem a technickou obtížnost a finanční náročnost nebude naopak chráněna oblast Rymáně. 
V Malé Chuchli se ochráněné území rozšíří o oblast jižně od Dostihové ulice, kde bude ochráněn areál jezdeckého učiliště na 20 až 50 letou vodu.
Tato část bude rozšířena i o řešení problematiky Lipenců a Dolních Černošic, kde budou navržena taková opatření, aby nedocházelo téměř dvakrát ročně k odříznutí domů od komunikací.

Sedmá etapa E 0007 Troja
Do května t.r., v souladu s harmonogramem, bude dokončeno zpracování technicko-ekonomické posouzení výhodnosti vedení linie ochrany a její úrovně. Souběžně bude zpracována technicko-ekonomická studie možnosti ochrany úseku Bubeneč-Sedlec.
Nejsou ohroženy termíny stanovené harmonogramem schváleným usnesením Rady HMP č. 0038 ze dne 21.1.2003

Příloha č. 1 - Aktualizované harmonogramy jednotlivých etap a jejich částí

Příloha č. 2 - Aktualizovaná linie protipovodňové ochrany v části Holešovického                        přístavu a části Radotína

Příloha č. 1 

Aktualizované harmonogramy 
jednotlivých etap a jejich částí

Příloha pouze v tiskové podobě

Příloha č. 2

Aktualizovaná linie 
protipovodňové ochrany 
v části Holešovického přístavu 
a části Radotína

Příloha pouze v tiskové podobě