Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 0777 ze dne 21.5.2002

Návrh harmonogramu přípravy a rozpočet na instalaci sochy Jožky Jabůrkové

Harmonogram přípravy:

Postup:                                                                    Termín do:             Provede:
Podání žádosti o stanovisko OPP MHMP              27.5.2002               ředitel SPH
Předání sochy prováděcí firmě                               27.5.2002               ředitel GHMP
Příprava sochy k instalaci                                       30.6.2002               prováděcí firma
Příprava prostoru k instalaci                                   20.7.2002               prováděcí firma
Umístění sochy                                                       20.7.2002               prováděcí firma
Slavnostní odhalení sochy                                      30.7.2002               primátor HMP

Rozpočet:
Druh akce:                                                              Termín do:             Náklady:

příprava sochy a žulového soklu
převoz sochy a soklu do prováděcí firmy              20.5.2002                 21 450,-- Kč
očištění a konzervace sochy                                  30.6.2002                 17  800,-- Kč
úprava a restaurování soklu                                   30.6.2002                   7 600,--  Kč

příprava prostoru na Olšanských hřbitovech
architektonický návrh a zaměření                           3.5.2002                    7 500,-- Kč
základy pro instalaci sochy                                   10.7.2002                  19 854,-- Kč
úpravy okolí (žulová dlažba)                                20.7.2002                  56 672,-- Kč
výkopové práce a odvoz                                       20.7.2002                  17 700,-- Kč

osazení sochy
převoz sochy a soklu na Olšany                           20.7.2002                    6 450,-- Kč
osazení sochy a soklu                                           20.7.2002                    8 200,-- Kč

technika (jeřáb)                                                                                        8 040,-- Kč
DPH 5%                                                                                                   8 563,-- Kč

C e l k e m                                                                                            179 829,-- Kč

Případné zvýšení částky na restaurování sochy
Při vyšší náročnosti prokázané v restaurátorské zprávě           max. o   12 000,-- Kč