Informace o realizaci  Koncepce Městského kamerového systému hl. m. Prahy

Pro zajištění zvýšení bezpečnosti občanů a návštěvníků hl. m. Prahy byla usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 22/13 ze dne 5. 10. 2000 schválena Koncepce Městského kamerového systému (dále jen Koncepce) jako jedno z opatření HMP na tomto úseku. Účinnost MKS dokládá i  vyhodnocení současného stavu výstavby MKS Policií ČR, kde je možné sledovat významný přínos MKS v oblasti prevence kriminality. Prostřednictvím MKS je postupně získáván nepřetržitý dohled  nad místy s vysokým nápadem trestné činnosti, zejména loupeží, kapesních krádeží, krádeží motorových vozidel, podvodné směny peněz a distribuce drog. Do monitorovaných míst lze operativně vysílat hlídky k prověřování podezřelých situací, což se projevuje ve výrazném snížení případů nedovolené činnosti. Systém se dále osvědčuje k identifikaci osob, které zanechaly na veřejných místech podezřelé předměty jako např. různé balíčky, tašky apod. Monitorovací kamery přispěly i k odhalení smyšlených trestních oznámení (zejména loupeží ), kdy při udání místa spáchání činu “poškozeným” bylo vyhodnocením záznamu zjištěno, že k žádnému trestnému jednání nedošlo. Markantním příkladem je např.  obvod MČ Prahy 1, kde je MKS nejdelší dobu v činnosti a obsahuje 18 kamer. Zde bylo za pomoci záběru z kamer zadrženo celkem 23 pachatelů. Dalším příkladem přínosu MKS je  obvod MČ Praha 3, kde tento systém  napomohl na Havlíčkově nám. k zamezení prodeje drog, na autobusovém nádraží Želivského k zamezení loupeží ze strany  Ukrajinců a v okolí nám. Jiřího z Poděbrad získání přehledu nad obchodní sítí, kde docházelo k loupežím. Dosud instalovaných kamer je rovněž využíváno k  monitorování - získání přehledu o dění v prostorech s velkým soustředěním osob, například při fotbalových utkáních.
Výstavba MKS je realizována v souladu s Koncepcí a je koordinována komisí Rady HMP pro rozvoj MKS, která stanovuje priority výstavby kamerových stanovišť na základě hodnocení bezpečnostní situace zpracovávaných Obvodními úřady městských částí HMP s místně příslušným Obvodním ředitelstvím Policie ČR a MP HMP.

Na základě  Koncepcí byl zajištěn rozvoj MKS v následujícím rozsahu :

 Realizační období 1999 - 2002

 I. a II. etapa

Tyto etapy  byly ukončeny do 30. 9. 2001. V rámci těchto etap bylo instalováno:

a) 	  5 monitorovacích středisek na :
                  -  Operačním středisku (OS) Policie ČR - Správy HMP
                  -  OS obvodních ředitelství Policie ČR (PČR) Praha 1, 3, 4, 5
b) 	44  kamerových stanovišť MKS, z toho :
                  -  18 na MČ Praha 1
                  -    3 na MČ Praha 3
                  -  10 na MČ Praha 4
                  -  13 na MČ Praha 5

	Oproti původnímu předpokladu byly instalovány v předstihu 3 kamery pro zabezpečení monitorování situace v okolí Kongresového paláce v době zasedání MMF a SB.

	c) k MKS byly připojeny výstupy :
                  - 132 kamer Dopravního podniku METRO
                  -   82 kamer Technické správy komunikací

III. etapa

V této etapě byla v souladu s Koncepcí vyhlášena obchodní veřejná soutěž na realizaci rozšíření MKS. S vítězem této soutěže- firmou KH servis, spol. s r.o. byla uzavřena dne 9. 11. 2000 smlouva o dílo DIL /8/03/000120/2000 ve finančním objemu 45 mil. Kč.

Tento finanční objem představuje ve věcném plnění výstavbu :

a) 	 9 monitorovacích pracovišť, a to na :

                 - OS Obvodních ředitelství Policie ČR Praha 2, 6 - 10,
- OS Krizového štábu HMP, Zdravotnické záchranné služby HMP, Centrálním operačním středisku MP HMP,
 
b) 	44 kamerových stanovišť,

c) 	komunikační propojení se stávajícím MKS.

Stav realizace III. etapy výstavby MKS  k 28. 2. 2001

K tomuto dni je ukončena výstavba všech šesti operačních středisek PČR městských částí Prahy a probíhá jejich připojení na optickou síť Pragonet.

Kamerová stanoviště jsou instalována :         v MČ Praha 4  -  Štúrova

                                                                    v MČ Praha 11 - Kupeckého
                                                                                               Gregorova

                                                                    v MČ Praha 6  - Vítězné nám./ Metro
                                                                                              Zikova
					                                     Metro Hradčanská / Škoda

  v MČ Praha 10 - Vršovická
						                             Uljanovská

   				       	             v MČ Praha 15 - Plk. Mráze
                                                                                                Veronské náměstí
                                                                                                 Doupovská

V roce 2000 bylo za realizaci  smlouvy DIL/8/03/000120/2000 
uhrazeno:                                                                                     
          34,597.000,- Kč        

Na tomto financování se  podílely MČ celkem:                              11,100.000,- Kč
Z toho : 

- MČ Praha  1                                                                                                200.000,- Kč
- MČ Praha  3                                                                                                500.000,- Kč
- MČ Praha  5                                                                                                700.000,- Kč
- MČ Praha  6                                                                                             3,000.000,- Kč
- MČ Praha  7                                                                                             3,500.000,- Kč
- MČ Praha 10                                                                                            1,200.000,- Kč
- MČ Praha 11                                                                                            1,000.000,- Kč
- MČ Praha 15                                                                                            1,000.000,- Kč

Dále bylo v roce 2000 uhrazeno z rozpočtu hl.m. Prahy                                                                                                     23,497.000,- Kč                                                                              

	V roce 2001 bylo vyčleněno z rozpočtu hl. m. Prahy na rozvoj MKS 50 mil. Kč.          Za splnění smlouvy DIL/8/03/000120/2000 zbývá v letošním roce uhradit 10,403.000,- Kč.            Pro zabezpečení dalšího rozvoje MKS v rámci zbývajících vyčleněných finančních prostředků jsou v současné době realizována organizační, projekční a technická opatření pro zabezpečení  výstavby 21 kamer a současně probíhají tato opatření pro zajištění výstavby dalších 10 kamer na MČ Praha 2, na jejichž výstavbu tato MČ vyčlenila 5 mil. Kč.

Závěr : 
	Rozvoj MKS je realizován v souladu s Koncepcí schválenou zastupitelstvem HMP. Výběr lokalit pro umístění kamerových stanovišť na základě doporučení PČR je konzultován s MČ hl. m. Prahy a MP HMP. Koordinace výběru lokalit pro kamerová stanoviště a stanovení  postupu prací je řízena komisí RHMP pro rozvoj MKS HMP. 
Při předpokládaném zajištění dalšího financování podle Koncepce, to je vyčlenění 44 mil. Kč v roce 2002 na výstavbu MKS a předpokládané další finanční spoluúčasti MČ, kdy např. MČ Praha 2 vyčleňuje pro rok 2001 5 mil. na rozvoj MKS, lze konstatovat, že koncem roku 2002 bude MKS tvořit vedle monitorovacích pracovišť cca 180 kamerových stanovišť, což je o 30 více než předpokládá Koncepce. MKS se stane významným nástrojem PČR a MP HMP pro zvýšení bezpečnosti občanů a návštěvníků hl. m. Prahy a zabezpečení veřejného pořádku.