Následující seznam akcí plánovaných na příští rok, by měl být ještě upraven vyškrtnutím  přivaděče pro Spalovnu Malešice a doplněn o další dvě stavby.

Stavby rozestavěné před rokem 2001 

A.vodárenské stavby
1099 ASŘ II. Etapa
Akce pokračuje z roku 2001. Práce budou i nadále zaměřeny na budování II. a  III. provozního souboru závodu Rozvod vody - PVK a.s. Firma TDC ve spolupráci PVS. a.s. zpracuje po ukončení této etapy materiál na téma přínosů investice ASŘ do vodovodní sítě.
0961 OVŘ Vnitřní, Vnější
Akce přechází z roku 2000. 
0970 OVŘ Heřmanova, Schnirchova
Akce přechází z roku 2000, kdy zahájení realizace akce je až po skončení opatření k MMF         ( konec 09/2000 ).
0056 ASŘ III. Etapa
Pokračování akce z roku 2000. Navazuje na akci ASŘ II. - realizace provozního dispečinku IV. Závodu Rozvodu vody.
0092 Zabezpečení vodárenských objektů
Ve spolupráci s PVK a.s. je pro rok 2000 vytipováno 9 vodárenských objektů na kterých bude provedeno zabezpečení.  Dále budou připravovány projekty na ostatní objekty. 

B. kanalizační stavby
2177 Sanace kanalizačního sběrače JM II
Pokračování akce z roku 2000, jedná se závěrečná měření stoky po uvedení do provozu.
0010 Rekonstrukce kanalizace Táborská II.etapa
Akce přechází z roku 2000 a navazuje na akci Táborská I. Tato akce bude probíhat souběžně s nově zahajovanou akcí  Táborská III. etapa.
0004 rekonstrukce kanalizace Koněvova
Akce přechází z roku 2000 a prolíná se s rekonstrukcí vodovodu a  akcemi jiných investorů. Vzájemná nutná koordinace těchto investorů vedla k tomu, že dokončení akce je v roce 2001.  

C. rozestavěné ÚČOV 
0174	Intenzifikace ÚČOV
Akce přechází z roku 2000. Vzhledem k novým poznatkům o přitékajícím látkovém zatížení, které se stále zvyšuje, a při snížení přitékajícího množství odpadních vod si návrh intenzifikace vyžádal jiné technické řešení, které se promítá i do roku 2001.
V rámci prodlouženého zkušebního provozu budou realizována ještě v roce 2000 tzv. krátkodobá opatření, která  zamezí denitrifikaci v dosazovacích nádržích a tím je možno snížit odtok anorganického dusíku tak, aby se neplatily poplatky za vypouštění, které jsou pro dusík nově uzákoněny od roku 2001. V letošním roce bude rovněž instalováno kontinuální měření CHSK na přítoku na ÚČOV. Prodloužení zkušebního provozu Ia etapy bude do konce roku 2001.

0013	SŘTP – etapa C elektro
Akce přechází z roku 2000 a bude realizována v původním termínu i přesto, že oproti původnímu předpokladu došlo k rozšíření stavby o měřiče výšky kalového mraku pro 4 staré dosazovací nádrže, SŘTP pro plynové hospodářství, slaboproudé rozvody pro výpočetní techniku a náhradu zastaralého řídícího systému nastavení ochran modernizovanou verzí.

0063	Zastřešení šnekové čerpárny
Zahájení stavby bylo přesunuto na rok 2001 v souvislosti s požadavkem PVK a.s. na rozšíření  stavby o dezodorizaci objektu a tím i zvýšením RN.K ukončení realizace stavby tím dojde v roce 2002.

0064	Čtvrtá kogenerační jednotka
Akce přechází z roku 2000 a i zde došlo oproti původnímu předpokladu k rozšíření stavby o úpravy na plynovém potrubí (na základě rozhodnutí ČIŽP se realizovaly čistící kusy, zvětšení profilu v části trasy a zařízení na úpravu bioplynu), o jeřábovou dráhu a montáže a dodávky stanovené dodatkem ke smlouvě s MWM DEUTZ.

0067	Rekonstrukce míchání VN
Realizace akce se posouvá do roku 2001 z důvodů zpracování variantní studie jako podkladu pro zpracování technického zadání pro výběrové řízení na dodavatele.

0068	Teplovod VN - EGC
Akce přechází z roku 2000 s tím, že  stavba teplovodu bude rozšířena o posílení kapacity stávajících výměníků pro plánovaný přechod na termofilní vyhnívání. V rámci stavby bude rovněž provedeno  posílení přívodu el.energie pro zvýšený odběr v souvislosti s mícháním VN, čerpáním atd. pro strojovnu VN – B.

0073	Silo pro vyhnilý kal – dezodorizace skládky
Akce přechází oproti původnímu termínu plánu do roku 2001 vzhledem k nutnosti zpracovat variantní studii jako podklad pro výběr způsobu skládkování vyhnilého kalu. Na základě výsledků výběrového řízení na dodavatele došlo rovněž ke zvýšení RN.

0074	Dezodorizace česlovny
Akce opět přechází z minulého roku. Zvýšení rozpočtových nákladů stavby  vzniklo rozšířením stavby o rekonstrukci manipulace s kontejnery na shrabky. V rámci stavby je počítáno i s realizací dezodorizace objektu čerpací stanice dolního horizontu.

0075	Dezodorizace objektů písku
Akce přechází z minulého roku, kdy změna rozpočtových nákladů stavby a termínu realizace vznikla rozšířením zadání stavby o pračku písku. 

0078	Rekonstrukce PČOV Čertousy
Akce beze změn (termín i RN).

0079	Rekonstrukce PČOV Vinoř
RN se nemění – úspora z roku 2000 se přesouvá do roku 2001.

0080	SŘTP se signalizací PČOV
Návrh RN zatím zůstává beze změn, termín realizace byl posunut vzhledem k posunu výběrového řízení na dodavatele stavby.

D. Systémová obnova sítí
P01 Tl. pásmo č.405 – Vypich
Zpracovává se  projektová dokumentace pro stavební povolení, včetně jeho zajištění v právní moci ( termín ze smlouvy je 02/2001). Zahájení vlastní realizace stavby je plánováno na 04/2001. Obchodní veřejná soutěž na zhotovitele jednotlivých etap by měla být vypsána ke konci roku 2000.
P02  Tl. pásmo č. 224 – Spořilov/Záběhlice
Zpracovává se projektová dokumentace včetně zajištění stavebního povolení firma D plus). Termín ze smlouvy pro zajištění vodoprávního rozhodnutí je do 12/2000, což je předpoklad pro zahájení stavebních prací již v I. čtvrtletí 2001. Obchodní veřejná soutěž na zhotovitele by měla být do konce 12/2000.
P03  Tl. pásmo č.116 – Prosek
Zpracovává se projektová dokumentace včetně zajištění stavebního povolení (firma Onegast s.r.o.) Vlastní realizace prací bude zahájena (po zajištění vodoprávního rozhodnutí v 03/2001) v průběhu 04-06/2001. Obchodní veřejná soutěž na zhotovitele bude vypsána počátkem roku 2001.
P04  Tl. pásmo č. 406 – Ruzyně
Zpracovává se projektová dokumentace včetně zajištění stavebního povolení -  firma D plus. Termín pro zajištění stavebního povolení v právní moci je 11/2000. Předpoklad zahájení stavebních prací je v I.čtvrtletí 2001. Obchodní veřejná soutěž na zhotovitele u jednotlivých etap se předpokládá do konce roku 2000.
P05  Tl. pásmo č.320  -  Hlubočepy
Zpracovává se projektová dokumentace včetně zajištění stavebního povolení do 03/2001 - firma Aquion-ing. Spilka.. Vlastní stavební činnost  bude zahájena v cca 05/2001. Předpoklad pro vypsání obchodní veřejné soutěže na zhotovitele je v prvním čtvrtletí roku 2001.
P06  Tl. pásmo 113 – Libeň
Zpracovává se projektová dokumentace včetně zajištění stavebního povolení – firma Onegast s.r.o. Vlastní realizace prací bude zahájena (po zajištění vodoprávního rozhodnutí v 03/2001) v průběhu 04-06/2001. Obchodní veřejná soutěž na zhotovitele bude vypsána v prvním čtvrtletí roku 2001.
P07  Tl. pásmo 315 – část Cibulka, Praha 5
Pokračování akce z roku 2000.
P 10  Hlubočepy, vodovod
Pokračování akce z roku 2000.
P 12  I.výtlačný Káranský řad – II. etapa ( tzv.15. a 18. Km)
Zpracovávána projektová dokumentace včetně zajištění stavební povolení. Předpoklad zahájení stavebních prací je v 06/2001.
P 13 Káranské řady – gravitace
Rozsah akce je oproti původnímu projektu větší,čímž došlo nejen ke zvýšení plánovaných rozpočtových nákladů stavby, ale i k částečnému posunu termínu realizace celé akce do roku 2001.
P 15  Praha – Karlín
Realizace dalších etap zahrnujících páteřní ulice Sokolovská, Křižíkova a příčné ulice.
Obchodní veřejnou soutěž předpokládáme vyhlásit ke konci roku 2000.
P 16 Pražská – kanalizační sběrač CXIIb
Pokračování akce z roku 2000.
P 19 Tlakové pásmo 411 – Holešovice
Pokračování z roku 2000, kdy byla zahájena první etapa. Na ní plynule navazují etapy další. Předpoklad vyhlášení obchodní veřejné soutěže na zhotovitele je v I. čtvrtletí roku 2001.
P 20 Rekonstrukce kanalizačního sběrače ”P”
Pokračování akce z roku 2000, která by měla být do konce roku ukončena.
P 21 Tlakové pásmo 306,310 - Zbraslav
Pokračování akce z roku 2000, tj. plošné obnovy vodovodních řadů v oblasti Zbraslavi.
P 22 Tlakové pásmo 233 – Podolí.
Pokračování akce z roku 2000. Vyhlášení obchodní veřejné soutěže na zhotovitele další etapy v I. čtvrtletí roku 2001.
P 23 Tlakové pásmo 231 - Vršovice
Pokračování akce z roku 2000. Vyhlášení obchodní veřejné soutěže na zhotovitele další etapy v I. čtvrtletí roku 2001.
P 24  Rekonstrukce stoky C 6
Bude ukončena etapa C 6b a vypsána výzva na zhotovitele etapy C 6c ( předpoklad I. čtvrtletí roku 2001).
P 25 Vodovody v kolektorech - výměna
Pokračování akce z roku 2000, tj. realizace akce kolektoru Ďáblice. Současně příprava pro vypsání a následnou realizaci u dalších  kolektorů.
P 26 Rekonstrukce objektů na vodovodní síti
Pokračování akce z roku 2000 s tím, že jsou připravovány další objekty do realizace.
P 27 Rekonstrukce sítí – Vinohrady I.
Pokračování akce z roku 2000, kdy po skončení I. etapy – ( Škroupovo nám.) bude následovat další tj, Vinohradská ulice.

Stavby nově zahajované v roce 2001
   
A. vodárenské stavby
0021 OVŘ Rybářská, P4
Rekonstrukce poruchového vodovodního řadu v součinnosti s rekonstrukcí kanalizace.
0100 OVŘ Butovická, P 5
Rekonstrukce silně inkrustovaného řadu z šedé litiny navazuje na probíhající rekonstrukci kanalizačního řadu a akci TSK.
1057 OVŘ Jenerálka, P 6
Tato akce se nerealizovala v předchozích letech a je žádoucí ji provést z důvodu častých poruch na řadu..
0088 OVŘ V Horkách, P 4
Akce je připravována ve spolupráci s TSK a jedná se současně i o rekonstrukci kanalizačního řadu.
0081 Přeložky Stanic katodové ochrany, P 9
Jedná se o stanice katodové ochrany řadů, které leží na cizích pozemcích a je třeba je přemístit.
0043 Přeložka VŘ v ulici V Ladech, P 11
Jedná se opět o přeložku, zde vodovodního řadu, který leží na soukromém pozemku.
0087 OVŘ Pod Petřinami, P 6
Jedná se o doplnění, resp. zokruhování řadu pro místní zásobování vodou.
0099 OVŘ Na Dlážděnce, Na Jabloňce, P 8
Nevyhovující dimenze DN 50 . Akce, kde bude opět současně prováděna rekonstrukce kanalizačního řadu a oprava komunikace.
0086 OVŘ Břehová
Akce připravovaná ve spolupráci s TSK.
0104 OVŘ Nad Zámečnicí
Poruchový řad z roku 1927 s častým výskytem poruch.Dále se jedná o zrušení jednoho souběžného řadu a provedení přepojení přípojek.
1120 OVŘ ČS Malešice – spalovna, průmyslový přivaděč, P 10
Průmyslový přivaděč je proveden z nekvalitního materiálu a při vysokých tlacích dochází k přerušování dodávek průmyslové vody do spalovny.
0096 OVŘ Horoměřická
Rekonstrukce nekapacitního vodovodního řadu, s výskytem častých poruch, zejména vlivem použití nekvalitního materiálu.

B. kanalizační stavby
0112 Rekonstrukce kanalizace Rybářská, P 4
Doplnění kanalizačního řadu realizovaného v součinnosti s rekonstrukcí vodovodního řadu.
0113 Rekonstrukce kanalizace H. Malířové, P 6
Nahrazení poruchové stoky DN 250 vedoucí pod plynovodem a soukromým objektem v ose ulice potrubím KT 300.
0011 Rekonstrukce kanalizace Táborská III. etapa, P 4
Rekonstrukce stoky nad Nuselskou radnicí bude realizována v nové trase ( mimo tramvajové těleso, které ji v současné době deformuje )
3162 rekonstrukce kanalizace U Dráhy, P 6
Akce přesunuta do realizace v  roce 2001, vzhledem k tomu, že nebylo možné v řádných termínech zajistit UR a SP.
0114  Rekonstrukce kanalizace Přístavní I. etapa, P 7
Rekonstrukce kanalizační stoky raženou štolou v obtížných geologických podmínkách, která navazuje na akci Na Maninách.
0115 Rekonstrukce kanalizace V Horkách, P 4
Akce v režii TSK, kde je souběžně s gen. rekonstrukcí vozovky prováděna rekonstrukce vodovodního i kanalizačního řadu. 
0059 Rekonstrukce kanalizace K Prádelně
Akce přesunuta do realizace v roce 2001.Na základě dodatečných požadavků správních orgánů při zajišťování územního rozhodnutí nebylo možno realizovat v roce 2000.
0116 Rekonstrukce kanalizace U Jinonického rybníčka
Akce navazuje na rekonstrukci kanalizace Butovická. Jedná se o převedení splaškových přípojek, které jsou dnes vyústěny přímo do rybníka.
0083 Rekonstrukce kanalizace Tetínská
Jedná se o přeložku kanalizačního řadu, který je dnes veden na soukromém pozemku a vlastník nesouhlasí se zřízením věcného břemene.
2127 Rekonstrukce kanalizace Na Dlážděnce, Na Jabloňce
Realizací této akce budou vyřešeny problémy s likvidací splaškových a dešťových vod v uvedených ulicích a zaústění do ulice Trojská.

C. zahajované ÚČOV 
SŘTP nadřazený systém
V rámci této investiční akce se provede nadřazený řídící systém k  již realizovaných dílčím systémů A,B,C a rozšíření o komponenty nezbytné pro modernizaci předchozích etap řízení a souběžně projektovaných intenzifikačních opatření na ÚČOV.
Rekonstrukce výtahu AB
Osobní výtah v administrativní budově neodpovídá současným předpisům a normám o bezpečnosti provozu zdvihacích zařízení.

Rekonstrukce prosklené stěny AB
Cílem stavby je odstranit stávající nedostatky, tj. deformaci ocelových rámů oken, nízké izolační vlastnosti a s nimi spojené vysoké tepelné ztráty a narušení konstrukce korozí.
Vjezdová vrata do odstředivkárny
Poškozená plechová vrata budou nahrazena vraty rolovacími tak, aby bylo umožněno funkční uzavírání objektu odstředivkárny. Důvodem investice jsou i prostorové nároky jednotlivých typů vrat a manipulace s nimi.
Rekonstrukce čerpárny zahuštěného kalu
Stavba zahrnuje výměnu stávajících odstředivých čerpadel zahuštěného kalu za vřetenová, která jsou schopna čerpat kal o vyšší sušině, včetně dobudování potřebných trubních rozvodů.
Vytápění objektů ÚČOV
Jedná se o tyto objekty:	- teplovod pro sklady
				- tepelná regulace objektů
V současné době je skladová hala vytápěna el.energií. Vzhledem k instalaci 4.kogenerační jednotky je možné tyto prostory temperovat ÚT. To znamená nutnost vybudovat nové rozvody ÚT.
Objekty ÚČOV budou vybaveny regulací umožňující na základě porovnání venkovní a vnitřní teploty ekonomickou spotřebu tepla.
Rekonstrukce objektů PČOV D.Chabry
Jedná se o tyto objekty:	- rekonstrukce přepadových hran DN
	- zakrytí rozdělovací šachty
Rekonstrukce zkorodovaných přepadových hran DN bude provedena náhradou žlabu a hran za nerezové provedení.
Stávající nevhodné zakrytí rozdělovací šachty (i z bezpečnostního hlediska) bude nahrazeno plastovým provedením.
Rolovací vrata česlovny – Miškovice
Nefunkční plechová vrata budou nahrazena vraty rolovacími i z prostorových důvodů.
Rekonstrukce objektů PČOV Kbely
Jedná se o tyto objekty:	- rolovací vrata česlovny
	- zahušťování kalu
Nefunkční plechová vrata budou nahrazena vraty rolovacími  i z prostorových důvodů.
Uskladňovací nádrže nestačí pojmout požadované množství přebytečného kalu a tím dochází ke zkrácení doby zdržení. Lepší zahuštění kalu umožní zmenšení objemu kalu a tím prodloužení doby zdržení. Nebude třeba budovat další uskladňovací nádrže.

D. Systémová obnova sítí
P 28 Soubor ulic Skalka I. II. , P 10
Nevyhovující  stav betonové kanalizace ve vytipovaných ulicích ( kamerový průzkum ) vlivem použití špatného materiálu. Současně dojde v určitých úsecích ke zvětšení profilu
P 29 Nadřazený distribuční systém
Jedná se o realizaci rekonstrukcí vodovodních řadů , které jsou nekapacitní a způsobují trvalé obtíže při dostatečném zásobování vodou v dané lokalitě. Materiálem je v těchto případech většinou ocel, která vykazuje rovněž silné známky koroze a narušení řadu.

Komentář k plánu SZNR INV 2001

Položky zařazené v plánu SZNR roku 2001 jsou rozčleněny dle jednotlivých  požadavků závodů PVK a.s.

Závod Káraný Hlavní 22 Káraný 

Hlavní čerp. pro Č. stan. Dolnolabsko, Benátky n/J požadované čerpadla budou instalována včetně montáže za stávající opotřebená čerpadla

Vývěvy pro načerpávací stanici požadované vývěvy v počtu 6ks budou pořízeny za stávající opotřebené a zastaralé. Slouží k vytváření podtlaku v potrubí .

Kompresor pro větrníkovou stanici výměna za stávající opotřebený kompresor.
Kompresor vytváří zásobu vzduch ve vyrovnávacích nádržích nutné v případě poruchy
čerpadla, které čerpá vodu na Prahu.

Hlavní čerpadlo Č.stan. Skorkov požadované čerpadlo bude instalováno za stávající
opotřebené.

Závod Podolí  Podolská 15 Praha 4 

Měření nátoku surové vody na čiřičích stávající zařízení používané pro uvedené měření obsahuje Hg rtuť, která nesmí být od začátku roku 2000 používána. Proto bude stávající zařízení nahrazeno novým měřením splňujícím normy.

Čidla ochrany výtlačných řadů požadované přístroje jsou nutné pro bezpečné řízení provozu řadů.

pH metr požadované zařízení 1ks bude instalované na odtoku odpadové vody, kontrola vody
odtékající do Vltavy.

pH metr požadované zařízení 1ks bude instalován na potrubí nátoku na filtry (stará filtrace) a bude sledovat kvalitu přitékající vody .

 pH metr požadované zařízení 1ks bude instalované na výtoku z dosedací nádrže odkud voda odtéká do nátoku surové vody. Nutné sledovat přípustné limity vracející se vody zpět do nátoku surové vody.
 
Šroubový kompresor Tamrotor   je určen pro Závod Podolí  v současné době je nedostatečná kapacita stlačeného vzduchu ve vápenném hospodářství. Požadovaný kompresor doplní potřebné množství vzduchu ve vápenném hospodářství a tím zabezpečí  správnou funkci zařízení.

Měření přítoku surové vody na přítoku do vodárny Podolí je nutné instalovat bilanční měřidla na potrubí DN 800 2ks a DN 500 1ks tento požadavek je na základě plateb za surovou vodu .

Zákaloměr na výstupu pitné vody požadovaný zákaloměr bude nainstalovaný na výstupním řadu z Podolské vodárny .Bude kontrolovat kvalitu vody, která zásobuje jednotlivé spotřebitele.

Chemické čerpadlo je požadováno nové čerpadlo za stávající nevyhovující. Slouží k odčerpávání chemických zbytků z usazovací jímky.

Dávkovač CHLORU požadovaný přístroj bude nainstalován na středisku strojovny a je požadován z důvodu změněné technologie výroby vody.

Kondenzační sušič vzduchu požadované zařízení bude zařazené do systému přípravy stlačeného vzduchu pro vápenné hospodářství a tím bude zajištěna potřebná kvalita stlačeného vzduchu.

Závod Rozvod vody Praha 3 Hradecká 1

Pásmová měřidla požadovaná měřidla jsou strojně technologická zařízení umožňující sledování průtoku vody v systému pražské vodovodní sítě na těchto lokalitách: 1.gravitace Flora-Milíčov, 2.Ládví II-pro pro Chabry, 3.Ládví II.pro staré Kobylisy, 4.AT Kobylisy 5.čerpací stanice kopanina pro Jihozápadní Město, 6. Ovčín-Slivenec 7.Vidoule-Homolka 8.Vyhlídky-Komornická DN 400 šachta v ul.Norbertov, 9.Vyhlídky-Pohořelec-2měřidla Vyhlídky, Petřín. Namontováním měřidel dojde k pravidelnému sledování průtoku toto sledování umožní získaní informace o případné poruše vodovodní sítě v dané lokalitě.

Regulační armatury je strojně technické zařízení sloužící k vyrovnávání tlakových poměrů v potrubí .Požadované regulační armatury budou instalovány : 1. Ládví II. přes redukční ventil Dolní Chabry cca DN65 pásmo č.110, 2.Flora cca DN80 pásmo113, 3.Kozinec, Běchovice DN80  pásmo127, 4.Kobylisy Davídkova cca DN65 pásmo132, 5.Flora , Jiřího z Poděbrad DN 150pásmo 148, 6.Lahovice –ul.Lahovská pásmo324.7.Vlašská 2xDN 80-100 pásmo č.418. 8.Lysolaje DN 150-100 pásmo 415.9. Nové zámecké schody pásmo 420. Montáží regulačních armatur se zajistí vyrovnávání tlakových poměrů dochází ke změnám v období min. spotřeby, zejména v nočních hodinách.

Závod ŽELIVKA

Vírový průtokoměr pořízení 4 ks nových přístrojů .Budou zajišťovat měření průtoku.

Měření koncentrace O 3 pořízení nových přístrojů.

Závod ÚČOV Praha 6 Papírenská 6

Telefonní ústředna –rozšíření stávající ústředna bude rozšířena o zařízení, které umožní větší počet telefonních linek.

Tlaková vodárna pro čerpadla vráceného kalu požadovaná vodárna je pro dopravu
vody do ucpávek a ložisek čerpadel na stř.21.

Mazací lis šnekových čerpadel pořízení nového lisu za stávající opotřebený nefunkční.

EL.motor MEIDINGER v ex.provedení pořízení nového motoru na stř. 22 kalové hospodářství.

Bojler 1600l obměna starého opotřebeného bojleru za nový na stř.26 dílny.

Míchadlo UN pořízení nového míchadla na pobočnou ČOV Nebušice.

Čerpadlo lapače písku pořízení nového čerpadla na pobočnou ČOV Březiněves.

Čerpadlo plovoucích látek pořízení nového čerpadla na pobočnou ČOV Nebušice.

Závod Stoková  Síť  Na rozhraní 1 Praha 9

Hlavní uzávěr na stoce B PN 1400/2100  stávající uzávěr není funkčně dokonalý při uzavření propouští vodu. Proto je nutné provést výměnu stávajícího uzávěru za nový, neboť uvedený uzávěr je začleněn do potipovodňové ochrany čistírny . 
 
Uzávěr nátoku proplachu v Cizineckém jedná se o dodávku nového uzávěru za starý  nefunkční.

Měření průtoku DN 400 pořízení 3ks indukčních průtokoměrů pro měření průtoku na Č.S. Modřany a Chuchle. Požadované průtokoměry budou sledovat kontinuálně čerpané množství vody.

EL.motor s řemenicí a mont.uchycením pořízení nového zařízení .

Protiproudové ohřívače teplé vody jsou pro objekt v ulici Komunardů č.nouzové 46 KAT. US. Holešovice .Požadované ohřívače teplé vody nahradí stávající technicky nezpůsobilý způsob ohřevu teplé vody v celém objektu.