Jak uvedl ředitel TSK Martin Vlk, při přípravě a realizaci investičních akcí TSK pro letošní rok se ukázala nutnost úpravy schválených finančních prostředků a případně i zařazení nově prováděných akcí. Jedná se o následující akce:
Ke snížení o 8 mil. Kč dochází na stavbě  křižovatka Přátelství – K Netlukám. Její příprava byla zastavena pro nesoulad s územním plánem. V průběhu přípravy bylo zjištěno, že Územní plán předpokládá přeložky komunikace  K Netlukám a Přátelství, křižovatka je posunuta cca o 50 m směrem k Říčanům. Vzhledem k nutným výkupům pozemků není možné dokončit přípravu a zahájit stavbu v letošním roce. 
Dále při výkupech dokončených staveb je skutečná potřeba finančních prostředků o 15 mil. Kč nižší, než předpoklad. Důvodem zdržení výkupů jsou složitá jednání s majiteli pozemků.
Na akcích sledujících zlepšení infrastruktury MHD nebude TSK čerpat 4 mil. Kč vzhledem k zásahům do soukromých pozemků vlivem rozšíření komunikace. Bude nutné územní řízení. Na stavbu Michelská - sjízdná rampa bude zapotřebí o 3 464 tis. Kč méně, protože dosud není platné stavební povolení. Občanské iniciativy, které s výstavbou nesouhlasí,  podáním námitky ve stavebním řízení pozastavily zatím možnost pokračování ve stavbě. . 
Také v případě stavby  Broumarská je přerušené stavební řízení, je nutné provést statický posudek kostela, který je cca 50 m od komunikace, a te včetně podloží kostela. Není proto reálné zahájení stavby v letošním roce. Na této akci činí snížení  8 036 tis. Kč.
Naopak ke zvýšení rozpočtovaných finančních prostředků dochází u akce Čechův most, a to o 3 mil. Kč na zajištění přípravy slavnostní výzdoby.
V případě plošné rekonstrukce v Karlíně jde o částku 30 mil. Kč. Oprava komunikací včetně chodníků zde navazuje na probíhající pokládky inženýrských sítí. Jedná se o akci, kde investorem rekonstrukcí infrastruktury je Pražská vodohospodářská společnost a současně se  na ní podílejí i další investoři (Pražská plynárenská, PRE, UPC). Komunikace a chodníky budou po pokládce inženýrských sítí provedeny v celém rozsahu. 
Také na Spořilově jde o plošnou rekonstrukci, akce má stejný charakter jako v Karlíně a   požadovaná částka je 5 500 tis. Kč.