Rada ZHMP projednala  a usnesením č. 0694 ze dne 13. 6. 2001 schválila návrh šestiletého programu výstavby domů s pečovatelskou službou (r. 2000-2005) jako komplexní  program  v rámci  hl. m. Prahy vůbec poprvé.

Obsahem uvedeného  programu  byly tyto dvě hlavní oblasti:

I .Výstavba 12 nových DPS převážně v malých městských částech, kde investorství 
   bylo uloženo OMI  MHMP a stanovení pořadí jejich realizace:

                                 DPS Kolovraty
                                 DPS Běchovice
                                 DPS Radotín 
                                 DPS H.Počernice
                                 DPS Zličín
                                 DPS Libuš
                                 DPS Praha 5
                                 DPS Praha 1
                                 DPS Dubeč
                                 DPS Kbely
                                 DPS Zbraslav
                                 DPS Kunratice

Usnesením rady ZHMP č. 0477 ze dne 20. 3. 2001 byl dán souhlas s předložením žádostí na poskytnutí dotace na výstavbu 3 dalších domů s pečovatelskou službou. Tím se zvýšil počet  výstavby na  15 nových DPS.

                                  DPS Ďáblice
                                  DPS Běchovice II
                                  DPS Čakovice

Zhodnocení plnění  k 31. 8. 2001:

1) DPS Kolovraty - zkolaudována  v 08/01
Dotace ve výši 6 mil. Kč byla poskytnuta ze Státního fondu rozvoje bydlení.
Kapacitu objektu tvoří 12 bytů vč. lodžií a 1 byt 2+1 pro správce, klubovna a prádelna. Stavba je řešena jako příčný stěnový zděný systém o dvou nadzemních podlažích bez podsklepení. Stropní konstrukce jsou ze železobetonových panelů a střešní konstrukce sedlové střechy je z dřevěného krovu na ocel. vaznici s krytinou z betonových tašek Bramag.

2) DPS Běchovice - zkolaudována v 07/01
Dotace ve výši 6,5 mil. Kč byla poskytnuta MMR ČR ze státního rozpočtu.
Objekt je situován na severní straně pozemku s odstupem od komunikace. Prostor
před objektem je využit pro parkovací stání. Je zde umístěno 13 bytů, z toho 1 pro vozíčkáře a dva byty o dvou místnostech. V přízemí je umístěna samoobslužná  jídelna cca s 32 místy u stolu s varnou, odpovídajícím zázemím kuchyně vč. sociálního příslušenství k jídelně. Z haly je vstup do knihovny a do 1. patra, které je přístupno rovněž výtahem. Součástí objektu je kancelář a prádelna se sušárnou. Oproti původnímu předpokladu nebyla realizována ordinace praktického lékaře. Místo ní byla zřízena samostatná bytová jednotka a rozšířena jídelna.

3) DPS Radotín - rozestavěná, k dokončení v  06/02
Stavba o počtu 30 bytů je rozestavěna zhotovitelem díla a.s. Metrostav a dle uzavřené smlouvy o  dílo ze dne 26. 6. 2001 má být  dokončena  v 06/02.
Dotace byla v r. 2001 poskytnuta MMR ČR ze státního rozpočtu ve výši 3 mil. Kč, zbývajících 12 mil. Kč do celkové výše 15 mil. Kč musí být uvolněno v r. 2002 před kolaudací stavby.

4) 	DPS H. Počernice - investor MČ H. Počernice, nepřipravena na zahájení,
     MČ mění lokalitu
MMR ČR potvrdilo, že počítá s celou dotací ze SR ve výši 3 mil. Kč v r. 2001. Dle sdělení starosty  rekonstrukci objektu Třebešovská  na DPS nemůže zajistit (na přání starosty vzhledem k malému rozsahu 6 bytů zůstala investorem MČ H. Počernice), protože nemá kam vystěhovat stávající obyvatele. Navrhuje proto náhradní lokalitu Ve Žlíbku, pro kterou dle názoru OMI MHMP není schopen předložit do 15. 10. potřebné doklady, požadované MMR ČR k uvolnění dotace v r. 2001  (především stavební povolení a výběr zhotovitele vč. uzavřené smlouvy o dílo). 

5) DPS Zličín - v přípravě, na zahájení v r. 2002
Zhotovitel projektové dokumentace zajišťuje dokumentaci k ÚR a následně zpracuje dokumentaci ke stavebnímu povolení. V r. 2002, kdy se předpokládá zahájení stavby, MMR ČR předpokládá uvolnění dotace ze SR.
.
6) DPS Libuš - v přípravě, na zahájení v r. 2002
Vzhledem k problémům s vlastnictvím pozemků byla na žádost starostky v srpnu změněna lokalita a OMI MHMP v září předpokládá zadání veřejné zakázky na zhotovitele dokumentace k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení. MMR ČR předpokládá pro tuto akci zahájení financování z  dotace ze SR v r. 2002.
 
7) DPS Praha 5 - nebude v nejbližším období realizována
    DPS Zvonková, P.10 - rozestavěná MČ Praha 10, k dokončení v r. 2002   
                                              investorem OMI MHMP
Dle oznámení místostarosty nebude MČ Praha 5 DPS realizovat. Hl. město Praha podniká kroky, aby byla provedena v žádostech výměna  za  DPS Zvonkovou, u které dle usn. rady ZHMP č. 1196 ze dne 24. 7. 2001 má OMI MHMP jako nový investor v letech 2001 - 2002  pokračovat ve výstavbě a zajistit její dokončení po přerušení ze strany MČ Praha 10. Financování stavby nad prostředky z dotace zajišťuje MČ Praha 10 ze svého rozpočtu převodem na OMI MHMP.

8) DPS Praha 1 - rozestavěná, k dokončení v r. 2002, investor MČ Praha 1
Vzhledem k tomu, že MČ Praha 1 musí vrátit stávající objekt DPS původnímu vlastníkovi v r. 2002, byla stavba DPS již touto MČ v r. 2001 zahájena (MČ Praha 1 náklady nad rámec dotace hradí ze svého rozpočtu a nevznikají tak žádné nároky na rozpočet hlavního města) je přednostně řešena dotace. Žádost s komplexními podklady byla předložena Státnímu fondu rozvoje bydlení dopisem OMI MHMP z 5. 6. 2001 a čeká se na předání smlouvy mezi SFRB a Hl. městem Prahou ze strany  Státního fondu rozvoje bydlení a následně ihned v plné výši uvolnění dotace ze SFRB.

9) DPS Dubeč - v přípravě, na zahájení v r. 2002  podle možností  poskytnutí 
    dotace a vlastních zdrojů hl. města
V září 2001 bude dle zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění vybrán zhotovitel projektové dokumentace  a tím budou vytvořeny předpoklady pro zahájení stavby od r. 2002.

10) DPS Kbely - v přípravě, starosta požaduje výběr zhotovitele stavby a   
      zahájení  ještě v r. 2001 (dotace se předpokládá  nejdřív v r. 2002)
Stavba má dokončenou přípravu, stavební povolení se předpokládá v 09/01.
Starosta MČ Kbely přes  pořadí schválené v rámci programu výstavby DPS (DPS    
 Kbely je až po DPS Zličín, Libuš a Dubeč) trvá na zahájení stavby ve IV. čtvrtletí    
 2001. V současné době však nejsou v rámci kapitoly 05 na zahájení potřebné   
 finanční prostředky.

11) DPS Zbraslav - příprava dokončena, předpoklad zahájení v r. 2003
Realizace stavby byla rozhodnutím rady ZHMP posunuta i když žádost o dotaci  byla předložena v r. 1999 stejně jako na již dokončené DPS Kolovraty a Běchovice.
V současné době je stavba projektově připravena a je k dispozici i stavební povolení.

12) DPS Kunratice - v přípravě, předpoklad zahájení nejdřív v r. 2003
Smlouva na zhotovení dokumentace k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení mezi Hl. m. Prahou  a Lang a Špinar, architektonický atelier ze 14. 6. 2001 zajišťuje připravenost stavby  k zahájení od r. 2002.

13) DPS Ďáblice - příprava se předpokládá v letech 2002-2003, zahájení v r. 2004
Stavba byla do žádostí o dotaci na MMR ČR předána až v prosinci 2001, z toho vyplývá i její pořadí v rámci výstavby DPS hlavním městem. V návaznosti na tyto skutečnosti bude zajišťována příprava a realizace stavby.

14) DPS Běchovice II - příprava ukončena  vč. stavebního povolení v rámci   
      dokončené  stavby DPS Běchovice I - žádost předložena v prosinci 2001        
DPS Běchovice byla investorsky a projektově připravována  jako jedna stavba.
Bohužel MČ Běchovice v době, kdy ještě dotace na DPS nevyřizoval OMI MHMP, si podala žádost o dotaci pouze na 13 bytů - tj. objekt SO 01, zkolaudovaný v červenci letošního roku. Zbývá dostavět  SO 02 (nyní nazývaný Běchovice II, na který byla žádost předložena na MMR ČR v prosinci 2001) a tím se v pořadí dostal na jedno z posledních míst.
15) DPS Čakovice - žádost předložena až v prosinci 2001, přípravu si zajišťuje 
       MČ, stavební povolení se předpokládá v I. čtvrtletí 2002, dotace nejdřív 
      v r. 2003
V současné době probíhá územní řízení, zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení bude do konce r. 2001 a stavební povolení v I.čtvrtl. 2002.
Tím by byla stavba připravena k zahájení  od r. 2002.

Z á v ě r : Výsledkem zajišťování “Programu výstavby DPS na území                      hl. města Prahy” za 1 rok je:

•	dokončení  2 DPS  ve III. čtvrtletí 2001  (Kolovraty, Běchovice)
•	rozestavění  2 DPS (Radotín, Praha 1)
•	příprava výběru zhotovitele projekt. dokumentace na  2  
DPS  (Libuš, Dubeč)
•	zahájení přípravy  2  DPS (Zličín,Kunratice)
•	dokončení přípravy 3  DPS (Kbely,Zbraslav,Běchovice II)
•	převzetí rozestavěné stavby DPS Zvonková OMI MHMP od MČ Praha 10  k dokončení v r. 2002
•	komplexní vyřizování dotací s MMR ČR a SFRB

II. Investiční náročnost  tohoto programu  dle předpokládaných investičních 
    nákladů  a zdroje financování :     

                                                                                     tis.Kč                        %

•	dotace ze SR ev.vzniklého SFRB               166 500 tis.Kč               33 %
     (500 tis.Kč/1 byt)

•	 vlastní zdroje MČ                                          58 736 tis.Kč               12 %
      
•	 vlastní zdroje  hl.m.Prahy                            278 417 tis.Kč               55 %

     _____________________________________________________________  

     C e l k e m                                                        503 653 tis.Kč              100 %

     Zhodnocení plnění k 31.8.2001:
   
a) 	Dotace poskytnutá k 31.8.2001 ze SFRB a ze SR :

•	DPS Kolovraty ( ze SFRB)                             6 000 tis.Kč
•	DPS Běchovice (ze SR)                                 6 500 tis.Kč
•	DPS Radotín ( ze SR)                                    3 000 tis.Kč
           (bude pokračovat v r.2002 do celk.výše
           15 mil.Kč)
            Mezisoučet                                                 15 500 tis.Kč

•	 DPS H.Počernice                                          3 000 tis.Kč

      MMR ČR  potvrdilo  dotaci, MČ 
      H.Počernice,která je s ohledem
      na malý rozsah (6 bytů) investorem,
      dosud nepředložila podklady OMI
      k zajištění  uvolnění dotace

      Pokud se tak nestane do 15.10.01
      OMI MHMP má dohodnuto s MMR,
      že  o  tyto 3 mil.Kč zvýší dotaci v r.
      2001 na rozest.DPS Radotín 

•	 DPS Praha 1 (bude v r.2001 ze SFRB)          6 000 tis.Kč
     žádost s kompletními podklady byla
     OMI MHMP na Fond předložena
_______________________________________________________________       
      Celkem                                                        24 500 tis.Kč

Kromě toho OMI MHMP vyřídil dotaci ze SR v r. 2000 na dokončované DPS v r. 2000, které již nebyly zahrnuty do schváleného “Programu” a to DPS Šlejnická (investor   MČ  Praha  6)  a  DPS  Nebušice  (investor  MČ  Nebušice)  v  částce  27 000 tis. Kč. Takže v r. 2000 a 2001 byly vyřízeny dotace na výstavbu DPS hl. města v celkové výši  51 500 tis. Kč.

Na  realizaci  výstavby  se  v  r. 2002  podle  stavu  projektové  přípravy předpokládá  dotace na následující DPS:

•	ze státního rozpočtu od MMR ČR na DPS Zličín a Libuš
•	ze SFRB bude OMI MHMP uplatňovat dotaci na DPS Dubeč a Kbely (event. Zbraslav) 

b) vlastní zdroje MČ
                                                                                                     tis.Kč
        
            MČ Kolovraty  zajistila  profinancování       
            projekt. dokumentace  z  rozpočtu  MČ                           1 000  
            a  v  letech  2000  a  2001 převedla do  
            rozpočtu OMI MHMP částku                                               800
            Celkem profinancováno ze zdrojů MČ                             1 800

        
            MČ Běchovice zajistila profinancování       
            projekt. dokumentace  z  rozpočtu  MČ                               948
            a  v  letech  2000  a  2001 převedla do  
            rozpočtu OMI MHMP částku                                             1 000 
        Celkem profinancováno ze zdrojů MČ                                  1 948

            Obě MČ splnily svůj závazek ze schváleného  programu

        
Závazky starostů MČ Zličín, Libuš, Dubeč, Kbely, Zbraslav a Kunratice k  převodu fin. prostředků z rozpočtu MČ na OMI MHMP se týkají r. 2001 a budou realizovány podle potřeby plateb dle uzavřených smluv na projektovou dokumentaci samostatnými předklady do RZHMP, které zpracuje OMI MHMP.

c) vlastní zdroje města
                
                 Předpokladem dotací je i uvolnění vlastních zdrojů města, což bude v r. 2002 značně náročné  na schválený rozpočet OMI MHMP v kap. 05:
                                                                                               
                                                                                       vl. zdroje města v tis. Kč

•	bude dokončovat rozestavěná DPS Radotín			30 648
•	zahájení DPS Zličín							30 000
•	zahájení DPS Libuš							30 000
•	zahájení DPS Dubeč						30 000
•	zahájení DPS Kbely							28 990
Celková potřeba fin. prostředků z rozpočtu hl. města         149 638
v r. 2002
(v této úvaze je již zahrnuta úprava rozpočtu v r. 2001, předkládaná rada ZHMP k projednání 4.9.)

Závěr: Z hlediska finančních zdrojů (dotace,rozpočet MČ a rozpočet města)  
            je schválený  “Program” plněn:

•	Dotace ze SR nebo ze SFRB v r. 2000 a 2001 byly vyřízeny odborem městského investora  MHMP v rozsahu 51 500 tis. Kč

•	MČ Kolovraty a MČ Běchovice zajistily z rozpočtu MČ schválený podíl na financování výstavby dle “Programu” a to v celkové výši 3 748 tis. Kč

•	Převod  finančních prostředků z rozpočtu MČ na přípravu staveb DPS ještě v r. 2001 se uskuteční samostatným předkladem do RZHMP a to v  návaznosti na termíny splatnosti závazků vyplývajících  ze smluv se  zhotoviteli projektové dokumentace
     
•	Pro plnění “Programu” je mimořádně důležité zajistit ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů OMI MHMP na r. 2000 částku cca 150 mil. Kč na dokončení DPS Radotín a zahájení DPS Zličín, Libuš, Dubeč a Kbely