ad I.) k příloze č.1 usnesení

Zoologické zahradě v Praze byl v rámci schváleného rozpočtu na rok 2002 přidělen příspěvek na jednotlivé investiční akce v celkové výši 46.200 tis. Kč (viz. usn. ZHMP č.36/01 ze dne 13.12.2001).
Navrhované finanční přesuny reagují na současný stav a nepředstavují navýšení přidělených investičních prostředků.
Vzhledem k situaci vzniklé po srpnové povodni, která výrazně poškodila celou spodní část areálu ZOO, je nutné přesunout převážnou část finančních prostředků na odstraňování vzniklých škod. Dále bude nutné posílit dvě akce (Rekonstrukce hlavního vstupu a Severní vstup a parkoviště Pod Hrachovkou), které již byly před dokončením a které jsou bezpodmínečně nutné pro řešení značně problematického dopravního a odbavovacího režimu ZOO. Dále povodeň vyvolala některé neplánované investice, které je potřeba zařadit k původnímu schválenému plánu investic a realizovat v  co nejkratší době (Rekonstrukce pavilonu goril, Rekonstrukce pavilonu šelem, Technické zázemí). Proto byly pro rok 2002 zastaveny veškeré projekční práce a příprava staveb nesouvisejících s odstraňováním povodňových škod.
zásobní zahrady – investice pozastavena; vzhledem k povodni bude nutné přehodnotit užívání tohoto území 
Amazonka, rekonstrukce PVP – realizace akce se po povodních jeví jako urgentní, neboť umožní relativně rychlý přesun ptáků z expozic postižených povodní do odpovídajících podmínek. V pavilonu budou přednostně umístěni ptáci, kteří jsou po povodních v současné době chováni pouze v provizorních dočasných podmínkách. 
bizoni – byly zahájeny projekční práce, ovšem návrh projektového řešení převyšoval finanční předpoklady Zoologické zahrady. Projekt byl proto zastaven a bude hledáno jiné řešení, které povede ke snížení nákladů. 
expozice severských zvířat – investice pozastavena; vzhledem k nutnosti přesunu finančních prostředků na likvidaci škod způsobených povodní
chovatelské zázemí – realizace akce se povodněmi zdržela a nestačí být dokončena v tomto roce. Objekt zároveň po povodni změnil svou náplň i naléhavost. Zázemí bude využito k přesunu kopytníků z jiné lokality v horní části areálu, která musí být uvolněna pro přesun expozice slonů ze záplavové spodní části do bezpečné horní části areálu.
Indie – investice pozastavena; vzhledem k nutnosti přesunu finančních prostředků na likvidaci škod způsobených povodní
rekonstrukce areálu Rybník – vzhledem k akutní potřebě umístit do vybudovaných objektů zvířata k zazimování, je nutné oproti původnímu plánu zrealizovat část této akce již do konce letošního roku. Území areálu Rybník se nachází v části ZOO, která byla zaplavena a zcela zničena. V tomto místě by měla vzniknout expozice tzv.Vodní svět, která bude respektovat již nově nabyté povodňové zkušenosti. Nebudou zde realizovány žádné větší objekty, celá realizace spočívá v terénních úpravách a ve vytvoření vodních ploch pro vodní ptáky a další drobné živočichy
rekonstrukce pavilonu antilop – investice pozastavena; vzhledem k nutnosti přesunu finančních prostředků na likvidaci škod způsobených povodní nebude v letošním roce realizována ani projekční příprava
laguna – investice pozastavena; vzhledem k nutnosti přesunu finančních prostředků na likvidaci škod způsobených povodní nebude v letošním roce realizována ani projekční příprava
rekonstrukce hlavního vstupu – akce byla v srpnu 2002 před dokončením; v roce 2002 byla zahájena a dokončena rekonstrukce otočky MHD. Zoologická zahrada dokončila stavbu dispečerského stanoviště a zahájila na základě výběrového řízení realizaci objektu hlavního vstupu. Cenové nabídky účastníků výběrového řízení překročily předpokládané náklady. Také se během realizace objevily nové skutečnosti, které nebylo možné zjistit průzkumem, protože se jednalo o konstrukce, které byly zakryté jinými konstrukcemi (byly to různé podzemní schozy a místnosti, které byly součástí restauračního zařízení). Také bylo nutné zřídit novou kanalizační přípojku, protože byly zjištěny vady na ležatém rozvodu. Vzhledem ke zvýšené návštěvnosti areálu vyvstala nutnost provést některé úpravy projektu, aby došlo ke komfortnějšímu a rychlejšímu odbavování návštěvníků. Do akce byly zahrnuty i náklady na pokladny a vstupní turnikety, jejichž počet se zvýšil.
SZNR – výše příspěvku se nemění
Jižní Amerika – investice pozastavena; vzhledem k nutnosti přesunu finančních prostředků na likvidaci škod způsobených povodní nebude v letošním roce realizována ani projekční příprava
rekonstrukce rozvodů inženýrských sítí - při povodni došlo v některých částech k poruchám na vodovodních a kanalizačních řadech. Dále byly porušeny elektrorozvody včetně skříní RIS, zatopeny a porušeny trafostanice, došlo k zatopení vrtů atd.. Některé rozvody v areálu ZOO jsou až 70 let staré, proto je nutné provést jejich rekonstrukci a přípravu pro další stavební rozvoj zahrady.
severní vstup a parkoviště – akce byla v srpnu 2002 před dokončením. Realizace parkoviště se z důvodu povodní posunula, ale je bezpodmínečně nutné ji dokončit v letošním roce, mimo jiné i vzhledem k tomu, že po povodni jsou mimo provoz obě stálá parkoviště u Vltavy. Projekt severního vstupu byl původně koncipován jako záložní vstup do ZOO při návštěvnických kalamitách, ale vzhledem ke kalamitním situacím, které vznikaly v minulých letech při stále se zvyšující návštěvnosti zejména v jarních a letních měsících, bylo nutné projekt upravit tak, aby došlo ke zvýšení propustnosti návštěvníků. Došlo k navýšení počtu míst pokladen, počtu turniketů a zvýšení plochy pro shromažďování hromadných školních výprav, aby byla  zajištěna dostatečná bezpečnost návštěvníků, neboť severní vstup přímo navazuje na komunikaci Pod Hrachovkou.
stánek občerstvení Mléčný bufet - investice pozastavena; vzhledem k nutnosti přesunu finančních prostředků na likvidaci škod způsobených povodní 
Doplněné akce, které vznikly po povodních v srpnu 2002:
Rekonstrukce pavilonu goril -  pavilon byl při povodních zcela zatopen až do výšky cca 10 metrů. Pavilon, jehož výstavba byla ukončena v loňském roce je značně poškozen - veškeré instalace, včetně hydraulických zařízení střechy, vnitřní dveře atd. byly zničeny. V letošním roce je proto nutné připravit projekční návrh rekonstrukce objektu.
Rekonstrukce pavilonu šelem - pavilon byl při povodních zcela zatopen až do výšky cca 10 metrů a je značně poškozen - veškeré instalace, včetně hydraulických zařízení střechy, vnitřní dveře atd. byly zničeny. V letošním roce je proto nutné připravit projekční návrh rekonstrukce objektu.
Technické zázemí - povodeň zničila celé zázemí stavebního a provozně-technického úseku. Zničena byla pracoviště údržby, stavebního oddělení, garáže, dílny, archiv projektů, sklady, kanceláře pracovníků těchto úseků. V letošním roce je proto nutné připravit projekční návrh nového technického zázemí kompletně přemístěného do bezpečné horní části areálu ZOO k další části provozního zázemí a obě stávající dříve oddělená zázemí tak spojit v jediný provozní celek.
ad II.)
Generel výstavby a rozvoje ZOO Praha  – aktualizace a odhad nákladů po povodni v srpnu 2002

Povodeň ze srpna 2002 ničivě zasáhla celou spodní část areálu ZOO Praha. Kromě obrovských materiálních škod na téměř veškerém majetku v dolní části areálu ZOO (s výjimkou hlavního vchodu, restaurace Archa, papouščích voliér a velké voliéry dravců byly vodou zasaženy všechny objekty v dolní části ZOO) vyvolaly zkušenosti z povodně potřebu změnit urbanistický plán ZOO Praha. Tyto změny by měly v budoucnu zaručit, aby se jednak neopakovaly komplikace s neevakuovatelnými zvířaty, jednak eliminovaly materiální škody v případě další povodně.

Základní obnova povodní postižené části ZOO je naplánována na 3 roky. Náklady na obnovu jsou v následujícím textu rozděleny do několika skupin a do harmonogramu pro nejbližší kalendářní roky. “Generel výstavby a rozvoje Zoologické zahrady v Praze” byl vypracován architektonickým atelierem AND spol. s r.o. v roce 1997 a odsouhlasen RZHMP v březnu 1998 (viz. usnesení RZHMP č.252 ze dne 24.3.1998). Podle tohoto Generelu se řídily všechny krátkodobé i dlouhodobé plány kapitálových výdajů ZOO Praha od roku 1998 dodnes. 

A) Do srpna 2002 byly konkrétně podle původního generelu vybudovány nebo zrekonstruovány následující objekty):
-	v horní části Zoo:
I.	           Africký dům s tzv. severními výběhy
II.	expozice jelenů 
III.	expozice nosálů
IV.	centrální seník 
V.	centrální hnojiště 
VI.	2x WC
VII.	severní vchod pro návštěvníky
VIII.	rekonstrukce skladů krmiv 
IX.	rekonstrukce areálu medvědů
X.	expozice vlků
-	v dolní části Zoo:
I. 	pavilon goril 
II.	pavilon velkých želv
III.	expozice lemurů
IV.	expozice magotů a paovcí
V.	expozice velkých papoušků 
VI.	dětský areál
VII.	rekonstrukce hlavního vchodu a východu
B)  Náklady na obnovu dolní části areálu ZOO lze rozdělit do několika skupin):
								          (odhad nákladů v mil.Kč)
-	nezbytné investice:
I.	           inženýrské sítě + vrty					15
II.	komunikace						  5
III.	zeleň							  5
-	rekonstrukce pavilonů:
I.	           pavilon goril						15
II.	pavilon kočkovitých šelem				15
III.	Bechyňův pavilon ptáků				10
-	nové projekty v dolní části ZOO:
I.	          rybníky včetně chovného zázemí (vodní svět)		30
II.	opičí ostrovy						15
III.	expozice laguna					  5
IV.	expozice gepardů					  5
V.	kontaktní ZOO					  5
VI.	dětský areál						  5
VII.	parkoviště						  5
VIII.	restaurace					privátní zdroje
IX.	občerstvovací stánek s WC				  5
-	přesuny do bezpečných částí ZOO:
I.	           pavilon slonů						70
II.	pavilon hrochů					30
III.	karanténa						10
IV.	technické a zahradnické zázemí			40
V.	zázemí výchovně vzdělávacích činností		  5

C) Náklady na realizaci Generelu v horní části areálu ZOO - projekty plánované před srpnem 2002:
							(odhad nákladů v mil.Kč)

I.	           chovatelské zázemí Afrického domu – 2 stáje	20
II.	Jižní Amerika						15
III.	sobi + losi						  5
IV.	levharti						10
V.	antilopy (rekonstrukce)				10
VI.	kuní stezka						10
VII.	velké voliéry						10
VIII.	2x občerstvení						10
IX.	rekonstrukce Statku					15

     V současné době jsou rozestavěné 3 investiční akce):
I.	           pavilon indonéské džungle (investorem je OMI HMP)
II.	rekonstrukce hlavního vchodu
III.	severní vstup a záložní parkoviště

D) Harmonogram realizace aktualizovaného Generelu:
(odhad nákladů v mil.Kč)
-	rok 2002:
  I.	 	inženýrské sítě, vrty (část)				   5
  II.		rekonstrukce areálu Rybník – vodní svět (část)	   5
  III.	severní vstup a záložního parkoviště	(dokončení)	   5
  IV.	chovatelské zázemí Afrického domu – 1. stáj	 10
  V.	Bechyňův pavilon ptáků				 10
náklady v roce 2002 celkem:		 35

-	rok 2003:
  I.		rekonstrukce pavilonu goril				15
  II.		rekonstrukce pavilonu šelem				15
  III.	inženýrské sítě, vrty (dokončení)			10
  IV.	komunikace 						  5
  V.	rekonstrukce zeleně					  5
  VI.	rek.areálu Rybník - vodní svět (část)			10
  VII.	technické a zahradnické zázemí (část)		20
  VIII.	dětský areál						  5
  IX.	zázemí výchovně vzdělávacích činností		  5
náklady v roce 2003 celkem	:		90

-	rok 2004:
  I.		pavilon slonů	(část)					25
  II.		technické a zahradnické zázemí (dokončení)		20
  III.	rek. areálu Rybník - vodní svět (část)			  5
  IV.	opičí ostrovy	(část)					  5
  V.	pavilon hrochů (část)					10
  VI.	občerstvení + WC					  5
  VII.	kontaktní expozice					  5
  VIII.	parkoviště						  5
  IX.	karanténa						10
náklady v roce 2004 celkem:		90

-	po roce 2004:
  I.		pavilon slonů (dokončení)				45
  II.		rek. areálu Rybník - vodní svět (dokončení)		10
  III.	opičí ostrovy (dokončení)				10
  IV.	pavilon hrochů (dokončení)				20
  V.	chovatelské zázemí Afrického domu – 2.stáj		10
  VI.	Jižní Amerika						15
  VII.	sobi + losi						  5
  VIII.	levharti						10
  IX.	gepardi						  5
  X.	rekonstrukce pavilonu antilop			10
  XI.	rekonstrukce Statku					15
  XII.	laguna							  5
  XIII.	kuní stezka						10
  XIV.	velké voliéry						10
  XV.	2x občerstvení (Černohouska + Afrika)		10
náklady po roce 2004 celkem:	          190

Zdroje:
Při plánování krytí výše uvedených nákladů se nepočítá s navyšováním dosavadní úrovně investiční dotace ze strany MHMP, která již několik let byla ve výši 40-50 mil.Kč ročně. Zbytek potřebných nákladů se předpokládá krýt ze zdrojů, které vyplynou z jednání o pojistném plnění škod způsobených povodní. ZOO Praha byla proti povodni částečně pojištěna u spol. Kooperativa a jednání o výši pojistného plnění probíhají. Je předpoklad, že tato částečná pojistka pomůže výše uvedený plán realizovat. Další zdroje na investiční činnost získává ZOO Praha intenzivními jednáními s dárci a sponzory ze strany veřejnosti. Vzhledem k tomu, že jen za jeden měsíc po povodni bylo na účet pro dary ZOO Praha vybráno více než  8 mil. Kč, je podpora investičního plánu ZOO Praha těmito zdroji rovněž reálná.