Stavba 0075 MO Zlíchov Radlická, omezení dopravy v ul. Strakonická, 

	V souvislosti s plněním nastaveného programu stavby v r. 2001 vyžaduje realizace této akce zprovoznit v termínu 08/2001 všechny jízdní pruhy dopravního směru z centra v ul. Strakonické na nově vybudovanou vozovku a novou rampu – tzv. rampu „B„ tak, aby provoz byl již veden v definitivním v prostorovém uspořádání této části budoucího městského okruhu. Pro dosažení tohoto stavu bude nutno realizovat tři předcházející fáze, jejichž principem budou následující stavy :
B.	Likvidace středového pasu v místě před spojením okruhu z Barrandovského mostu a pobřežní komunikace Strakonické. Fáze označená v dokumentaci „L0„.
C.	Zhotovení vozovky za opěrnou zdí na náplavce Vltavy. Fáze označená „L„.
D.	Převedení provozu za zeď na náplavce Vltavy, uvolnění prostoru podél západního okraje Strakonické, tj budoucí větve B a realizace vozovky větve B – tj. tedy dosažení cílového stavu v 08/2001. Fáze zatím neoznačená.

Předmětem současných dopravních omezení  jsou pouze  etapy ad A a B, fáze ad C není zatím přesně termínově fixována a bude stanovena  až  v průběhu 05/2001. 

Označení fáze	Popis prací v průběhu omezení.	Termín zah. a dokončení.	Ostatní údaje	
L0	Likvidace středového dělicího pásu v délce 120 m, provedení jeho asfaltové úpravy.	16.4.– 30.4.2001	Zhotovitel : SSŽ a.s., zodpov. pracovník stav. Kolařík tel. 0602 204 268
Stavebník : OMI MHMP zast. společností VIS a.s. zodp. pracovník Ing. Tichý tel.0606 616 646
Zásah do MHD : není žádný, směr do centra zůstává dvoupruhový na úkor stávajícího zašrafovaného klínu.	
L	Realizace vozovky budoucího dopravního okruhu a části větve A v místech za opěrnou zdí na náplavce Vltavy.	30.4.- 22.6.2001	Zhotovitel : dtto
Stavebník : dtto
Zásah do MHD : zkrácení délky samostatného pruhu BUS o 150 m.